문서번호	토목부-23510
결재일자	2014.11.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장

- 선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사 -

볼라드 수량변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.11.

도시기반시설본부

(토 목 부)

- 선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사 -

볼라드 수량변경 검토보고

그린파킹사업과 연계된 주택담장 허물기 사업이 활성화되고, 차량출입 통제를 위한 볼라드 설치를 강동구에서 추가 요청하고 있어 수량변경에 대한 검토 보고임

공사개요

○ 위    치 : 강동구 암사동 440-1 ~ 고덕동 165-11(아리수로)

○ 사업규모 : 아리수로 도로확장 3.7km, 폭 2차로 → 4, 6차로

○ 사업기간 : 2009. 1. 6. ~ 2014.12.31.

○ 총사업비 : 115,048백만원 (도급액 : 35,444백만원)

○ 시 공 사 : ㈜대저건설외 1사

○ 감 리 사 : ㈜한국관리공사

추진경위

○ 2013. 4.18. : 주택가측 차량진출입시설 및 볼라드 설치계획 협의 요청

○ 2013. 4.22. : 현장합동조사

○ 2013. 5.16. : 차량 진출입부 주변 볼라드 설치 개선방안 보고

○ 2013. 5.16. ～17. : 볼라드설치 관련 협의 및 관련지침 수령

○ 2013. 5.21. : 볼라드 설치계획 강동구청과 협의결과 이첩 통보(선사고덕 0420-195)

○ 2013. 6.18. : 보도시공방안 통보(SMIH-13-06259)

보고내용

○ 보도내 차량출입 통제를 위해 볼라드 설치가 설계에 반영되어 있으나, 단독 주택지와 연접하여 이면도로와 주택지 진‧출입로가 많은데도 주변 여건에 대한 고려없이 반영되어 강동구에서 볼라드 추가 설치를 요청함.

○ 강동구에서 공사구간 불법주정차 강력단속과 그린파킹사업과 연계된 주택담장 허물기사업이 활성화되어 주택내 주차장 다수 발생되어 수량 증가 원인이 됨.

※ 볼라드 설치 현황(당초 321개 ➜ 변경 743개, 증 422개)

구 분		단위	수 량			비 고
			계	주택가	산지측
볼라드 설치 위치	이면도로/볼라드	개소/EA	41/320	23/168	18/152	구청요구
	차량 진출입로/볼라드	개소/EA	77/389	77/389	-/-
	교통섬/볼라드	개소/EA	6/34	3/16	3/18
합 계		개소/EA	124/743	103/573	21/170

공사비 증·감 내역

(단위:천원)

구 분	단위	당 초		변 경		증·감	비고
		단가	금액	단가	금액
직접공사비	1식		111,814		263,750	증) 151,936
제 잡 비	1식		6,186		15,250	증) 9,064
공사원가	1식		118,000		279,000	증) 61,000
부가가치세	1식		11,800		27,900	증) 16,100
도급공사비	1식		129,800		306,900	증) 177,100
관급자재대	1식		-1,602		1,280	증) 2,882
총공사비	1식		128,198		308,180	증) 179,982

감리단 검토의견

○ 2013년 보도블록 시공 전 볼라드의 설치 시설기준에 맞게 구체적 설치 방안에 대하여 발주처 및 유지관리부서인 강동구청과 수차례 협의 완료 후 볼라드를 기설치하였고, 현장 전 구간에 대하여 협의내용에 따라 볼라드를 추가로 시공하고자 실정보고 하는 사항임.

○ 「교통약자의 이동편의 증진법」제21조 및 시행규칙 제9조[별표2] ‘보행안전시설물의 구조 시설기준’의 볼라드 설치에 대한 기준 및 2014년 8월 알림사항으로 공지된 ‘서울시 보도위 시설물 설계 및 관리기준’에 부합되도록 계획되었음.

○ 도로 우측이 단독주택지와 연접하여 이면도로와 주택지 진‧출입로가 많으나, 당초 설계에 볼라드 설치수량이 주변실정을 반영하지 못하였으며, 실정보고 서류 검토결과 내역서, 수량산출서, 도면(시공상세도) 등이 설계도서 작성 제반기준에 맞게 작성되었음.

조치계획

○ 강동구 요구와 주택가 담장 허물기 사업에 따른 각 세대별 주차장 확보 증가에 따른 볼라드 수량증가에 대하여 감리단 의견과 같이 승인하고 추후 설계변경심의소위원회 심의결과에 따라 설계변경에 반영하고자 함.

- 추가 공사비 : 179,982천원

붙 임 : 감리 검토의견서 1부.  끝.