문서번호	토목부-546
결재일자	2015.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장

- 선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사 -

자가망 광케이블 이설공사 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1.

도시기반시설본부

(토 목 부)

- 선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사 -

자가망 광케이블 이설공사 검토 보고

암사 아리수정수센터 후문 진입도로에 매설되어 있는 아리수정수센터용 자가망 광케이블이 도로확장으로 노출되어 이설을 위해 협의한 바 원인자부담으로 이설토록 협의되어 이설 공사비를 반영하기 위한 검토 보고임.

공사개요

○ 위    치 : 강동구 암사동 440-1 ~ 고덕동 165-11(아리수로)

○ 사업규모 : 아리수로 확장 폭 2차로 → 4 ~ 6차로, 연장 3.72km,

○ 사업기간 : 2009. 1. 6. ~ 2015.12.31.

○ 총사업비 : 146,077백만원 (도급액 : 35,444백만원)

○ 시 공 사 : ㈜대저건설외 1사

○ 감 리 사 : 한국건설관리공사외 1사

자가망 광케이블 이설 개요

○ 토공굴착 197m, FC통신관 포설(100㎜) 197m, PE내관 포설(28㎜×4) 788m

추진경위

○ 2014.10.10. : 광케이블 이설 협의(본부 → 상수도사업본부)

보고내용

○ 실정보고 이유

- 암사 아리수정수센터 후문 진입도로에 매설되어 있는 아리수정수센터용 자가망 광케이블이 도로확장으로 인하여 노출됨에 따라 이설이 필요하여 협의결과 원인자부담으로 이설토록 협의되어 이설 공사비 반영을 위한 실정보고임.

※ 광케이블 이설을 위해 상수도사업본부(전산정보과) 협의결과 이설에 따른 굴착 및 케이블설치 공사는 별도로 년간단가 업체가 없어 이설이 어렵다는 내용(구두)이 통보됨.

○ 이설공사비 견적 금액

(단위:천원)

공 종	견적서			적용방안	비고
	A사	B사	C사
이설공사비	26,181	28,545	31,272	(부가새 별도)
협의율 적용 (90.57%)	23,712	25,853	28,323	A사 견적금액 적용

공사비 및 사업비 증·감 내역

○ 공사비 증·감 내역

(단위 : 천원)

구 분	단위	당 초	변 경	증·감	비 고
직접공사비	1식	-	23,712	증)23,712
제 잡 비	1식	-	1,288	증)1,288
공사원가	1식	-	25,000	증)25,000
부가가치세	1식	-	2,500	증)2,500
도급공사비	1식	-	27,500	증)27,500

감리단 검토의견

○ 암사정수장 후문 진입도로 밑에 매설되어 있는 자가망 광케이블이 도로확장공사로 인해 노출됨에 따라 이설공사비를 설계변경 반영을 위한 실정보고 사항으로

○ 광케이블 이설 전문기관의 견적서 비교 검토결과 최저 금액으로 제시한 A업체로 적용하였음.

※ ｢공사계약일반조건｣ Ⅵ.공사설계의 변경 3. 현장상태에 따른 설계변경 및 5.발주기관의 필요에 의한 설계변경을 근거로 설계변경을 시행함이 타당할 것으로 판단됨.

조치계획

○ 암사 아리수정수센터용 자가망 광케이블 이설에 대하여는  감리단 의견과 같이 승인하고 추후 증액되는 공사비에 대하여는 설계변경에 반영하고자 함.

- 추가 공사비 : 27,500천원

붙 임 : 감리 검토의견서 1부.  끝.