문서번호	총무과-14276
결재일자	2015.9.15.
공개여부	비공개
방침번호

				시 민
주무관	총무과장	관리부장		서울대공원장
협 조
	시설과장

- 시민과 함께 만드는 생태문화공원 조성 -

자원봉사스테이션 다목적 소통공간 조성공사 추진 계획

서 울 대 공 원

(총무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

-  시민과 함께 만드는 생태문화공원 조성 -

자원봉사스테이션 다목적 소통공간 조성 공사 계획

자원봉사스테이션 건물내 유휴공간을 자원봉사 활동 프로그램 토론 · 소그룹 미팅 ·     휴게공간 및 민관협력사업의 성공적인 추진을 위한 회의·  전시공간 등 다목적 소통

공간으로 조성하고자 함

Ⅰ		건물 현황

□ 자원봉사스테이션 개요

❍ 위치 : 동물원내 반도지 위

❍ 건물 현황

- 자원봉사스테이션 (2013. 3. 13 개관)

· 사무실 : 126㎡(사무 · 회의공간, 탈의실, 창고 등)

· 교육실 : 70㎡ (45석)

- 유휴공간(소통공간) : 138㎡

※ 기존의 산림전시관이 식물표본전시실로 통합 이전(’14.12월)되어 유휴공간으로 관리

❍ 건물외부 모습

자원봉사스테이션	(유휴공간)	교육실

❍ 평면도

(유휴공간)

Ⅱ		소통공간 조성 공사계획

□ 추진방향

❍ 자원봉사 활동 활성화를 위한 토론, 소그룹 미팅, 휴게공간

❍ 민관협력사업 성공적 추진을 위한 미팅 및 회의공간

❍ 자원봉사자 및 기업체· 단체 등 대공원 협력 커뮤니티 허브공간으로 사용할         수 있도록 편안한 까페같은 공간으로 조성

□ 공사개요

❍ 공사기간  : 2015. 10월 ~ 11월

❍ 장소(위치) : 자원봉사스테이션 건물내 유휴공간

❍ 면적 : 138㎡

❍ 공사내용

- 가설· 바닥 · 벽체 · 천정 공사

- 전기시설 및 레일 등 설치 공사

- 냉난방 시설 · 수도 등 설비 공사

- 음향 · 영상 시설 공사

❍ 소통공간 디자인(안)

공 사 전(유휴공간)	공 사 후(다목적 소통공간)

❍ 소요예산 : 50,000천원

- 건축공사 : 22,000천원

- 전기공사 : 10,000천원

- 기계·설비 공사 : 10,000천원

- 음향 · 영상시설 설치 공사 : 8,000천원

※ 인테리어 및 가구제작은 별도 계획으로 추진

- 예산과목 : 공원이용만족도 향상, 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전,

공원 안전시설 보수 및 정비, 시설비

❍ 공사시행 : 시설과 (시설비 예산 협조)

□ 추진일정(안)

❍ 공사 의뢰(총무과 → 시설과) : 2015. 9. 15

❍ 공사기간 : 2015. 10월 ~ 11월

❍ 시설개관 : 2015. 12월초

Ⅳ		행정사항

❍ 다목적 소통공간 조성 공사 예산협조 및 공사 시행 : 시설과

❍ 시설 운영 체계 확립 및 시설물 관리 운영 : 총무과

- 시설운영 인력 활용방안 및 이용자 관리 등