문서번호	방재시설부-9287
결재일자	2019.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
협조	조경시설과장
	주무관

- 신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사(T/K) -

계약금액조정(총차, 5차 , 6차), 총차 준공기한 연장 및 7차 공사 발주 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

- 신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사(T/K) -

계약금액조정(총차, 5차 , 6차), 총차 준공기한 연장 및 7차 공사 발주 계획 보고

추가공사(잔류수 배제펌프 용량 증대, 카-리프트 설치 등) 반영 및 차수분 공사범위 조정에  따른 계약금액조정(총차, 5차, 6차)과 총차분(폐기물포함) 준공기한 연장, 7차 공사분 발주계획 검토 보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 수성신월 제19-444(2019.6.25.) : 전체준공기한연기와 계약금액조정(전체, 5차, 6차)         및 7차공사 발주 설계서 제출, 수성신월 제19-445(2019.6.26.) 폐기물 준공기한요청

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 양천구 가로공원로~ 신월동 ~ 목동유수지

○ 공사규모 : 저류배수터널 4.7km, 정류지 3개소 및 수직구 6개소,

펌프장 및 체험관 건립, 기타 조경공사 등

○ 공사기간 : 2013. 05. 27 ~ 2019. 06. 30

○ 계약 금액 : 106,559,000,000원

○ 차수별 공사현황

구 분	공사개요	공사비	공사기간	비고
총 차	ㆍ저류터널 D=10m, L=3.6km ㆍ유도터널 D=5.5m, L=1.1km ㆍ수직구(6개소), CSOs, 펌프장 및 체험관건립	106,559	‘13.05.27~ ’19.06.30
1 차 (우선시공)	ㆍ유출 및 유지관리 수직구 ㆍ유수지 가물막이 및 기타	1,786	‘13.05.27~ ‘13.11.22
2 차	ㆍ저류터널 D=10m, L=695m ㆍ유도터널 D=5.5m, L=110m ㆍ수직구(6개소) 및 기타	18,604	‘15.01.01~ ‘15.12.31
3 차	ㆍ저류터널 D=10m, L=2,287m ㆍ저지유도터널 D=5.5m, L=665m ㆍ고지유도터널 D=5.5m, L=212m	26,572	'16.01.21~ '16.12.21
4 차	ㆍ저류터널 D=10m, L=531.1m(라이닝) ㆍ유도터널 D=5.5m, L=1,065.2m	24,855	'16.12.27~ '18.02.02
5 차	ㆍ저류터널 D=10m, L=3,098.6m(라이닝) ㆍ유도터널 D=5.5m, L=31.8m	26,143	'18.02.08~ '19.06.30
6 차	ㆍ저지1,2,고지수직구 및 정류지 상부포장 ㆍ유수지 진입램프 신설 및 개량 ㆍ안전체험관(토목,전기,기계,조경) 및 건축공사	8,305	'19.03.10~ '19.06.30

Ⅲ		보고내용

【총차분, 5차, 6차분 계약금액 조정】

□ 총차분(5회 변경)

○ 변경사유 및 주요내용

- 잔류수펌프 용량 및 유지관리수직구 단면 변경, 유출관로 관경 확대 등

- 목동1펌프장 앞 유수지내 추가 분리벽 및 유수지 기둥 보강

- 카-리프트 설치에 따른 토목공사 및 관련 설계비 반영

- 기타 물가변동 반영

○ 증감 세부내역

단위 :백만원)

항 목	증감사유	증‧감		비 고
수직구 공사	유출수직구 기초굴착, 저지2 차폐하우스설치 잔류수 펌프 용량 변경에 따른 유지관리수직구 변경	증)	394
터널공사	잔류수 펌프 용량 변경에 따른 유지관리 횡갱 변경	증)	15
CSOs 공사	CSOs 유출관로 변경	증)	77
유수지 개량공사	추가분리벽 및 유수지 기둥 보강	증)	157
기계공사	추가분리벽 및 잔류수 펌프 용량 변경	증)	235
전기공사	추가분리벽 전기공사 추가	증)	28
건축공사	유지관리 수직구동 및 고지수직구동 변경	증)	38
체험관	체험관 운영실 집기류 설치, 행정망 추가, 건축공사 변경 등	증)	87
2018년 수방대비	2018년 수방대비 전기 사전공사	증)	30
직접비 계		증)	1,061
설계비	잔류수 용량 증대 및 추가분리벽, 카-리프트	증)	369
공제비	레미콘 추가 타설에 따른 공제비	감)	-293
2018년 수방대비	전기사용료 및 전기안전관리자	증)	28
물가변동	4회 ESC반영	증)	205
사급자재	추가분리벽 수문 등	증)	336
간접비	상기사유에 따른 간접비 변경	증)	594
도급액		증)	2,300
관급자재비	설계변경 수량 반영에 따른 레미콘 수량 조정	감)	-20
폐기물처리비	추가분리벽 반영에 따른 폐기물 수량 변경	증)	5
소 계		감)	-15
총공사 금액		증)	2,285

□ 5차분(3회 변경)

○ 변경사유 및 주요내용

- 계약금액 변동없이 준공을 위해 6차분과 내역 조정 및 7차분으로 이월

- 체험관 콘텐츠 및 전기공사 설계정산을 위해 7차분으로 이월

- 유수지 추가분리벽, 환기수직구동 및 유지관리수직구동 반영 등

- 변경 세부내역

(단위 : 백만원)

항 목	증감사유	증‧감금액		비 고
수직구 공사	환기수직구동 구조물공 6차공사에서 이월	증)	236
터널공사	유지관리수직구 횡갱 6차공사로 이월	감)	-27
유수지 개량공사	유수지 분리벽 및 구조물 공사 6차공사에서 이월	증)	347
가설 및 부대공	품질관리시험비 6차공사에서 이월	증)	20
기계공사	오탁수처리시설 잔여분 및 곤도라 6차공사에서 이월	증)	178
전기공사	터널 내 가설분전반 철거 공사 및 가설전등 철거공사 6차공사에서 이월	증)	164
건축공사	환기수직동 및 유지관리수직구동 6차공사에서 이월	증)	234
체험관	체험관 컨텐츠 6차공사로 이월 및 체험관 전기 소방공종 설계정산을 위한 7차공사로 이월	감)	-991
직접비 계		증)	161
휴일감리용역비 공제분	휴일감리용역비 공제분 6차 공사로 이월	증)	184
사급자재비	추가분리벽 양천구 요구사항에 대한 설계변경 추가분(수문) 7차공사로 이월	감)	-329
공사중한전수탁비	공사중 한전수탁비 6차공사로 이월	감)	-72
도시가스부담금		감)	-39
물가변동	1~4회 물가변동 반영	증)	85
간접비		증)	11
도급액			변동없음
관급자재비	공종순서 변경에 따른 차수간 내역 조정	감)	-5,573
폐기물처리비	공종순서 변경에 따른 차수간 내역 조정	감)	-388
소 계		감)	-5,961
총공사 금액		감)	-5,961

□ 6차분(1회 변경)

○ 변경사유

- 잔류수 펌프용량 증대, 카-리프트 및 추가 분리벽 설계비 반영

- 창의공원(반곡 및 곰담래 공원) 조성에 따라 7차 공사로 이월

- 전기공사(잔류수 펌프용량 인입 변경) 설계변경 예정분 7차공사로 이월

- 건축공사(카-리프트 설치) 설계변경 예정분 7차 공사로 이월 등

○ 세부내역

(단위 : 백만원)

항 목	증감사유	증‧감금액		비 고
수직구공사	차폐하우스 반영 및 환기수직구 5차 공사로 이월	증)	22
터널공사	터널 공사 5차 공사에서 이월	증)	41
CSOs	CSOs유출관로 추가	증)	77
유수지 개량공사	추가분리벽,유수지기둥보강 반영 및 유수지공사 5차공사로 이월	감)	-213
가설 및 부대공	품질시험비 5차 공사로 이월	감)	-23
기계공사	잔류수 배제용량 증가 반영 및 오탁수처리시설 5차 공사로 이월	증)	34
전기공사	잔류수 배제용량 변경 및 고,저지 인입변경 설계변경 예정에따른 당초 계약분 7차로 이월	감)	-470
건축공사	카-리프트 설계변경 예정에 따른 유출수직구 7차공사로 이월	감)	-266
조경공사	반곡,곰달래 어린이 공원 창의 어린이 공원으로 설계변경 예정에따른 당초 수량 7차 공사로 이월	감)	-507
홍보관	체험관 컨텐츠 5차공사에서 6차공사로 이월	증)	668
2018년 수방대비	2018년도 전기공사 실정보고 반영	증)	30
직접비 계		감)	-607
공제분	휴일감리용역비 공제분	감)	-184
종합시운전	전체공사 완료 후 수령, 7차공사로 이월	감)	-282
예비폼 및 특수공구	전체공사 완료 후 수령, 7차공사로 이월	감)	-48
설계비	잔류수 배제용량 변경 및 분리벽 설계비 반영	증)	360
공사손해보험료	설계변경 반영분 적용에 따른 증가	증)	5
TAB공사비		증)	9
한전수탁비	공사중 한전수탁비 5차공사에서 이기	증)	72
설계VE절감액	5차 공사에서 이월	증)	153
전기사용료 및 전기안전관리자	2018년 전기 수방대비 적용	증)	28
도시가스부담금		감)	-114
물가변동	4회 ESC 적용 및 1~3회 물가변동 반영	감)	-140
간접비		감)	-186
도급액		감)	-934
관급자재비	5차공사 수량 6차공사로 이월	증)	393
폐기물처리비	5차공사 수량 6차공사로 이월	증)	5,195
소 계		증)	5,588
총공사 금액			4,654

□ 총차, 5차, 6차분 공사비 변경 현황

(단위 : 백만원)

구분		당초	변경	증.감
총차	총공사비	121.099	123,384	증)2,285
	도급액	106,559	108,859	증)2,300
	계약기간	‘13.05.27.~’19.06.30	‘13.05.27.~’19.12.15	증)168일
5차	총공사비	32,104	26,143	감)5,961
	도급액	26,143	26,143	변경없음
	계약기간	2018.02.08 ~ 2019.06.30	2018.02.08 ~ 2019.06.30	변경없음
6차	총공사비	11,723	16,377	증)4,654
	도급액	8,305	7,371	감)934
	계약기간	2019.03.10 ~ 2019.06.30	2019.03.10 ~ 2019.06.30	변경없음

【총차분(폐기물포함) 준공기한 연기】

□ 공기연장사유

○ 양천구 요구사항 유지관리 차량 투입을 위한 카-리프트 설치 및          창의공원(반곡, 곰담래) 조성에 따른 추가 공기 소요

- 폐기물처리용역 : 본 공사 연기에 따라 폐기물처리용역 기한 순연

○ 준공기한 변경

구 분		당 초	변 경	증,감	비고
공사(총차분)		`13.05.27.~`19.06.30	`13.05.27.~`19.12.15	증) 168일
폐기물처리용역(총차)		`13.07.03.~`19.06.30	`13.07.03.~`19.12.15	증) 168일
폐기물처리용역(4차)		`17.01.01.~`19.06.30	`17.01.01.~`19.12.15	증) 168일

※ 5차 및 6차분 준공기한 변동없음.

- 귀책소재 : 도시기반시설본부(지체상금 미부과)

Ⅳ		7차분 발주계획 및 우선시공 계획

□ 7차분 발주 계획

○ 공사개요

- 주요 공사내용

▸ 카-리프트 설치에 따른 유출수직구 접속부, 기계장치 및 건축동 등

▸ 창의공원(반곡, 곰담래 공원) 재 설계분(6차분 이월)

▸ 전기공사(잔류수 배재펌프, 체험관 등) 설계변경 미 반영분 등

- 공사기간 : 착공일로부터 ~2019.12.15

- 7차분 발주 내역

구분	금액(원)	비고
총공사비	3,856,000,000
도급액	3,527,000,000
관급자재비	329,000,000

- 예정공정표

○ 우선시공계획

- 7차공사 조달 발주후 계약체결까지 행정처리 소요기간을 고려하여 7차분에 반영된 유출수직구 카리프트 접속부 토목공사 및 향후 설계변경 예정인    카-리프트 제작 기계공사에 대하여 우선시공 조치

Ⅴ		건설사업관리단 의견

○ 발주처 및 양천구 요구사항 등에 의한 잔류수 배제펌프 용량 증대, 추가 분리벽 설치, 유수지 기둥보강, 카-리프트 설치, 창의공원  재설계 등으로 인한 총차분과 5차 및 6차 계약금액 조정 적정

○ 7차발주분(카-리프트 설치, 조경공사)시행을 위해 절대공기 감안 총차(폐기물처리 용역) 공기연장 적정

- 7차공사 해당 금액은 초급품질관리대상공사 현장(초급기술인 1인이상)      으로 인원 감원을 위해 고급기술자1인으로 운영(현재 특급1명, 고급2명)

Ⅵ		조치계획

○ 상기 보고내용과 건설사업관리단 의견과 같이 총차분(5회), 5차분(3회), 6차분(1회) 계약금액조정 및 공기연장(폐기물포함)은 적정함.

○ 7차공사 발주분에 대하여도 조달계약시까지 우선시공분 및 품질  관리자 운영사항을 포함하여 승인코자함.

○ 기타 카-리프트 미반영분(건축, 기계, 전기)은 행정행위(설계변경소위원회) 완료후 설계변경시 추후 반영

붙임 : 건설사업관리단 공문 1부.  끝.