문서번호	토목부-23612
결재일자	2019.12.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	토목설계과장	토목부장	시설국장

- 양재대로 지하차도 기본 및 실시설계용역-

준공기한 연기 검토 보고

2019. 12.

도시기반시설본부

(토목부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

양재대로 지하차도 기본 및 실시설계용역

준공기한 연기 검토 보고

「양재대로 지하차도 기본 및 실시설계 용역」과 관련하여 용역자가 제출한 준공기한 연장 요청에 대하여 검토 보고 드림.

※ 동일(구조) 제19-3485(2019. 12. 16. , 과업기간 연장요청 건)

□ 용역 개요

❍ 용 역 명 : 양재대로 지하차도 기본 및 실시설계 용역

❍ 규    모 : 지하차도 신설 및 구조 개선 L=1,656m

(대모지하차도 신설 L=1,174m, 일원지하차도 구조개선 L= 482m)

❍ 용역기간 : '13. 7. 8. ~'19. 12. 31.

❍ 도 급 비 : 2,197,125천원(기성금 ; 1,807,666천원,  잔액 ; 389,459천원)

❍ 용 역 자 : ㈜동일기술공사 외 2개사

□ 준공기한 연장

❍ 준공기한 연기 : 91일

- 용역기간 : 당초  '13. 7. 8.~'19. 12. 31.⇒ 변경 '13. 7. 8.~'20. 3. 31.

❍ 지체상금 : 미부과

❍ 귀책부서 : 서울특별시

❍ 연기사유 : *********************************************************************************************************************************************************

□ 조치의견 : 준공기한을 '20. 3. 31.까지 연기하여 용역을 관리하고자 함.

붙임 : 1. 계약기간 연장 요청 공문 및 합의 각서 각 1부. 끝.