문서번호

치수과-9914

주무관

치수팀장

치수과장

안전건설교통국장

부구청장

구청장

등록일자

2018.07.09.

07/12

결재일자

2018.07.12.

공개여부

비공개(5)

협 조

방침번호

구청장 방침 제63호

- 한강로 일대 방재시설 확충사업 -

현 안 사 항  및  조 치 계 획

2018. 7

용   산   구

(치 수 과)

사 전  검 토  사 항

▶▶ 해당사항이 있는 부분에 ‘■’ 표시 후 검토내용을 기입하시기 바랍니다.

구 분	사전 검토 점검 사항
법 령 검 토	• 법 령 규 정 : 검토 □ (법규명 : )		무 ■
	• 공직선거법 : 검토 □ (저촉여부 : )		무 ■
	• 조 례·규 칙 : 검토 □ (조례규칙명 : )		무 ■
재원확보	• 예 산 확 보 : 구비 □ 시비 ■ 국비 □ 기타 □ ( )		무 □
절 차 검 토	• 처 리 절 차 :	투융자심사 □ 용역심사 □	무 ■
		공유재산심의 □ 기타 □ ( )
기 관 협 의	• 관 계 기 관 : 중앙 □ 서울시 ■ 기타 □ ( )		무 □
	• 관 련 부 서 : 유 □ (부서명 : )		무 ■
	• 기타(민간단체 등) : 유 □ (단체명 : )		무 ■
소 통 분 야 고 려 사 항	• 이해당사자 : 유 □ ( )		무 ■
	• 구 민 : 유 □ ( )		무 ■
	• 전 문 가 : 유 □ ( )		무 ■
	• 직 능 단 체 : 유 □ ( )		무 ■
홍 보 계 획	• 홍 보 수 단 :	기자설명회 □ 보도자료 □ 기획보도 □	무 ■
		기고문 □ 소식지 □ 기타 □ (IPTV, 전광판등)
사전고려 사 항	• 기 타 사 항 :	갈등발생 요인 □ 취약계층 □ 장애인 □	무 ■
		성인지 □ 일자리 □ 안전성 □ 유지비용 □
타 기관 사 례	• 운 영 사 례 :	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?	무 ■
		( · )

- 한강로 일대 방재시설 확충사업 -

현안사항 및 조치계획

한강로 일대 방재시설 확충사업 추진 중 발생한 현안사항에 대한 조치계획을 수립․시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

□ 사업개요

○ 위    치 : 한강대교 북단 ~ 남영역간

○ 사업규모

- 빗물펌프장 신설 : 펌프용량 1,010㎥/분

- 유역분할 관거 : ▣2.0☓2.0~D2,400mm, L=1.29㎞

- 기존 관거 개량 : L=1.63㎞

○ 사업기간 : 2013. 12. 27. ~ 2018. 8. 26.

○ 총사업비 : 50,718백만원 (국비 24,054백만원, 시비 26,664백만원)

□ 그간 추진경위

○ '10.09.21. : 집중호우 침수피해 발생

○ '11.03.08. : 한강로 일대 자연재해위험지구 지정 결정고시

○ '13.12.27. : 펌프장 공사착공

○ '14.04.22. : 펌프장 설치 반대 항의방문 및 다수인 민원 접수

○ '15.01.26. : 펌프장 위치조정 재설계완료 (’15.3.2.공사재개)

○ '16.12.20. : 유역분할(관로 2구간) L=209m 신설완료

○ '17.05.31. : 유역분할(관로 1구간) L=389m 신설완료

○ '18.04.20. : 빗물펌프장 준공식 개최

○ '18.6월 현재 : 빗물펌프장 조경 및 마무리 공사중

관로3구간 하수암거 신설중 (공정율 78%)

관로4구간 하수암거 신설중 (공정율 99%)

□ 사업별 추진현황

구 분	펌프장 신설	유역분할 (관로신설)				관로개량	책 임 감 리
		1구간	2구간	3구간	4구간
사 업 규 모	‧펌프장신설 ‧기전설비 Q=1,010㎥/분	‧D1800~2400㎜, L=286m ‧□3.0×1.8m, L=107m	‧D2400㎜, L=209m	‧D2400㎜, L=146m	‧□2.0×2.0m, L=544m	‧D1000㎜, L=854m	‧책임감리 1식
사업비 (백만원)	30,174	5,821	3,660	2,393	2,146	1,677	3,440
공정율	99%	준공	준공	78% ('18.8.완료예정)	99%	예정('18.12.)	83%

□ 연차별 예산투입 현황

(단위:백만원)

총사업비	기투자	2016년	2017년	2018년
50,718	23,051	6,924	13,562	7,181

□ 현안사항

○ 관로 3,4구간 현장 여건변화에 따른 공사비 증가 및 공사기간 연장에 따른 감리 투입기간 증가로 총사업비 부족 (부족액 1,057백만원)

관로3구간

- 계약심사, 교통심의 등 행정절차 지연에 따른 착공 지연 및 지중 지장물 저촉에 따른 공정지연으로 우기 전 관로 통수를 위해 공사방법 변경

․공사시기 변경 : 주간공사 → 주․야간공사 (야간할증 적용)

․비개착공법 변경 : STM 공법 → 강관압입공법

- 굴착토사 수도권매립지 반입불가 통보에 따른 사토처리 비용 증가

[공사비 증가현황]

(금액단위 : 백만원)

당 초	변 경	증․감
2,393	2,707	증)314

관로4구간

- 용산역 앞 지장물(한전공동구, 기존 하수암거) 저촉으로 가시설공법 변경(TS판넬 → H파일+토류판)

․TS판넬은 고정규격 제품으로 지장물에 대한 현장 대응 불가

- 공사 중 교통처리를 위한 복공판 설치, 기존 하수암거 보강 등 안전사고 예방을 위한 부대비용 증가

[공사비 증가현황]

(금액단위 : 백만원)

당 초	변 경	증․감
2,146	2,499	증)353

책임감리 용역

- 한강로 상 비개착 공사의 품질․안전관리, 전체 사업 준공처리 등 사업관리를 위해 책임감리기간 연장 불가피(당초 ’18.6.30 → 변경 ’18.9.30)

○ 사업비 부족액 총괄

(단위: 백만원)
예산 구분		현 사업비	소요 사업비	부 족 액
계		50,718	51,775	1,057
펌프장 신설		30,174	30,174	-
유역 분할	소계	15,697	16,642	945
	관거신설	14,020	14,965	945
	지선관로	1,677	1,677	-
감리용역		3,440	3,552	112
설계비 등		1,407	1,407	-

※ 부족액 : 3구간(314)+4구간(353)+’17년 불용액(278) = 945백만원

□ 조치계획 검토

○ 유역분할 관거신설은 우기 전 통수가 필수적인 공사로써 부족액은 지선관로 개량공사 예산을 우선 사용

○ 지선관로 개량공사는 총사업비 범위내에서 물량을 조정하여 시행하고, 잔여구간은 향후 단위 사업으로 시행

구 분	계	금회시행	향후 시행
공사규모	D1000㎜, L=1.63㎞	D1000㎜, L=0.32㎞	D1000㎜, L=1.31㎞
공 사 비 (백만원)	1,677	620	1,057

○ 책임감리용역은 공사의 난이도 및 사업관리를 위해 관거신설 준공시까지만 연장 시행하고, 지선관로 개량공사는 자체감독 시행

- 감리용역 연장에 따른 추가 소요예산은 펌프장 공사비(시설비)를 활용

- 책임감리용역 계약기간 연장 : 관로신설공사 준공 후 1개월까지

․ 당초 : ’18.6.30 → 변경 : ’18.9.30

○ 단위 사업간 조정내역 총괄

(단위: 백만원)
단위사업		당 초		조 정		증․감
		사업규모	사업비	사업규모	사업비
계			50,718		50,718	-
펌프장신설		1개소 Q=1,010㎥/분	30,174	1개소 Q=1,010㎥/분	30,062	감)112
유역 분할	소계		15,697		15,697	-
	관거신설	▣2.0☓2.0 ~D2,400mm, L=1.29㎞	14,020	▣2.0☓2.0 ~D2,400mm, L=1.29㎞	14,965	증)945
	지선관로	L=1.63㎞	1,677	L=0.32㎞	732	감)945
감리용역		~’18.6.30	3,440	~’18.9.30	3,552	증)112
설계 등 기타		1식	1,407	1식	1,407	-

□ 향후 추진계획

○ ’18.08.30 : 관로공사 3·4구간 완료 (유역분할 전체완료)

○ ’18.09.30 : 책임감리용역 준공

○ ’18.12.    : 지선관로 개량공사(조정물량) 완료

○ ’19년 ~   : 지선관로 잔여구간 개량공사 추진(별도사업). 끝