문서번호	공원녹지과-1303
결재일자	2019.2.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		조경팀장		공원녹지과장
협조

★ ◉

- 2019년 시민참여 예산사업 -

도로녹지 및 시설 확충사업 추진계획

2019. 2.

- 2019년 시민참여 예산사업 -

도로녹지 및 시설 확충사업 추진계획

우리구와 중구를 잇는 금호터널 앞 녹지대 내 생육이 불량한   수목과 시설물을 재정비하여 운전자를 비롯한 지역주민들에게   아름답고 쾌적한 거리환경을 제공하고자 합니다.

□ 추진방향

❍ 생육불량 수목 재정비를 통한 거리환경 개선

❍ 터널 내외부 명암 차로 인한 시각적 이상 현상완화를 위한 식재

❍ 훼손된 시설물 정비

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 도로녹지 및 시설 확충사업

❍ 사업기간 : 2019. 1. ~ 6.

❍ 사업대상 : 금호터널 앞 녹지대(금호동3가 1590-1 일대)

❍ 규    모 : 1,330㎡

❍ 사 업 비 : 150백만 원(시민참여예산)

❍ 사업내용 : 생육불량 수목 정비 및 수목식재, 시설물 정비 등

□ 추진방법

❍ 실시설계용역

- 용역기간 : 2019. 2. ~ 3.

- 용역내용 : 현황여건 분석, 설계도서 작성/제출 등

- 시행방법 : 지방계약법에 의한 수의계약

❍ 시설공사

- 공사기간 : 2019. 5. ~ 6.

- 공사내용 : 생육불량 수목 정비 및 수목식재, 시설물 정비 등

- 시행방법 : 지방계약법에 의한 지역제한입찰

□ 추진일정

❍ 2019. 2.         사업추진계획 수립 및 서울시 검토요청

❍ 2019. 2. ~ 3.  서울시 사업승인 후 설계용역 발주 및 시행

- 서울시 설계심의 및 계약심사 등 행정절차 이행

❍ 2019. 4.        공사발주

❍ 2019. 5. ~ 6.  공사착수 및 완료

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.