문서번호	도로시설과-1821
결재일자	2013.1.28.
공개여부	대시민공개

주무관	시설관리담당	도로시설과장	건설교통국장
협 조

- 서울시 주민참여 예산 -

어린이 등·하교길 정비사업

추진계획

2013. 1.

건설교통국

도로시설과

- 서울시 주민참여 예산 -

어린이 등·하교 정비사업 추진계획

서울시 주민참여예산으로 집행하는 초등학교 “어린이들의 등·하교길 정비사업”을 조기발주, 보행환경 개선으로 안전한 통학로를 확보함으로서 어린이들의 등·하교길 안전사고를 예방하고자 함.

Ⅰ		관련근거

❍  어린이 등·하교길 정비사업(주민참여) 조기발주 공문 시달

- 서울특별시 보행자전거과 - 651 (2013.01.18)

Ⅱ		서울시 예산집헹

❍ 실시설계 결과에 의거 사업비는 확보된 범위내에서 배정

Ⅲ		추진방향

❍ 본공사는 차선을 축소하여 보도를 확보함으로써 관할경찰서 규    제심의가 필요하고 또한 터널내 보행자의 안전을 위한 스크린    설치(방음벽) 등으로 세부적 설계기술이 필요하여 실시설계용역    의 별도 발주가 필요함

❍ 공사발주전에는 학교측(학부모 및 녹색어머니회)과 설명회를 실

시하여 어린이들의 안전을 위한 꼭 필요한 통학로 의견 수렴

❍ 교통시설물 안전설치(차선도색, 볼라드 등)에 대하여는 교통행   정과와 사전 협의 후 해당부분 공정 공사시행 요청

❍ 본공사는 사전 예비조사 후 사업대상지가 확정되었으나 학교   측과 설명회 후 건의된 사업대상지는 추가 반영하며

❍ 삼선중학교앞 학생들의 안전통학로가 없어 보도신설이 필요한   다수 주민요구지역은 본공사에 포함하여 공사시행

Ⅳ		사업 현황

❍ 위  치 : 개운초교외 10개소

❍ 기  간 : 2013. 1.∼ 9. 30.

❍ 사업비 : 1,000백만원(시비)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	비 고
계	1.000,000
실시설계 용역비	20,000	공사비의 3.55% 이내
공 사 비	980,000

❍ 사업 개요

- 보도신설 및 주변정비 ( B=1.5∼2.0m, L=1,400m)

- 안전휀스 이전 및 설치(L=840m)

- 터널내 안전 보행로 신설(L=320m) 및 방음벽(L=120m) 설치

- 계단(목재데크)정비( B=1.5∼2.0m, L=440m)

- 기타 교통안전시설(교통표지판, 과속방지턱, 가로등 등)

Ⅴ		공사시행 추진방향

❍ 실시설계 용역후 공사발주

- 용역발주 사유

․교통규제 심의 내용검토, 공사중 교통처리계획등 교통에 대한        전문기술이 필요하며, 주민설명회 도면작성 및 자체 설계에           따른 실시설계 오류로 전문성 확보에 따라 용역발주 필요

- 실시설계 용역 일정 : 2013. 2. 4 ~ 3. 31 (50일)

Ⅵ		수의계약 근거 및 대상자

❍ 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

시행령 제25조제1항 제5호

5.「건설산업기본법」에 따른 종합공사의 경우 추정가격이 2억원

(「건설산업기본법」에 따른 전문공사의 경우에는 1억원,

「전기공사업법」에 따른 전기공사,「정보통신공사업법」에 따른     정보통신공사 또는 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사, 그    밖에 공사 관련 법령에 따른 공사의 경우에는 8천만원)이하인 공사,    추정가격(임차나  임대의 경우에는 연액 또는 총액 기준)이 5천만원    이하인 물품의 제조·구매․용역 계약 또는 그 밖의 계약의 경우

❍ 수의계약 대상자

- 에이스톤엔지니어링(주) 대표 장명학 (02-2026-0852)

Ⅶ		향후 일정

❍ 기술용역 타당성 심사 : 2013. 1.

❍ 실시설계용역 발주    : 2013. 2. 13

❍ 주민설명회 개최 계획 : 2013. 3. 5 ~ 3. 20

❍ 용역 준공 : 2013. 3. 31

❍ 공사발주  : 2013. 4. 1

❍ 공사착공  : 2013. 4. 25

❍ 준공예정일 : 2013. 9. 30

첨부 : 1) 서울시 공문(예산현황) 1부.

2) 위치도 및 현황사진 1부. 끝