응봉교 확장 및 성능개선 공사

응봉로와 성수대교축의 차로수 불균형에 따른 응봉교 일대 교통 병목현상 해결 및 지역 간 원활한 교통처리체계를 정립

1		사업개요

○ 위    치 : 응봉동 대림아파트 앞 ～ 성수1가 삼표레미콘 앞

○ 규    모 : 확장(B=4차로 → 6차로, L=633m), 성능 개선(DB-18 → DB-24)

○ 공사기간 : '08.10 ～ '15.12

○ 시 공 사 : 한신공영(주) 외 1개사,    ○ 감 리 사 : ㈜건화 외 1개사

2		추진현황

(공정률  93.0%)

○ '08.10.  :  공사계약 및 착수

○ '10. 4.  ~  '14.12. : 단계별로 가설교량 설치 및 기존교량 철거

- 구간별로 교량 철거 및 재설치 공사 시행

○ '15. 2. ~ '15. 8. : 철도 횡단구간 교량 철거 및 재설치 공사

○ '15. 8. 31. : 응봉교 본선 왕복 4차로 우선개통

3		향후계획

○ '15. 10월 말 : 전면 개통(왕복 6차로)

- 왕복 4차로로 통행시키면서 응봉교 남단 연결도로 성토 및 포장 공사

- 터널형방음벽 설치, 응봉교 하부도로 정비, 보행 연결계단 등 설치

○ '15. 10.~ `16. 3. : 가설교량 철거 및 부대공사

- 수방대책기간 이후 가설교량 철거, 교량 하부 중랑천 원상복구 등

□ 위치도 및 현황사진