문서번호	조경과-1089
결재일자	2018.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	조경시설팀장	조경과장		푸른도시국장
협 조

2018년 옥상녹화·텃밭 조성사업 추진 계획

2018. 1.

푸른도시국

(조경과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 옥상녹화·텃밭 조성사업 추진 계획

방치된 옥상공간에 대하여 별도 토지보상 없이 도심 내 공원녹지 확충과 도시열섬현상 완화, 대기질 개선, 생물서식공간 확보 등에 기여하는 옥상녹화·텃밭 조성사업을 다음과 같이 추진하고자 함.

- 시장 공약사항 “생활권 주변 10분거리 공원조성” 관련임 -

▢ 추진방향

○ 건물의 안전성을 유지하는 범위 내에서 다층식재로 생태다양성 확보

○ 녹지율을 80% 이상 확보하여 도심 내 녹지량 확충에 기여

○ 생태적, 경관적 효과뿐만 아니라 이용성 등을 고려하여 조성

○ 건축주 및 건물 관리기관에서 유지관리가 용이토록 조성

▢ 사업개요

○ 대 상 지 : 공공 및 민간건물(900개소)

○ 사업기간 : 2002년 ~ 2020년(계속)

○ 사업내용 : 구조안전진단, 설계 및 옥상녹화(텃밭조성) 등

○ 총사업비 : 82,667백만원 (‘17년 이전 68,269, ‘18년  1,498 , ‘19년 이후 12,910)

< 추진실적 >

▸ ’02 ~ ’17년, 조성 715개소, 면적 33,469㎡

구 분	계	2015년 이전	2016년	2017년	비 고
개 소 수	715	680	20	15
조성면적(㎡)	33,469	19,663	7,913	5,893
사업비(백만원)	68,269	63,656	2,450	2,163

마포구 마포소방서	도봉구 김수영문학관	중구 중림종합사회복지관

▢ 2018년 추진계획

○ 대 상 지 : 공공 및 민간건물 12개소(붙임1 참조)

※ 시건물 3개소, 구건물 7개소, 민간건물 2개소

○ 사업기간 : 2018. 1. ~ 12.

○ 총사업비 : 2,155,224천원(시비 1,498,384, 구비 등 656,840)

○ 사업내용 : 구조안전진단, 설계 및 옥상녹화 공사

[지원기준] 건물 소유별 차등지원(총사업비의 50~70%)

○ 공공건물 : 시·교육청 건물 100%, 구건물 70%이하, 기타건물 50% 지원

○ 민간건물 : 50%(최대 1억원이내), 구조안전진단 용역비는 시비 지원

※ “서울시 보조금 관리조례 시행규칙” [별표1]에 의거함

○ 세부 추진일정

- 2018. 1월중   : 사업계획 수립 및 시달

- 2018. 2 ~  3 : 구조안전진단 실시

- 2018. 3 ~  5 : 옥상녹화 협약체결, 실시설계 및 설계심의

- 2018. 5 ~  6 : 계약심사 및 공사발주

- 2018. 6 ~ 12 : 공사시행 및 보조금 정산

▢ 행정사항

○ 설계용역 착수 전 옥상녹화 협약체결 및 협약서[붙임2] 제출 철저

○ 소유별 사업추진 절차 등[붙임3]에 따라 사업 시행 철저

○ 착·준공 후 7일이내 보고서 및 관련 서류 일체 제출 철저

○ 강서구(시냇가푸른교회) 자부담 확보 여부에 대한 증비서류 제출

붙임 : 1. 2018년 옥상녹화·텃밭 조성사업 대상지 및 현황사진 1부

2. 공공건물 옥상녹화 협약서(안) 등 각 1부

3. 소유별 사업추진 절차 1부

4. 2017년 옥상녹화·텃밭 조성사업 추진실적 1부.  끝.