난지물재생센터 3차(총인)처리시설 설치

과 장 : 유병기	☎ 3708-8601
담당자 : 김인호	☎ 3708-8603

□ 사업부서 : 도시기반시설본부 설비부(열빛총괄과)

□ 사업개요

○ 근     거 : 하수도법 시행규칙 [별표1] 공공하수처리시설의 방류수 수질기준

○ 위     치 : 난지물재생센터

○ 규     모 : 총인처리시설 439,200㎥/일(T-P 0.12mg/L)

○ 총사업비 : 53,093,000천원(‘18년 예산 33,280,000천원)

○ 사업기간 : ‘17. 10. ~ ‘20. 04.

□ 추진현황 및 향후 계획

○ '17.02. : 기본 및 실시설계 용역 완료

○ '18.03. : 공사 착공(예정)

○ '20.04. : 총인시설 설치완료(시운전 6개월 포함)

□ 예산배정계획                                           (단위 : 천원)

예산과목	소계	기배정액	배정요구액	배정잔액	산 출 내 역
총 계	33,280,000	0	33,280,000	0
시설비	32,040,000	0	32,040,000	0	-토목 11,160,000 / 건축 0 -기계 16,200,000 / 전기 4,500,000 -통신 0 / 폐가물 180,000
감리비	1,200,000	0	1,200,000	0	-감리용역비 1,200,000
시설부대비	40,000	0	40,000	0	-감독여비 등 40,000

□ 배정사유

○ 공사 및 감리용역 추진 등

□ 서울위키 등록 여부

○ ’15년 위키 최근등록일 : ’15.03.27.

‘18년 예산집행계획

□ 예산집행계획

(단위 : 백만원)

분야별	집 행 계 획
	합 계	1분기	2분기	3분기	4분기
계	33,280	301	4,747	9,695	18,537
토목,건축	11,160	0	1,364	4,036	5,760
기계	16,200	100	3,100	4,740	8,260
전기	4,500	0	0	500	4,000
통신	0	0	0	0	0
폐기물	180	4	28	88	60
감리	1,200	195	250	326	429
시설부대비	40	2	5	5	28

※ ‘18년 예산액(시설비, 감리비)에 맞추어 작성

□ 부서별 배정액

(단위 : 천원)

부 서 별	합 계	설 비 부	방재시설부	건 축 부
계	33,280,000	21,920,000	11,355,000	5,000
시 설 비	32,040,000	20,700,000	11,340,000
감 리 비	1,200,000	1,200,000
시설부대비	40,000	20,000	15,000	5,000