제6차 중국 인사부과정 훈련 실시계획

하수도사업 관리카드

2014. 0. 0

0 0 구

총괄                                                            - 00구

□ 총사업수 : 0건

◦ 주민참여 : 00동 00번지 일대 침수방지사업외 0건

◦ 단위개량 : 00동 00번지 일대 침수방지사업외 0건

◦ 종합정비 : 00배수분구 하수관로 종합정비사업외 0건

◦ 빗물유입시설 확충 : 00지역외 0개소

□ 우기전(6/30) 완료 대상사업 추진공정

구분	연번	사업명	1차보고 완료일	공정율(%)- 총연장 대비 완료공사															판정
				4월					5월					6월
				1주	2주	3주	4주	계	1주	2주	3주	4주	계	1주	2주	3주	4주	계
단위개량	1	00동 00번지 일대 침수방지사업	6/30								5	15	15	25	40	50	60	60	부진
	2	00지역 주변 침수방지사업	6/30	3	9	17	25	25	35	40	50	60	60	70	80	90	100	100	정상
빗물유입	1	00지역 주변외 1개지역	6/30			5	15	15	30	50	80	100	100						정상

◦ 공정율 단축계획

-

□ 6월30일 이후 완료 대상사업 추진공정

구 분	연번	사 업 명	1차보고	공정율(%) - 총연장 대비 완료공사															판정
			6/30공정	4월					5월					6월
			완료일	1주	2주	3주	4주	계	1주	2주	3주	4주	계	1주	2주	3주	4주	계
단위개량	1	00동00번지 일대 침수방지사업	100%	80	90	-	-	90	-	-	-	95	95	-	100			100	정상
			2014.05.31
	2	00배수분구 침수방지사업	50%	3	5	6	7	7	8	15	25	30	30	35	40	45	50	50	정상
			12.31
	3	00주변 하수암거 신설공사	30%								5	10	10	15	20	25	30	30	정상
			9.30
종합정비	1	00배수분구 하수관거 종합정비사업	60%	5	10	-	15	15	-	20	30	40	40	45	50	55	60	60	정상
			11.30
	2	00배수분구 하수관거 종합정비사업	90%	20	25	30	40	40	50	53	57	60	60	70	75	80	90	90	정상
			10.30

00동 00번지 일대 침수방지사업(신규사업)                        - 00구

□ 사업목적

◦ 00구 00동 00아파트 하류지역이 집중호우에 따른 침수피해 지역이며, 사유지로 공공하수관이 관통하고 있어 사유지통과 하수관로를 공공도로로 이설 확장하여 침수피해를 예방코자 함.

□ 사업개요

◦  사업기간 : 2014. 0.00 ~ 2014. 0.00

◦  총사업비 : 000백만원 (2014년도 000백만원)

◦  위치 및 규모

추진년도	위 치	공사 종류	규 모
2014년	00동 000 ‧ 00 ~ 00번지 주변	하수관거 신설 및 확관	D=000㎜ ~ 000㎜, L=000m

□ 추진현황 및 계획

◦  2014. 03. 21 :

◦  2014. 04. 15 :

□ 예정공정표

구분	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
공정			공사착공	30%	60%	80%	공사완료 예정

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기 투 자	2013예산	2014예산	2015이후
계					-
실시설계비					-
시설비					-

□ 위 치 도

□ 문제점 및 기타

◦ 없음

00동 00번지일대 침수방지사업(장기계속)                        - 00구

□ 사업목적

◦

□ 사업개요

◦  사업기간 :

◦  총사업비 : 000백만원 (2014년도000백만원)

◦  위치 및 규모

추진년도	위 치	공사 종류	규 모

□ 추진현황 및 계획

◦

◦

◦

□ 예정공정표

구분	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기 투 자	2013예산	2014예산	2015이후
계
실시설계비
시설비

□ 위 치 도

□ 문제점 및 기타

◦

00배수분구 하수관거 종합정비사업(장기계속)                    - 00구

□ 사업목적

◦

□ 사업개요

◦  사업기간 :

◦  총사업비 : 1

◦  위치 및 규모

추진년도	위 치	공사 종류	규 모

□ 추진현황 및 계획

◦

◦

◦

□ 예정공정표

구분	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
공정	계약	10%	20%	40%	60%	65%	70%	80%	90%	공사완료예정

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기 투 자	2012예산	2013예산	2014이후
계
실시설계비
시설비

□ 위 치 도

□ 문제점 및 기타

◦ 없음

빗물유입시설 확충 사업                                             - 구로구

□ 사업목적

◦

□ 사업개요

◦  사업기간 :

◦  총사업비 :

◦  위치 및 규모

위 치	공사 종류	규 모

□ 추진현황 및 계획

◦

◦

□ 예정공정표

구분	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기 투 자	2013예산	2014예산	2015이후
계
실시설계비
시설비
감리비

□ 위 치 도

□ 문제점 및 기타

◦ 없음