실 정 보 고

자양취수장 활용을 위한 노후 시설정비 중

구의계통연결부 급속공기밸브 D150,D200설치

2016. 10.

아이엠유건설(주)

목 차
	1.	공사개요 및 위치도
	2.	실정보고 사유서
	3.	공사비 증,감 대비표
	4.	수량 증,감 대비표
	5.	금액 증,감 대비표

실 정 보 고 검 토

신취수연결 D1500

관리번호

아이-2016-9

페 이 지

3

1.

공사개요 및 위치도

내    용

공사개요

공 사 개 요 서
공 사 명	자양취수장 활용을 위한 노후시설 정비공사중 토목공사
공 사 기 간	2016년 06월 15일 ~ 2016년 12월 31일
공 사 금 액	일금삼억사천삼백팔십칠만일천원정(₩343,871,000)
발 주 처	서울시 상수도사업본부 생산부
건설사업관리단	(주)한국종합기술외 1개사
원 도 급 사	아이엠유건설(주)	현장대리인	이주항
하 도 급 사	빛샘건설(주)	현장대리인	황인백
공 사 개 요	신취수연결부 D150,D200 급속공기밸브 설치

2. 실정보고 사유서

○ 변경사유 : D2200 및 D1500 구의계통로 통수시 노후공기밸브

오작동으로 노후공기밸브 철거후 재설치

3. 공사비 증⦁감 현황

구 분	공 사 비		증 • 감		비 고
	당 초	변 경
1. 순공사비		3,918,496	증	3,918,496
2. 제 경 비		811,504	증	811,504
공사비 합계		4,730,000	증	4,730,000

단위:원

신취수 연결관로 현황도
공기밸브 현황

4. 수량 증 • 감 대비표

공종	단위	당 초	변 경	증 • 감		비 고
2.관로공
플랜지접합부속 (D600 볼트,너트,와샤)	조		1	증	1
플랜지접합 200mm	개소		1	증	1
플랜지접합 600mm	개소		1	증	1
강관용접(기계)	개소		1	증	1
강관도장(외부)	개소		1	증	1
3.신취수관
콘크리트깨기	m3		0.27	증	0.27
CONC인력비빔타설(소형구조)	m3		0.27	증	0.27
맨홀뚜껑설치	개소		1	증	1
6.부대공
1)주간공사
수채공	hr		16	증	16
7.사급자재
1)주요자재
일체형 급속공기밸브 D200	EA		1	증	1
공기밸브용 플랜지 뚜껑 D600×D200	EA		1	증	1
일체형 급속공기밸브 D150	EA		1	증	1
2)관자재
폴리에틸렌피복강관 600mm×0.5m 1악단관	EA		1	증	1
8.고재처리비
고재처리비	KG		114	증	114

5. 금액 증 • 감 대비표

공종	단위	당 초	변 경	증 • 감		비 고
2.관로공
플랜지접합부속 (D600 볼트,너트,와샤)	조		81,982	증
플랜지접합 200mm	개소		20,130	증
플랜지접합 600mm	개소		42,941	증
강관용접(기계) 600mm	개소		79,307	증
강관도장(외부) 600mm	개소		69,913	증
3.신취수관
콘크리트깨기	m3		21,706	증
CONC인력비빔타설(소형구조)	m3		96,877	증
맨홀뚜껑설치	개소		8,166	증
6.부대공
1)주간공사
수채공	hr		217,840	증
7.사급자재
1)주요자재
일체형 급속공기밸브 D200	EA		1,232,099	증
공기밸브용 플랜지 뚜껑 D600×D200	EA		810,663	증
일체형 급속공기밸브 D150	EA		597,593	증
2)관자재
폴리에틸렌피복강관 600mm×0.5m 1악단관	EA		399,360	증
8.고재처리비
고재처리비	KG		-14,934	증