<별지 제82호서식>

준공(납품)기한 연기의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명 : 중앙버스전용차로(신도림역앞) 흐름개선사업 교통신호기 공사

나. 계약업체 : 세한종합전기 대표자 오진권

다. 계약금액 : 금13,929,300원(금일천삼백구십이만구천삼백원)

라. 계약년월일 : 2015년 07월 29일

마. 착공년월일 : 2015년 07월 29일

바. 준공기한 : 2015년 10월 31일

2. 위 공사(용역, 물품)의 준공(납품)기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2015년 11월 30일

나. 연기사유 귀책소재 : 강서도로사업소

다. 지체상금 부과여부(부과, 미부과)

라. 연기사유 : 선행공정인 토목공사(강서도로사업소 도로보수과 시행) 지연

2015년    10월    일

강서도로사업소   기전과장  박재경 (인)

서울특별시 강서도로사업소 (분임)경리관   귀하