보조감리원 투입계획 조정 검토 보고

1. 검토 목적

보조감리원(전기분야 → 안전분야)투입계획 조정에 따른 검토.

2. 검토 내용

1) 5차분 감리원 투입(‘15.11.30)현황

구 분		계약(개월)	투입(개월)	잔여(개월)	비고
책임감리원(토목)		12	10.0	2.0
보조 감리원	토 목1	12	10.0	2.0
	토 목2	1.55	0	1.55
	전 기	3.0	0	2.0	안전감리 1개월 조정
	조 경	1.0	0	1.0
	강 교	8.0	2.32	5.68	완료
	안 전	6.73	7.73	0	전기감리 1개월 조정
	소 계	32.28	20.05	12.23

2) 보조감리원 투입 조정계획

① 본선 임시개통(2015.10.31.)으로 전기공사의 잔여분은 가로등 설치(4본)로 임시 가설교량(#3, 4) 철거(‘16년2월) 이후 전기분야 보조감리원 투입이 필요한 실정임(실 공종상 ’16년 1개월 필요)

② 현재 토목공사가 진행중인 임시 가설교량 철거시 경원선 철도보호구역내에서 작업이 이루어지는 것을 감안 안전감리 투입이 필요한 실정으로, 전기공사 실공종상 필요한 보조감리원 투입기간을 안전분야 감리원 투입기간으로 조정하여 안전관리에 만전을 기하고자함.

④ 보조감리원 투입기간 변경계획(안)

구 분		계약(개월)	투입(개월)	잔여(개월)	비고
보조 감리원	전기	3.0	0.0	1.0
	안전	6.73	8.73	0	전기분야→안전분야

3. 향후 추진계획

○ 안전분야 보조감리원을 금회(5차)분 설계변경(감리원 배치계획 조정하여
추가 감리비 없이 1개월 추가 연장투입)실시하여 현장 안전관리에 만전을 기하겠음.

2015.11.

책임감리원  김  용  선