강교 감리원 투입계획 보고

2014.10.

서빙고고가교 감리단

1. 용역명

서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사외 1건 통합전면책임감리용역

2. 용역 개요

1) 위 치

① 서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사 : 용산구 보광동~주성동

② 왕산로 중앙버스 전용차로 설치공사 : 종로구 흥인지문~동대문구 청량리역

③ 공항로 등 3개소 중앙버스전용차로 기능개선공사: 강서구 김포공항입구 외3개소

④ 신상도 지하차도 확장공사 : 동작구 상도동 159-21~207-5

2) 규 모

① 서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사

- 기존 고가철거 B=16.0, L=753m,

- 고가설치 : B=6.4~10.4m, L=115~290m, 기존고가 보수․보강 : B=16.0m, L=140m

② 왕산로 중앙버스 전용차로 설치공사

- 중앙차로 설치 : 3.4km, 중앙승강장 : 11개소 (보도육교 철거 1개소)

③ 공항로 등 3개소 중앙버스전용차로 기능개선공사

- 중앙차로 설치 : 0.9km, 중앙승강장 : 4개소

④ 신상도 지하차도 확장공사(4차분)

- 도로확장 2차로 → 4~6차로, 324m, 지하차도 확장 2차로 → 4차로, 230m

3) 공사기간

① 서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사	: 2011.01.06.~2014.12.31

② 왕산로 중앙버스 전용차로 설치공사	: 2010.12.31.~2012.02.29

③ 공항로 등 3개소 중앙버스전용차로 기능개선공사	: 2012.04.30.~2012.12.14

④ 신상도 지하차도 확장공사(4차분)	: 2014.03.27.~2014.12.31.

4) 용역기간

- 2010.12.31.~ 2015.02.28.(50개월)

5) 감리사

- (주)한국종합기술(60%), (주)선진엔지니어링 종합건축사사무소(40%)

6) 용역비

- 1,638,300,000원(설계가 : 1,915,100,000원, 낙찰율 : 78.86%)

3. 용역 현황

1) 설계변경

구 분	금 액 (천원)	증․감 (천원)	기 간	변경사유	비고
최초	1,510,300	-	‘10.12.31 ~ ’14.02.28	서빙고+왕산로 통합	‘10.12.29
1회	1,612,300	102,000	‘10.12.31 ~ ’14.02.28	E/S, 공항로 추가	‘12.06.04
2회	1,612,300	-	‘10.12.31 ~ ’14.02.28	감리원 배치변경	‘12.11.21
3회	1,612,300	-	‘10.12.31 ~ ’15.02.28	준공기한 연장	‘14.01.14
4회	1,638,300	26,000	‘10.12.31 ~ ’15.02.28	보조(안전)감리원 투입	‘14.05.02

※ 최초 계약금액 대비 증 128,000천원

2) 감리원 투입 현황	(2014.09.30.기준)

구 분		최초(개월)	변경(개월) (전체4회)	기투입(개월) (~‘14.09.30)	잔여(개월)	비고
책임감리원		38	50.0	46.4	3.6	서빙고, 왕산로, 공항로, 신상도 통합감리
보조 감리원	토 목	38	50.0	46.4	3.6
	토 목	32	0.3	0.0	0.3	미투입
	전 기	6	6.2	5.67	0.53	왕산로, 공항로
	조 경	4	0.3	0.0	0.3	미투입
	강 교	8	8.0	0.0	8.0	미투입
	안 전	-	6.3	6.27	0.03	토목부-20314호
	소 계	88	71.10	58.34	12.7

※ 공사기간 연장(12개월)에 따라 감리1인 감축하여 용역기간 연장(38개월→50개월)

4. 보조(강교)감리원 투입 계획

1) 현황

① 보조(강교)감리원이 전체분에는 8개월 배치계획이 되어 있으나, 감리용역(4차분)에는 미배치된 상태로

② 토목공사(4차분) 강교제작 시기가 도래(2014.11.)함에 따라 품질확보를 위하여 강교분야의 전문성을 가진 강교감리원 투입이 필요함

2) 투입 계획 및 감리비

① 전체분

투입등급	소요 개월	투입계획	감리비	비고
감리사보	총 7.0개월(당초 8개월) ․제작 및 가조립 : 3.5월 ․도색 : 1.5월 ․현장조립 : 2.0월	‘14.11.~‘15.05.	62,600,000

② 4차분

투입등급	소요 개월	투입계획	감리비	비고
감리사보	2.3개월 ․제작 및 가조립 : 2.0월 ․도색 : 0.3월	‘14.11.~‘15.01.	19,420,000

③ 감리비 확보

- 금차(4차분)을 설계변경하여 강교 감리원을 추가 투입(용역기간 축소)

구 분	당 초	변 경	증․감	비고
감리원	책임감리원1, 토목1	책임감리원1, 토목1, 강교1	강교1 추가
기간	‘14.01.22.~’15.02.03.	‘14.01.22.~’15.01.14.	감0.6개월
감리비	376,000,000	376,000,000	-

- 잔여기간(‘15.1.~’15.05) 투입 감리비는 2015년 예산을 반영하여 투입

5. 항후 추진계획

① 강교 감리원을 금회(4차)분에 대하여 설계변경(용역기간 축소 및 감리원 배치계획 변경)하여 강교감리원을 추가 투입하고,

② 잔여 투입은 2015년 예산을 반영하여 투입하여 강교 제작 및 설치 안전 및 품질관리에 만전을 기하겠음.