서울역 7017 프로젝트 로드맵

(단위: 백만원)

사업명		완료 시기	2015년							2016년				2017년
			6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1분기	2분기	3분기	4분기	상반기	하반기
1.서울역 고가 보행로 전환		’17.3월
	설 계	’15.11월		철 거 실시설계	설계감리
			계약	본공사 기본설계		본공사 실시설계
	철거공사	’16.3월				입찰공고	계약	안전시설물 설치			책임감리
									교량상판 철거
	보수보강	’17.3월							입찰공고 및 계약		거더,교각 보수·보강
											조경공사 및 부대공
	조경공사	’17. 3월		기본설계			실시설계			공사준비	공사시행			공사완료
				시민의견, 아이디어 검토			설계도면, 공사비 산출			공사계약				개 통
	주변빌딩 연결통로 설치	’17. 3월		빌딩주	양해각서	디자인 및	협약서	실시설계		공사준비	공사시행			공사완료
				협 의	체 결	세부내용 협 의	체 결	도면작성 공사비산출		공사계약				개 통
2.사전심의		’17. 9월			교통안전시설심의 문화재현상변경심의