설 계 설 명 서

1. 공 사 명 : 한양도성 창의문 옥외소화전 설치 공사

2. 위    치 : 서울특별시 종로구 창의문로 42(청운동)

3. 사업목적 : 한양도성 창의문에 옥외소화전을 설치하여 화재를 예방하고, 조기진화 체계를 마련하여 긴급상황 발생시 문화재 보호와 순성객 안전을 도모함을 목적으로 함.

5. 공사개요

1) 개요

구 분	내 용	비 고
상수도 공사	- 상수도 배관공사 및 옥외소화전(지상식) 2기 설치 (D=100mm, 쌍구형)	- 총길이 : 69m - 굴착 : 상부너비 1.20m, 하부너비0.50m, 깊이 1.32m
호스릴소화전 설치	- 소방 기계공사	- 호스릴소화전 2기 설치
	- 소방 전기공사	- 호스릴소화전 위치표시등2EA설치

2) 위치

1구간:66m 2구간:3m	창의문
◎ 파란실선 : 기존 상수도관로 ◎ 빨간실선 : 신규 상수도 배관 공사	옥외소화전 설치 위치

6. 공사기간

본 공사기간은 착공일로부터 90일로 한다.

7. 설계 변경조건

다음과 같은 요인이 발생하면 설계변경을 할 수 있다.

1) 본 공사는 조사당시 수집된 자료에 의해서 추정 설계한 것인바, 조사가 불가능한 부분 및 조사 후 변경된 사항에 대하여는 실제에 맞추어 설계 변경을 한다.

2) 공사 중 발주기관의 방침이 변경되었을 때,

3) 당초 지정된 골재원의 위치, 채취량 또는 운반거리의 변동이 있을 때,

4) 중기사용료는 건설공사 표준품셈에 의해 산출한 것인바, 발주기관이 제공하는 중기를 사용하는 경우,

5) 도급자 구입자재중 골재채취장 및 토취장의 사용료 및 보상비는 채취 허가청에 지불

6) 공사계약특수조건에 따를 경우

8. 공사기간의 연기

1) 공사기간중에 강우일수가 5개년 평균 강우일수보다 초과하였을 때

2) 천재지변이 발생하였을 때

3) 관의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때

9. 시공기준

본 공사는 공사시방서상의 표준시방, 특별 시방에 의거 시공하되 시방서상에 명기되지 않은 공종에 대한 시공은 발주처와 협의하여 시공함.

10. 과업수행방법

본 설계설명서와 과업내용서, 「문화재 소방설비 설치 가이드라인」,「소방시설 공사업법」, 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」등 관련 법규에서 정한 기준 및 절차에 따라 수행한다.

예 정 공 정 표

[공사명] 한양도성 창의문 옥외소화전 설치 공사

착공일로부터 90일

구 분		착공일로부터
		15일	30일	45일	70일	90일
1.	설계도서 확인 및 현장 조사 (협의)
2.	시상수도 공사
3.	소방공사
4.	소방 및 시상수도 공사 시험 및 확인