작성서식	-	4/4분기 다국어 안내표지판 정비실적 보고

0		한양도성 안내표지판

(문화관광디자인본부, 한양도성도감과)

1		사업개요

❍ 추진경위

- 한양도성 주변 안내표지판 종합정비계획(한양도성도감-6600, 2013.7.25)

❍ 사업기간 : '13.1~`14.12월

❍ 사업내용

- 한양도성 주변 안내표지판 개선 디자인 마련

- 명칭변경 등 표기오류 수정 및 다국어 정비

- 우선정비 대상 시범사업 추진

❍ 총사업비 : 650백만원 (2013년~2016년)

- '13년 예산 : 205백만원 (`13.10 국비 100백만원 추가배정)

- '13년 12월말 현재 집행액 : 28백만원(집행율 13.6%)

2		추진성과

❍ '13년 4/4분기 추진실적

단위사업	'13년 정비목표	'13.12월말 추진실적	'13년 예산액	'13.9월말 집행액( %)	'16년까지 정비목표
한양도성 안내표지판	48개	0 (디자인보완중)	205백만원	28백만원	432개

※ 전문가자문, 디자인심의를 거쳐 디자인 개선안을 마련하였으나, 시장 요청사항으로 디자인 추가 보완중임

□ 정비 추진사항

❍ 안내표지판 개선을 위한 디자인 시안 마련

- 한양도성 자문위원회 전문가자문 (9.25)

- 한양도성 자문위원회 전문가자문 (11.13)

-  서울시민디자인위원회 심의(11.20 조건부동의)

-  서울시민디자인위원회 조건부 동의사항 보고(12.4)

❍ 우선정비 시범사업 공사발주

- 계약심사 완료 및 공사발주 (12.30)

□ 추진상 장애요인

❍  시장보고 결과, 색상․형태 등 디자인 재검토, 문화재 보존·관리에 전문성이 있는 민간 재단과 협의・협업하여 디자인 개선방안 마련 요청

-   문화재청과 협업(안내판 디자인 가이드라인 재능기부) 경험이 있는 민간재단(아름지기) 협의결과, 디자인 보완에 최소 6개월 이상 소요

- 상반기 중 디자인 결과를 원한다면, 자문형식으로 개선 방향만 의견 제시할 수 있으나, 이 경우 원하는 방향으로 디자인 되지 않을 수 있음

□ 향후계획

❍ 2014. 1 : 민간재단 참여 디자인 추가 개선 협업방안 마련

❍ 2014. 5 : 수량이 가장 많은 길표지판에 대하여 우선 디자인 완료

❍ 2014. 6 : 길표지판(219개) 우선 정비 착수

❍ 2014. 8 : 설명안내판, 통합안내판 등 나머지 안내판 디자인 완료

❍ 2014. 9 : 안내판 정비 공사 발주