사당천 단면확장 기본 및 실시설계

지장물 협의자료(통신관로 및 맨홀)

2019. 04

서울특별시 하천관리과

1

과업의 개요

◎ 과업명

- 사당천(이수역~방배펌프장) 단면확장 기본 및 실시설계

◎ 과업의 목적

- 본과업은 사당역 일대(동작구 및 서초구)의 침수를 저감시키기 위해 이수역
~ 방배펌프장 구간에 암거를 신설함으로써 사당천의 통수능을 증가시키는데
그 목적이 있다.

◎ 과업의 위치

구 분	구 분		연 장
	기 점	종 점
사 당 천	이수역	방배펌프장 일원	750m

◎ 과업기간

- 2018년 5월 ~ 2019년 7월

◎ 주요 과업내용

- 이수역 ~ 방배펌프장 구간에 암거를 신설하여 하천단면을 확장

- 구조물, 포장 및 보도설계, 지장물 이설 및 가시설 설계

◎ 추진현황

- 2018. 05. 14     과업 착수 및 착수계 제출

- 2018. 05~07     기초조사 및 측량, 관거 육안조사(1,2차)

- 2018. 07~08     유관기관 지장물 이설 협의

- 2018. 08.        서초구청 협의 1,2차

- 2018. 08. 17     착수보고

- 2018. 10. 16     변경계약(과업기간 18년11월→19년02월)

- 2018. 11~12     우선시공분 발주 및 착공

◎ 추진계획

- 2019. 01.      추가(예정)구간 측량 및 육안조사

- 2019. 03.      서초구 협의 및 주민설명회(예정)

- 2019.          추가구간 설계진행(예정)

- 2019.          설계자문회의(2차)(예정)

- 2019.          설계 VE(예정)

◎ 위치도

2

평면도 및 현장사진(아르떼 구간)

평 면 도
통신관로(GPR탐사 결과) 통신관로(지하매설물정보시스템) 통신맨홀 3개소
현장 사진
아르떼 아파트 시점부	아르떼 아파트 중점부	아르떼 아파트 종점부

아르떼 아파트

3

평면도 및 현장사진(방배경찰서 구간)

평 면 도
서울시 지하시설물정비시스템 상 통신관로 라인 지하매설물도(KT) 통신관로 확인 (서울시 지하시설물정보시스템 없음)
현장 사진
방배동 497-1도, 455-10대(방배경찰서)

4

이설 계획도

아르떼 아파트

통신맨홀 이설

통신관로(GPR탐사 결과)

통신관로(지하매설물정보시스템)

통신관로(이설계획 위치(안))

방배 경찰서

통신관로 이설