강남역일대 침수방지사업

팀 장 : 김 준 형	☎ 2133-3887
담당자 : 권 혁 정	☎ 2133-3888

□ 사업부서 : 서초구청 안전치수과

□ 사업개요

○ 근     거 : “강남역 일대 배수개선 대책 검토 및 기본·실시설계”용역에 따른 단기                   대책사항임.

○ 위     치 : 서초대로 77길~78길(우성아파트 사거리 ~ 강남대로 61길)

○ 규     모 : □2×2m, 39개소 격벽철거(고지배수로 통수구 설치)

- 격벽철거를 위한 Box 구조물 현장조사 및 실시설계, 공사 시공

○ 총사업비 : 1,000백만원

○ 사업기간 : 2014.04.~2014.12

□ 추진현황 및 향후 계획

○ ‘14. 04. ~ ’14. 05. : 격벽철거 현장조사, 구조검토 및 설계

○  ‘14. 05. ~ ’14. 06. : 격벽철거 시공

□ 예산배정계획                                           (단위 : 천원)

예산과목	소계	기배정액	배정요구액	배정잔액	산 출 내 역
소 계	1,500,000	0	1,000,000	500,000
시설비	1,500,000	0	1,000,000	500,000	- 격벽철거 설계비 및 공사비

※ 기배정액 반드시 작성, 공란없이 모두 기입

□ 배정사유

○ 강남역일대 침수방지사업 설계 및 공사비

□ 서울위키 등록 여부

○ ‘14년 위키 최근등록일 : ‘14.3.21

○ ‘13년 위키 최근수정일 : ’14.2.7

□ 첨부 : 사업계획서, 방침서, 계약심사 공문, 재배정요구서 등 있을시 첨부