설 계 변 경 내 용

1		공 사 현 황

가. 공 사 명 : 2023년 북악산 북한산공원 보수정비사업(긴급)

나. 도 급 액 : 금220,437,200원

다. 공사기간 : 2023.10.10.~2024.1.17.

라. 발 주 처 : 성북구청 공원녹지과

마. 도 급 자 : ㈜다다이앤씨 대표 김미진

2		설계변경 내용

가. 설계변경 사유

- 발주처 검토 요청사항 및 현장 실정사항 발생에 따른 변경

[공원녹지과-26691(2023.11.29.)호, 27391(2023.12.07.)호, 다다제 2023 – 1208(2023.12.08.)호,             다다제 2023 – 1214(2023.12.14.)호]

구 분	설 계 변 경 내 용	비 고
북악산 근린공원	▶ 발주청 요청 및 현장실정을 반영하여 철거물량 조정 - 조경석 3단쌓기 철거 : 3.4m → 0 - 조경석 1단쌓기 철거 : 6m → 0 - 토사절취 : 39.1㎥ → 0 - 아스팔트 포장 철거 : 13.3㎡ → 0 - 콘크리트포장 절단 : 14.4m → 0 - 석축철거(H2.0) : 2m → 0 - 석축철거A(1.5㎡) : 0 → 1식 - 석축철거(H1.5) : 2m → 0 - 석축철거B(0.6㎡) : 0 → 1식 - 스트로브잣 제거(H3.5xW1.5) : 7주 → 0 - 스트로브잣 제거-1(H3.5xW1.5, 벌목) : 0 → 7주 - 아까시나무 제거(H3.0xR8) : 9주 → 0 - 아까시나무 제거-1(H3.0xR8, 벌목): 0 → 9주 - 아까시나무 제거(H4.5xR15) : 6주 → 0 - 아까시나무 제거-1(H4.5xR15, 벌목) : 0 → 6주 - 아까시나무 제거(H4.0xR10) : 15주 → 0 - 아까시나무 제거-1(H4.0xR10) : 0 → 15주 - 영산홍 이식 : 200주 → 0 - 회양목 이식 : 110주 → 0	기승인 공원녹지과–27710 (2023.12.11.)호 공원녹지과–28099 (2023.12.15.)호
북악산 근린공원	▶ 발주청 요청 및 현장실정을 반영하여 시설물 변경 및 포장공종 제외 - 목재마감(L20860) : 1식 → 0 - 목재마감-1(L19950) : 0 → 1식 - 핸드레일 : 11경간 → 0 - 데크계단A 도색(W1500) : 1식 → 0 - 데크계단A 도색-1(W1500, 69.8㎡) : 0 → 1식 - 데크계단C 도색(W1500) : 1식 → 0 - 데크계단C 도색-1(W1500, 10.2㎡) : 0 → 1식 - 데크계단D 도색(W1500) : 1식 → 0 - 데크계단D 도색-1(W1500, 12㎡) : 0 → 1식 - 데크계단E 도색(W1500) : 1식 → 0 - 데크계단E 도색-1(W1500, 96.4㎡) : 0 → 1식 - 데크계단F 도색(W1500) : 1식 → 0 - 데크계단F 도색-1(W1500, 14.8㎡) : 0 → 1식 - 옹벽마감 : 14.8m → 0 - 경관옹벽A : 1식 → 0 - 경관옹벽B : 1식 → 0 - 목재바닥깔기(900x1500) : 2개소 → 0 - 목재바닥깔기-1(300x1500) : 0 → 6개소 - 조경석 2단쌓기(40*50*60) : 0 → 4.9m - 조경석 3단쌓기(40*50*60) : 0 → 6.2m - 투수블록포장A : 29㎡ → 0 - 투수블록포장B : 11.8㎡ → 0 - 화강석경계석(직선, 150x150x1000) : 11.1m → 0 - 화강석경계석(곡선, 150x150x1000) : 13.5m → 0 - 화강석경계석(곡선, 100x100x1000) : 14.3m → 0 ▶ 발주청 요청 및 현장실정을 반영하여 식재계획 및 물량 변경 - 산수유 이식(R8) : 0 → 6주 - 산철쭉 이식(H0.3xW0.3) : 0 → 100주 - 화살나무 전정(H1.5xW0.6) : 0 → 75㎡ - 블루엔젤(H2.0xW0.6) : 0 → 15주 - 산철쭉A(H0.3xW0.3) : 0 → 300주 - 가우라 : 750본 → 0 - 금계국 : 600본 → 0 - 노랑줄무늬사사 : 500본 → 640본 - 돌단풍 : 900본 → 0 - 루드베키아 : 360본 → 530본 - 무스카리 : 550본 → 450본 - 백합 : 450본 → 520본 - 버베나 : 240본 → 500본 - 벌개미취 : 1,100본 → 330본 - 상록패랭이 : 900본 → 350본 - 수크령 : 880본 → 0 - 억새 : 280본 → 0 - 참나리 : 850본 → 420본	기승인 공원녹지과–27710 (2023.12.11.)호 공원녹지과–28099 (2023.12.15.)호
정릉동	▶ 현장실정을 반영하여 철거물량 조정 - 등의자이설(W1800x550) : 2개소 → 0 - 등의자이설-1(W1800x550, 기초 재활용) : 0 → 4개소 - 그네의자 이설(2450x1500) : 1개소 → 0 - 그네의자 이설-1(2450x1500, 기초 재활용) : 0 → 1개소 - 터널통과하기 철거(2700x2000) : 1개소 → 0 - 터널통과하기 철거-1(2700x2000, 기초 변경) : 0 → 1개소 - 목재데크 철거(7000x4000) : 1개소 → 0 - 목재데크 철거-1(7000x4000, 기초 변경) : 0 → 1개소 - 집수정 철거 : 1개소 → 0 - 트렌치 철거(W300) : 2.1m → 0 - 트렌치 철거-1(W200) : 0 → 7.4m ▶ 발주청 요청 및 현장실정을 반영하여 시설물 및 포장계획 변경 - 핸드레일 : 55경간 → 0 - 경계엣지(H100) : 41.3m → 0 - 경계엣지(H108) : 0 → 10m - 멀칭재 포설(T30) : 0 → 23.1㎡ - 조경석 쌓기 : 4.2m → 0.6m - 조경석 2단쌓기 : 6.2m → 10.1m - 조경석 3단쌓기 : 11.8m → 13.2m - 온몸역기올리기 : 1개소 → 0 - 온몸역기내리기 : 1개소 → 0 - 하늘걷기 : 1개소 → 0 - 입식자전거 : 1개소 → 0 - 마라톤운동 : 1개소 → 0 - 양팔줄당기기 : 1개소 → 0 - 야외운동기구(역기올리기/허리돌리기) : 0 → 1개소 - 야외운동기구(하늘걷기/옆파도타기) : 0 → 1개소 - 야외운동기구(마라톤운동/등지압기) : 0 → 1개소 - 야외운동기구(양팔줄당기기/온몸근육풀기) : 0 → 1개소 - 야외운동기구(입식자전거) : 0 → 1개소 - 집수정(450x500) : 2개소 → 0 - 집수정-1(300x400) : 0 → 1개소 - 벤치플륨관(W300) : 2.1m → 0 - 트랜치(W200) : 0 → 7.4m - 그레이팅 설치(700x700x50T) : 0 → 5개소 - 그레이팅 설치(300x1000x30T) : 0 → 2m - 토사되메우기(마사토) : 1식 → 0 - 토사되메우기(현장 내 토사) : 0 → 1식 - 흙콘크리트포장 : 441.6㎡ → 0 - 혼합골재포설 및 다짐(T150) : 0 → 351.9㎡ - 야자매트포장(W1.2) : 0 → 118m - 야자매트포장(W2.4) : 0 → 78m - 인조화강블럭포장(T60) : 0 → 89.7㎡ ▶ 발주청 요청 및 현장실정을 반영하여 식재계획 및 물량 변경 - 산딸나무 이식(H2.5xR6) : 5주 → 0 - 산딸나무 이식(R9) : 0 → 4주 - 산딸나무 이식(R11) : 0 → 1주 - 산딸나무 이식(R12) : 0 → 1주 - 금계국 : 250본 → 140본 - 벌개미취 : 690본 → 200본 - 상록패랭이 : 350본 → 190본 - 아스타(17cm) : 0 → 700본 - 잔디(600x400) : 0 → 70㎡	기승인 공원녹지과–27710 (2023.12.11.)호 공원녹지과–28099 (2023.12.15.)호
정릉동		기승인 공원녹지과–27710 (2023.12.11.)호 공원녹지과–28099 (2023.12.15.)호
북한산 근린공원	▶ 발주청 요청 및 현장실정을 반영하여 시설물계획 변경 - 육각정자 목재 도색 : 1개소 → 0 - 육각정자 철거(6500x6500) : 0 → 1개소 - 방향안내판 : 2개소 → 0 - 금지안내판 : 1개소 → 0 - 시설안내판 : 1개소 → 0 - 구역안내판 : 1개소 → 0 - 초화원 안내판 : 1개소 → 0 - 종합안내판(1500x1000, H1800) : 0 → 1개소 - 금지행위안내판(700x1200, H1900) : 0 → 1개소 - 공원이용안내판(600x900, H1800) : 0 → 1개소 - 방향안내판(600x150, H1800) : 0 → 2개소 - 방향안내판(날개, 600x150, 30T) : 0 → 2개소 - 퍼걸러(6.5x6.5x3.8) : 0 → 1개소 - 경계엣지(H108) : 0 → 37m ▶ 발주청 요청 및 현장실정을 반영하여 식재계획 및 물량 변경 - 화살나무 : 250주 → 370주 - 덜꿩나무(H1.0xW0.4) : 0 → 380주 - 산철쭉A(H0.3xW0.3) : 0 → 400주 - 가우라 : 430본 → 1,180본 - 금계국 : 840본 → 650본 - 노랑줄무늬사사 : 560본 → 850본 - 루드베키아 : 530본 → 730본 - 무스카리 : 670본 → 450본 - 백합 : 240본 → 370본 - 버베나 : 560본 → 720본 - 벌개미취 : 390본 → 180본 - 상록패랭이 : 240본 → 130본 - 수크령 : 590본 → 350본 - 억새 : 700본 → 1,210본 - 옥잠화 : 430본 → 900본 - 원추리 : 220본 → 290본 - 참나리 : 310본 → 740본 - 쑥부쟁이(8cm) : 0 → 930본 - 돌단풍(11cm) : 0 → 1,690본
부 대 공 사	▶ 정릉동구간 대형 건설장비 진입이 곤란하여 현장 내 소운반 반영 - 소운반(L=40m) : 152,350kg → 0 - 혼합골재소운반(B/H0.2+D/T2.5Ton(L=45.3m)) : 0 → 70.65㎥ - 모래소운반(B/H0.2+D/T2.5Ton(L=45.3m)) : 0 → 16.48㎥ - 조경석소운반(B/H0.2+D/T2.5Ton(L=45.3m)) : 0 → 22.53ton - 콘크리트소운반(B/H0.2+D/T2.5Ton(L=45.3m)) : 0 → 26.57ton ▶ 미사용 안전관리비 정산 및 공사현장 폐합휀스 실규격·물량으로 반영 - PE 가설휀스 3개월(1500x900x410) : 30개 → 0 - 가림막휀스(3개월, 1200x2000) : 0 → 11경간 - 신호수(보행안전도우미) : 5일 → 0 ▶ 철거(제거)물량 변동에 따른 폐기물량 변경 반영 - 기계상차 : 64.49㎥ → 62.33㎥ - 폐콘크리트 : 25.55ton → 10.07ton - 폐목재 : 13.01ton → 15.72ton - 폐아스콘 : 3.83ton → 0 - 고재처리(철재) : 0 → 1,040.005kg	기승인 공원녹지과–27710 (2023.12.11.)호 공원녹지과–28099 (2023.12.15.)호
기 타	▶ 어린이놀이공간 활동·설치검사비 반영 - 어린이놀이공간 활동·설치검사 : 0 → 1식
관 급 자 재	▶ 발주청 요청 및 현장실정에 따른 관급자재 실물량 정산(붙임 참조)

나. 설계변경 내용

3		변 경 금 액

구 분		공 사 비(원)		증 감	비 고
		당 초	변 경
총공사비		391,492,800	375,021,960	-16,470,840
도급비	공급가액	200,397,455	201,894,546	1,497,091
	부 가 세	20,039,745	20,189,454	149,709
	계	220,437,200	222,084,000	1,646,800
관급자재비		171,055,600	152,937,960	-18,117,640

끝.