세출예산 변경 요구서

문화본부 한양도성도감

o 변경내역

(단위:천원)

예산과목			예산현액 (이월예산)	증감현황		변경내용
단위사업	세부사업	통계목		증	감
한양도성 보존정비	한양도성 탐방안내센터 확보	계	1,489,773	-	-
		사무관리비(201-02)	118,000	-	-	118,000
		공공운영비(201-02)	18,400	-	-	18,400
		기타보상금(301-11)	12,000	-	-	12,000
		시설비(401-01)	1,289,373 (1,174,373)	27,000 (27,000)	-	1,316,373 (1,201,373)
		감리비(401-02)	(34,000)	-	(△11,000)	(23,000)
		시설비부대비(401-03)	(18,000)	-	(△16,000)	(2,000)

o 변경사유

- 1940년에 지어진 목조건물인 옛시장공관을 리모델링하는 사업으로, 예측할 수 없었던 흰개미 피해 노후목재 보강 및 폐기물 처리물량이 증가하여 부족한 공사비 충당을 위해 과목변경 필요

- 감리비(11,000천원)와 시설부대비(16,000천원)을 시설비로 과목변경

2016년  4월 21일

문화본부장  고 홍 석 (인)

기획조정실장  귀하