설 계 변 경  사 유 서

1. 공 사 명 : 2020년 토목 시설물 유지보수공사(연간단가)-난지

2. 공사개요 : 센터내시설물을 연간단가로 유지보수 공사

3. 공사기간 : ‘2020. 03. 02 ~ ’2020. 12. 23

4. 도 급 비 : 당초 – 일금사억칠백팔십팔만구백원정(￦407,988,900)

변경 - 일금사억칠백팔십팔만구백원정(￦407,988,900)

증액 - 변경사항 없음

5. 도 급 사 : 성복공영(주)

6. 공사내역 : ‘2020년도 센터내 시설물 유지보수공사

7. 설계변경 사유

-. 센터내 유지보수에 필요한 신규물량 발생 및 물량정산에 따른 변경

공 종	규 격	수 량		단위	증 감	비 고
		당초	변경
1. 토 공
터파기	인력0~1m	50	10	㎥	- 40
터파기	BH04	20	10	㎥	- 10
되메우기	인력	50	10	㎥	- 40
되메우기(기계)	BH04	20	10	㎥	- 10
현장내 잔토처리	인력	50	10	㎥	- 40
잔토운반	DT2.5톤	50	10	㎥	- 40
콘크리트(인력)깨기	소형장비	20	1	㎥	- 19.125
콘크리트(기계)깨기	BH04	100	10	㎥	- 90
아스콘(인력)깨기	인력	30	10	㎥	- 20
아스콘(기계)깨기	BH04+대형브레이카	100	10	㎥	- 90
폐기물상차	BH07	500	10	㎥	- 490
레미콘타설		50	10	㎥	- 40
표면마무리	콘크리트면	195	10	㎡	- 185
배수로 준설		125	10	㎥	- 115

공 종	규 격	수 량		단위	증 감	비 고
		당초	변경
2. 구조물공
맨홀설치	1호	5	5	개소
원심력철근콘크리트관	D=300mm 인력	30	5	m	- 25
원심력철근콘크리트관	D=450mm 기계	30	5	m	- 25
원심력철근콘크리트관	D=600mm 기계	30	5	m	- 25
빗물받이설치	400*500mm	10	5	개소	- 5
보차도경계측구	B=50cm,레미콘	50	10	m	- 40
원형맨홀인상및인하	초속경사용	10	10	개소
원형맨홀인상및인하	보통사용	10	10	개소
보차도경계블럭 설치	15*17*20*100cm	50	20	m	- 30
보차도경계석 설치	18*20*100cm	50	20	m	- 30
플륨관설치	중량 50~150Kg미만	50	1	m	- 49
플륨관설치	중량 150~350Kg미만	50	1	m	- 49
유도배수관설치	D=100mm	50	10	m	- 40
유도배수로트랜치설치		50	10	m	- 40
방화문 설치	900*2100mm	10	10	개소
배수구설치	D150mm용	10	10	개소
배수관설치	스텐인레스D150mm T2mm	100	100	m
수성페인트	로울러칠,외벽 2회	100	100	㎡
철재도색	녹막이칠+조합페인트	100	14	㎡	- 86
스텐레스 뚜껑설치	1.22 * 750, 4t	0	8	개소	+ 8	신규단가
스텐레스 뚜껑설치	1.10 * 1.10, 4t	0	17	개소	+ 17	신규단가
환풍구 스텐강판 교체	600*600, 4t	0	6	개소	+ 6	신규단가
그레이팅 설치	995*200*44*50*3	0	1	EA	+ 1	신규단가
그레이팅 설치	995*500*44*50*3	0	113	EA	+ 113	신규단가
에폭시 페인트	방수용	0	1,193	㎡	+ 1,193	신규단가
휀스 재설치	10경간	0	1	식	+ 1	신규단가
집수정 설치	600*600*850	0	2	개소	+ 2	신규단가
배수펌프 설치	0.75kw 이하	0	2	개소	+ 2	신규단가

공 종	규 격	수 량		단위	증 감	비 고
		당초	변경
3. 포 장 공
절삭후 아스팔트덧씌우기	기계(H=5cm)	5	5	a
아스팔트(중층)포장	소규모장비 인력,T=7.5cm	5	5	a
아스팔트(중층)포장	기계,T=7.5cm	5	5	a
아스팔트(표층)포장	소규모장비 인력,T=5cm	5	5	a
아스팔트(표층)포장	기계,T=5cm,3m<시공폭	5	5	a
띠모양 포장복구	띠모양포장(소파보수)	5	1	a	- 4
혼합기층공	인력,T=20cm,소규모장비	100	1	M3	- 99
보조기층	인력,T=30cm,소규모장비	100	1	M3	- 99
콘크리트포장	레미콘,T=20cm	5	1	a	- 4
콘크리트포장	인력비빔,T=10cm	1	1	a
콘크리트절단	T=3.2mm	500	100	m	- 400
아스팔트절단	T=3.2mm	500	100	m	- 400
차선도색(신설포장)	융착식, 수동, 황색실선	100	50	㎡	- 50
차선도색(신설포장)	융착식, 수동, 백색파선	100	50	㎡	- 50

공 종	규 격	수 량		단위	증 감	비 고
		당초	변경
5. 조 경 공
주목 굴취	h=2m	40	1	주	- 39
주목 식재	h=2m	40	1	주	- 39
주목 굴취	h=3m	40	1	주	- 39
주목 식재	h=3m	40	1	주	- 39
주목 굴취	r=12cm	20	1	주	- 19
주목 식재	r=12cm	20	1	주	- 19
주목 굴취	r=15cm	20	1	주	- 19
주목 식재	r=15cm	20	1	주	- 19
주목 굴취	r=18cm	15	1	주	- 14
주목 식재	r=18cm	10	1	주	- 9
주목 굴취	r=25cm	10	1	주	- 9
주목 식재	r=25cm	10	1	주	- 9
평때심기		100	1	㎡	- 99

공 종	규 격	수 량		단위	증 감	비 고
		당초	변경
4. 보 수 공
콘크리트 균열보수	TPS 건식,B=0.3~0.5mm, t=150mm	20	0	m	- 20
콘크리트 균열보수	TPS 건식,B=0.5~1.0mm, t=150mm	20	0	m	- 20
콘크리트 균열보수	TPS 건식,B=1.0~3.0mm, t=150mm	20	0	m	- 20
콘크리트 균열보수	TPS 건식,B=3.0~5.0mm, t=150mm	20	0	m	- 20
콘크리트 균열보수	TPS 습식,B=0.3~0.5mm, t=150mm	20	0	m	- 20
콘크리트 균열보수	TPS 습식,B=0.5~1.0mm, t=150mm	20	0	m	- 20
콘크리트 균열보수	TPS 습식,B=1.0~3.0mm, t=150mm	20	0	m	- 20
콘크리트 균열보수	TPS 습식,B=3.0~5.0mm, t=150mm	20	0	m	- 20
콘크리트 균열보수	습식SPI=0.3mm t=100mm	20	5	m	- 15
콘크리트 균열보수	건식SPI=0.3mm, t=100mm	20	5	m	- 15
콘크리트 균열보수	건식SPI=0.5mm, t=100mm	20	5	m	- 15
콘크리트 균열보수	습식SPI=0.5mm t=100mm	20	5	m	- 15
콘크리트 균열보수	습식SKI=0.3mm 미만 t=100 ~ 150mm	20	0	m	- 20
콘크리트 균열보수	습식SKI=0.3~1mm 미만 t=100 ~ 150mm	20	0	m	- 20
콘크리트 균열보수	건식SKI=0.3mm 미만 t=100 ~ 150mm	20	0	m	- 20
콘크리트 균열보수	건식SKI=0.3~1mm 미만 t=100 ~ 150mm	20	0	m	- 20
죠인트 보수	동판60*100*0.12cm	20	0	m	- 20
신축죠인트보수	실리콘	40	2,406	m	+ 2,366
익스펜션 조인트 보수	HPEM-R 줄눈용,B=5cm, T=5cm	20	0	m	- 20
익스펜션 조인트 보수	HPEM-R 줄눈용,B=10cm, T=5cm	20	0	m	- 20
표면보수	라파콘, 벽체	20	10	㎡	- 10
단면복구보수	라파콘, T=10mm	20	10	㎡	- 10
단면복구보수	라파콘, T=20mm	20	111	㎡	+ 91
단면복구보수	라파콘, T=30mm	20	10	㎡	- 10
표면보수	HWD, 벽체	20	0	㎡	- 20
단면복구보수	HWD, T=10mm	20	0	㎡	- 20
단면복구보수	HWD, T=20mm	20	0	㎡	- 20
표면보수	MA, 무광, t=0.6mm,표면양호부, 벽체	20	0	㎡	- 20
단면복구보수	MA, t=10mm	20	0	㎡	- 20
단면복구보수	MA, t=20mm	20	0	㎡	- 20
표면보수	CRM, 습윤,보강시트 1겹	20	0	㎡	- 20
단면복구보수	CRM t=10mm, 습윤,보강시트1겹	20	0	㎡	- 20
단면복구보수	CRM t=20mm, 습윤,보강시트1겹	20	0	㎡	- 20
표면보수	EG하이프로, 벽체	20	0	㎡	- 20
단면복구보수	EG하이프로, t=30mm, 벽체	20	0	㎡	- 20
단면복구보수	EG하이프로, t=50mm, 벽체	20	0	㎡	- 20
단면복구보수	ERM, t=10mm, 벽체	20	0	㎡	- 20
단면복구보수	ERM, t=20mm, 벽체	20	0	㎡	- 20
단면복구보수	ERM, t=30mm, 벽체	20	0	㎡	- 20
표면보수	미세균열	20	0	㎡	- 20
단면복구보수	리폼, t=10mm	20	0	㎡	- 20
단면복구보수	리폼, t=20mm	20	0	㎡	- 20
강관틀비계	조립 및 해체	40	10	㎡	- 30
균열보수	충전공법	0	740	m	+ 740	신규단가

공 종	규 격	수 량		단위	증 감	비 고
		당초	변경
6. 부 대 공
공사안내	1.8*0.9m	2	2	개
가설사무실(6개월미만)	콘테이너(6*3*2.6m)	1	1	동
가설창고(6개월미만)	콘테이너(3*3*2.6m)	1	1	동
PE안전휀스	1500*900*400	20	10	개	- 10

8. 신규단가 현황

위 치	공 종	규 격	1차	2차	3차	계	비고
센터내	스텐레스 뚜껑설치	1.22 * 750, 4t	6		2	8	NO.1
센터내	스텐레스 뚜껑설치	1.10 * 1.10, 4t	6		11	17	NO.2
센터내	환풍구 스텐강판 교체	600*600, 4t		6		6	NO.8
센터내	그레이팅 설치	995*200*44	1			1	NO.3
센터내	그레이팅 설치	995*500*44	24		89	113	NO.4
센터내	에폭시 페인트	방수용	896	297		1193	NO.6
비닐하우스 경계	휀스 재설치	10경간	1			1	NO.7
유입펌프장	집수정 설치	600*600*850			2	2	NO.9
유입펌프장	배수펌프 설치	0.75kw 이하			2	2	NO.10
센터내	균열보수	충진공법	732	7.7		739.7	NO.5