설 계 변 경  사 유 서

1. 공 사 명 : ‘2017년 제1처리장 최초침전지 보수공사

2. 공사개요 : 최초침전지 단면보수 공사

3. 공사기간 : ‘2017. 6. 21 ~ ’2017. 12. 23

4. 도 급 비 : 당초 - 칠억삼백이십삼만오천구백십원정(￦703,235,910)

변경 - 육억칠천사백육십삼만원정(￦674,630,000)

감액 – 이천팔백육십만오천구백십원정(￦28,605,910)

5. 도 급 사 : ㈜다전디자인 그룹

6. 공사내역 : ‘2017년도 제1처리장 최초침전지 보수공사

- 제1처리장 최초침전지 4개지 단면보수

7. 설계변경 사유

가. 보험료 정산 및 치핑 방법 변경에 따른 물량 변경

나. 주요 물량변경 내용

주 요 공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증 감	비고
1. 보수공
단면복구보수	T=10mm, 벽체	㎡	2,227	2,227
단면복구보수	T=20mm, 벽체	㎡	1,669	1,669
단면복구보수	T=20mm, 천정	㎡	514	514
웨어설치		㎡	371	371
콘크리트 열화단면제거	기계	㎥	65.9	21.8	감 44.1
표면처리	워터젯치핑	㎡	-	2,227.5	증 2,227.5
2. 부대공
강관비계(벽체)	복식, 3개월	㎡	3,175	3,175
강관	48.6㎜*2.3㎜	m	10,504	10,504
받침철물	플레이트	ea	1,232	1,232
이음철물	연결핀	ea	2,576	2,576
조임철물	직교램프	ea	5,632	5,632
안전팔판(합판)	내수1급 12*122*244	㎡	1,176	1,176
공사용안내간판	900×1800	개소	2	2
가설사무실	(3*6M 6개월미만)	동	1	1
가설창고	(3*6M 6개월미만)	동	1	1
임시환기시설 설치	송풍기	개소	16	16
자재 및 폐기물 운반		㎥	131	131
바닥청소		㎡	2,491	2,491