설 계 변 경  사 유 서

1. 공 사 명 : 2020년 토목 시설물 유지보수공사(연간단가)-난지

2. 공사개요 : 센터내시설물을 연간단가로 유지보수 공사

3. 공사기간 : ‘2020. 03. 02 ~ ’2020. 12. 23

4. 도 급 비 : 당초 – 일금사억칠백팔십팔만구백원정(￦407,988,900)

변경 - 일금육억원정(￦600,000,000)

증액 – 일금일억구천이백일만일천일백원정(￦192,011,100)

5. 도 급 사 : 성복공영(주)

6. 공사내역 : ‘2020년도 센터내 시설물 유지보수공사

7. 작업지시 사항

구 분	주요변경 내역	예산액(원)
1차 작업지시	실링제 도포 375개소
	기둥단면보수 194개소
	실란트 재설치 79개소
	스텐레스뚜껑교체 12개소
	그레이팅설치 2개소
	휀스 재설치
	기 타
	소 계
2차 작업지시	실란트 재설치 791m
	실링제 도포 5개소
	기둥단면보수 7개소
	마감재도포 258개소
	환풍구 교체 6개소
	기 타
	소 계

구 분	주요변경 내역	예산액(원)
3차 작업지시	그레이팅 설치 1개소
	스텐레스 뚜껑 교체 13개소
	집수정 설치 2개소
	기 타
	소 계
4차 작업지시	조인트 보수 370m
	환기구 기초 보수 30개소
	구조물 보수보강 1개소
	조인트 보수 161m
	충전보수 14m
	균열보수(건식) 347m
	보차도 경계석 76m
	구조물 보수보강 1개소
	기 타
	소 계
5차 작업지시	콘크리트 철거후 재설치 1개소
	센터내 긴급포장 보수 2.3a
	균열보수(습식) 59m
	관리동 바닥 단면보수 19 m2
	창틀 실리콘제거,설치 209m
	맨홀인상 4개
	보차도 경계석 설치 43m
	오수펌프장 긴급포장보수 3.0a
	기 타
	소 계

구 분	주요변경 내역	예산액(원)
6차 작업지시	터파기 및 도로 컷팅공사 1개소
	조적쌓기, 배수로 만들기 1개소
	방화문 설치 24개소
	외벽 보수 강관비계 1139 m2
	외벽 보수 단면보수 328 m2
	외벽 보수 에폭시 페인트 558 m2
	기 타
	소 계
	순공사비계
계	공과잡비
	공사비계

8. 설계변경 사유

-. 센터내 유지보수에 필요한 신규물량 발생 및 물량정산에 따른 변경

공 종	규 격	수 량		단위	증 감	비 고
		당초	변경
1. 토 공
터파기	인력0~1m	10	0	㎥	- 10
터파기	BH04	10	0	㎥	- 10
되메우기	인력	10	0	㎥	- 10
되메우기(기계)	BH04	10	0	㎥	- 10
현장내 잔토처리	인력	10	0	㎥	- 10
잔토운반	DT2.5톤	10	0	㎥	- 10
콘크리트(인력)깨기	소형장비	0.875	5.775	㎥	+ 4.90
콘크리트(기계)깨기	BH04	10	0	㎥	- 10
아스콘(인력)깨기	인력	10	0	㎥	- 10
아스콘(기계)깨기	BH04+대형브레이카	10	26.69	㎥	+ 16.69
폐기물상차	BH07	10	4.24	㎥	+ 5.76
레미콘타설		10	4.24	㎥	+ 5.76
표면마무리	콘크리트면	10	0	㎡	10
배수로 준설		10	2.47	㎥	7.53

공 종	규 격	수 량		단위	증 감	비 고
		당초	변경
2. 구조물공
맨홀설치	1호	5	0	개소	- 5
원심력철근콘크리트관	D=300mm 인력	5	0	m	- 5
원심력철근콘크리트관	D=450mm 기계	5	0	m	- 5
원심력철근콘크리트관	D=600mm 기계	5	0	m	- 5
빗물받이설치	400*500mm	5	0	개소	- 5
보차도경계측구	B=50cm,레미콘	10	0	m	- 10
원형맨홀인상및인하	초속경사용	10	0	개소	- 10
원형맨홀인상및인하	보통사용	10	4	개소	6
보차도경계블럭 설치	15*17*20*100cm	20	0	m	20
보차도경계석 설치	18*20*100cm	20	119	m	+ 99
플륨관설치	중량 50~150Kg미만	1	0	m	- 1
플륨관설치	중량 150~350Kg미만	1	0	m	- 1
유도배수관설치	D=100mm	10	0	m	- 10
유도배수로트랜치설치		10	0	m	- 10
방화문 설치	900*2100mm	10	24	개소	+ 14
배수구설치	D150mm용	10	0	개소	10
배수관설치	스텐인레스D150mm T2mm	100	0	m	100
수성페인트	로울러칠,외벽 2회	100	0	㎡	100
철재도색	녹막이칠+조합페인트	14	19.3	㎡	+ 5.3
스텐레스 뚜껑설치	1.22 * 750, 4t	8	8	개소
스텐레스 뚜껑설치	1.10 * 1.10, 4t	17	17	개소
환풍구 스텐강판 교체	600*600, 4t	6	6	개소
그레이팅 설치	995*200*44*50*3	1	1	EA
그레이팅 설치	995*500*44*50*3	113	113	EA
에폭시 페인트	방수용	1,193	1,786	㎡	+ 593
휀스 재설치	10경간	1	1	식
집수정 설치	600*600*850	2	2	개소
배수펌프 설치	0.75kw 이하	2	2	개소
보차도경계석 철거	설치비의 50%	0	119	m	+ 119
보차도경계석(150*150*1000)	직선,사급자재	0	73	m	+ 73
보차도경계석(150*150*1000)	곡선,사급자재	0	7	m	+ 7
보차도경계석(250*200*1000)	직선,사급자재	0	45	m	+ 45
앵커볼트 설치	M2, 110	0	69	ea	+ 69
철근가공조림		0	131	kg	+ 131
유로폼 설치 및 해체		0	33	m2	+ 33
펌프카		0	2	일	+ 2
전기, 설비공사 지원공사		0	1	식	+ 1

공 종	규 격	수 량		단위	증 감	비 고
		당초	변경
3. 포 장 공
절삭후 아스팔트덧씌우기	기계(H=5cm)	5	0	a	- 5
아스팔트(중층)포장	소규모장비 인력,T=7.5cm	5	0	a	- 5
아스팔트(중층)포장	기계,T=7.5cm	5	0	a	- 5
아스팔트(표층)포장	소규모장비 인력,T=5cm	5	0	a	- 5
아스팔트(표층)포장	기계,T=5cm,3m<시공폭	5	0	a	- 5
띠모양 포장복구	띠모양포장(소파보수)	1	5.337	a	+ 4.337
혼합기층공	인력,T=20cm,소규모장비	1	0	M3	- 1
보조기층	인력,T=30cm,소규모장비	1	0	M3	- 1
콘크리트포장	레미콘,T=20cm	1	0	a	- 1
콘크리트포장	인력비빔,T=10cm	1	0	a	- 1
콘크리트절단	T=3.2mm	100	264.84	m	+ 164.84
아스팔트절단	T=3.2mm	100	327.8	m	+ 227.8
차선도색(신설포장)	융착식, 수동, 황색실선	50	0	㎡	- 50
차선도색(신설포장)	융착식, 수동, 백색파선	50	0	㎡	- 50
아스콘	#78, 사급자재		82.986	ton	+ 82.986

공 종	규 격	수 량		단위	증 감	비 고
		당초	변경
4. 보 수 공
콘크리트 균열보수	습식SPI=0.3mm t=100mm	5	64.85	m	+ 59.85
콘크리트 균열보수	건식SPI=0.3mm, t=100mm	5	346.5	m	+ 341.5
콘크리트 균열보수	건식SPI=0.5mm, t=100mm	5	0	m	- 5
콘크리트 균열보수	습식SPI=0.5mm t=100mm	5	0	m	- 5
신축죠인트보수	실리콘	2,406	2,938	m	+ 532
익스펜션 조인트 보수	HPEM-R 줄눈용,B=5cm, T=5cm	0	0	m
익스펜션 조인트 보수	HPEM-R 줄눈용,B=10cm, T=5cm	0	0	m
표면보수	라파콘, 벽체	10	0	㎡	+ 10
단면복구보수	라파콘, T=10mm	10	0	㎡	+ 10
단면복구보수	라파콘, T=20mm	111	438	㎡	+ 327
단면복구보수	라파콘, T=30mm	10	39	㎡	+ 29
강관틀비계	조립 및 해체	10	0	㎡	10
균열보수	충전공법	740	800	m	+ 60
실리콘 철거 설치		0	209.54	m	+ 209.54
스텐배수관 제작,설치		0	6	m	+ 6
강관비계 설치,해체		0	1139	㎡	+ 1139

공 종	규 격	수 량		단위	증 감	비 고
		당초	변경
5. 조 경 공
주목 굴취	h=2m	1	0	주	1
주목 식재	h=2m	1	0	주	- 1
주목 굴취	h=3m	1	0	주	- 1
주목 식재	h=3m	1	0	주	- 1
주목 굴취	r=12cm	1	0	주	- 1
주목 식재	r=12cm	1	0	주	- 1
주목 굴취	r=15cm	1	0	주	- 1
주목 식재	r=15cm	1	0	주	- 1
주목 굴취	r=18cm	1	0	주	- 1
주목 식재	r=18cm	1	0	주	- 1
주목 굴취	r=25cm	1	0	주	- 1
주목 식재	r=25cm	1	0	주	- 1
평때심기		1	0	㎡	- 1

공 종	규 격	수 량		단위	증 감	비 고
		당초	변경
6. 부 대 공
공사안내	1.8*0.9m	2	0	개	- 2
가설사무실(6개월미만)	콘테이너(6*3*2.6m)	1	1	동
가설창고(6개월미만)	콘테이너(3*3*2.6m)	1	1	동
PE안전휀스	1500*900*400	20	0	개	- 20

9. 신규단가 현황

위 치	공 종	규 격	4차	5차	6차	계	비고
센터내	보차도경계석 철거	설치비의50%	76	43		119 M	NO.1
센터내	보차도경계석	15*15*100cm (자재, 직선)	73			73 M	NO.2
센터내	보차도경계석	15*15*100cm (자재, 곡선)	7			7 M	NO.3
오수펌프장	보차도경계석	20*25*100cm (자재, 직선)		45		45 M	NO.4
센터내	앵커볼트 설치	M12, 110	33	36		69 EA	NO.5
센터내	철근가공조립	간단	90.147	40.895		131.042 kg	NO.6
센터내	유로폼 설치 해체		28.93	3.90		32.83 M2	NO.7
센터내	펌프카	21M(65~75M3/HR)	1	1		2 일	NO.8
센터내, 오수펌프장	아스콘(사급자재)	#78		82.986		82.986 TON	NO.9
센터내	수밀코킹 철거,설치			209.54		209.54 M	NO.10
센터내	스텐배수관 제작설치		6			6 M	NO.11
센터내	강관비계 설치,해체				1139	1139 M2	NO.12