[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

소방재난본부(소방행정과)

②담당자

(연락처)

소방위 마성제

소방령 김두일

(3706-1390~4)

③정책사업명

소방행정타운 건립

④선정기준

100억 원 이상 예산투자사업

⑤사업기간

2014. 1. ~ 2022.12.

(1 ~ 3단계 사업)

⑥주요내용

○ 사업목적(추진배경)

- 소방환경 변화에 부합한 능동적 현장대응 역량 확보

(세계 최고 훈련시설 건립 및 지휘기관 통합 재난관리시스템 구축)

- 글로벌 안전도시 서울의 위상에 부합한 시민교육 인프라 구축

(119챌린지시설·시민체험시설 등 신설로 안전체험시설 부족 해소)

○ 추진계획

- 건립부지 : 은평구 진관동 물푸레골 (부지면적 : 48,950.1㎡)

- 사업기간 : 2014년 ~ 2022년(9년간 / 3단계별로 추진)

- 소요예산 : 2,804.8억 원(부지매입비 1,534억, 건축비 1,270.8억)

- 시설규모 : 11개 건축물(연면적 35,169㎡), 6개 시설물(11,350㎡)

○ 주요 추진 상황(예산포함)

- 1단계 건립사업 설계용역 의뢰(→ 도시기반시설본부, ’14.1.8.)

- 소방행정타운 건립 변경계획(행정2부시장 방침 제106호, ’14.3.31.)

·부지면적 조정 : 54,780.2㎡ → 48,950.1㎡(-5,830㎡)

·소요예산 조정 : 2,917억 원 → 2,804.8억 원(-112.2억 원)

- 건립부지 매매계약 체결(’14.5.19.)

·매매금액 : 153,353,195천 원(10년 분할 납부)

·계 약 금 : 13,511,294천 원(’14.5.19. 예산집행)

- 부지 경계복원 측량 실시(’14.5.26.~5.30.) : 12,642천 원 소요

- 1단계 사업 설계용역(’14.6~’15.11) : 현상설계, 기본·실시설계

※ 1단계 착·완공(’15.12~’18.6), 2단계(’18년)·3단계(’19~’22년) 추진

⇒ ’14년도 예산현황                                (단위 : 천원)

계	부지매입비	경계복원측량	설계·감리비
15,313,703	13,511,294 (계약금)	12,642	1,789,767 (선금·중간정산)

<기재항목>

① 사업부서 : 사업을 수행하는 부서명을 기재

② 담당자 : 사업 담당자 및 사업부서장을 직급(직위)과함께 기재

③ 정책 사업명 : 추진하는 정책사업명을 기재

④ 선정기준 : 정책실명제 중점관리 대상사업으로 선정한 해당 기준을 기재

⑤ 사업기간 : 사업의 시작 및 종료 시점 기재

⑥ 주요내용 : 사업의 목적 또는 추진배경, 추진계획 및 주요 추진 상황(예산포함) 등 사업 전반에 대해서 구체적으로 기재