택지개발지구, 보금자리주택, 신도시, 쉬프트, 재개발, 재건축 현황

1. 총 괄(인수인계 시설물이 있는 지구)

(2013.08. 현재)

사업소	계	중부	동부	북부	서부	강서	남부	강남	강동
건 수	21	1	0	0	3	4	6	5	2
택지개발	6					1		4	1
보금자리	2					1		1
신도시	1								1
뉴타운	1				1
도시환경정비	4				1		3
재개발	7	1			1	2	3

2. 인수인계 시설물이 있는 지구 현황

(2013.08. 현재)

순번	지구명칭	시행자	사업기간	입주 세대수	인수인계 사항		현재 공정 추진 현황	비 고
					시설물현황	시 기
1	주택재개발 (만리2구역)	조합	‘10. 1월 ~ ‘16. 12월	1,364 세대	D=100~200 L=200m	착공 준비중	2016년 말 입주예정	중부
2	마포구 아현3구역 재개발 아파트	삼성건설 대우건설	‘09. 11월 ~ ‘14. 11월	4천세대 (10천명)	D=200~300, L=1540m	현재 시공중으로 ‘14. 09월 이후	55% ‘14. 10월 입주예정	서부
3	서대문구 가재울 뉴타운4구역아파트	GS건설 SK건설 현대산업개발	‘07. 05월 ~ ‘15. 11월	4.5천세대 (11.2천명)	D=300mm L= 1118m	현재 시공중으로 ‘15. 05월 이후	35% ‘15. 05월 입주예정	〃
4	서대문구 북아현1-3구역재정비촉진구역	대림건설 현대건설	‘11. 03월 ~ ‘16. 09월	5천세대 (12.5천명)	D=200~400 L= 1110m	현재 시공중으로 인수시기미정	15% ‘16. 09월 입주예정	〃
5	천왕2 보금자리주택	SH공사	‘10. 12월 ~ ‘14. 1월	1589세대	D=100~500, L=2.6km	현재 시공 중으로 ‘14.12월 이후	80% ‘14. 10월 입주예정	강서
6	마곡지구	SH공사	‘05.12 ~ ’14.12	12천세대 (36천명)	D=100~1350, L=12km	현재 시공 중으로 ‘14.12월 이후	20% ‘14. 6월 입주예정	〃
7	신정2-1지구 주택재개발정비사업	삼성 물산	‘10.5.31 ~ ’15.5.31	1,285 세대	D=150~300, L=0.905km	미 정	미이주	〃
8	신정2-2지구 주택재개발정비사업	동부 건설	‘10.9.17 ~,15.9.17	352세대	D=150, L=0.06km	미 정	미이주	〃
9	신길5구역 재개발	미정		1,236	D=300mm. L=300m	미정	사업인가후 진척없음	남부
10	신길7 재정비촉진지역	삼성 물산	2013.10 ~2016.10	1,521	D=200mm. L=740m	2016. 06	철거완료	〃
11	신길11 재정비촉진지역	삼성 물산	2013.08 ~2015.12	913	D=200mm. L=520m	2015. 06	철거완료	〃
12	신길3 재정비촉진지역	미정	-	658	D=200mm. L=160m	미정	사업인가후 진척없음	〃

순번	지구명칭	시행자	사업기간	입주 세대수	인수인계 사항		현재 공정 추진 현황	비 고
					시설물현황	시 기
13	상도10 주택재개발	GS건설	'07. 3월 '16. 8월	425	D=50~300mm L=194m	미정	건물 철거중	남부
14	상도 현대엠코 2차	현대엠코	07.11 ~‘13.8월	882세대	D=200mm. L=288m	인수인계 완료	‘13.8.15 입주예정	〃
15	강남 보금자리주택	LH공사	‘10.8월 ~ ‘13.12월	-계획:6821세대 -입주:912세대 -입주중:809세대	D=80~400, L=12370m	현재 시공중으로 ‘13.12월 이후	총7개단지 입주완료(1) 입주중(1) 공사중(5) ‘13.12이후 입주예중	강남
16	세곡2지구	SH공사	‘12.2월 ~ ‘14.12월	-계획:4441세대 -입주:0세대	D=80~300, L=2813m	현재 시공중으로 ‘14.12월 이후	총6개단지 입주완료(0) 입주중(0) 공사중(3) ‘14.2월이후 입주예정	〃
17	내곡지구	SH	2011.11 ~2014.11	-계획:4124세대 -입주:0세대 -입주중:0세대	D=80~400 L=5,665	착공계제출 (8월시공 예정)	공사중	〃
18	서초지구	LH	2010.06 ~2012.10	-계획:3204세대 -입주:1084세대 -입주중:2120세대	D=80~400 L=2754	인수인계 협의중	2단지 입주 1,3,4,5단지 공사진행중	〃
19	우면2지구	SH	2009.10 ~2011.09	-계획:4520세대 -입주:4520세대 -입주중:0세대	D=80~300 L=1443	인수인계 협의중	입주완료	〃
20	위례 신도시	LH공사	‘08. 8월 ~ ‘17. 12월	송파구 17천세대 (43천명)	D=100~700, L=27,000m	현재 시공중으로 ‘17. 12월 이후	1% ‘13. 12월 최초2개동 입주예정	강동
21	문정지구	SH공사	‘07. 6월 ~ ‘13. 12월	법조단지 (법원,검찰청 등)	D=150~300, L=1570m	현재 시공중으로 ‘13. 12월 이후	20%	〃