대규모 단지 급수협의 현황

(택지개발지구, 보금자리주택, 신도시, 쉬프트, 재개발, 재건축 현황)

1. 총 괄(인수인계 시설물이 있는 지구)

(2014.05. 현재)

사업소	계	중부	동부	북부	서부	강서	남부	강남	강동
건 수	22	1	1	0	4	4	5	5	2
택지개발	6					1		4	1
보금자리	3		1			1		1
신도시	1								1
뉴타운	5				2		3
도시환경정비	1				1
재개발	6	1			1	2	2

2. 인수인계 시설물이 있는 지구 현황

(2014.05. 현재)

순번	지구명칭	시행자	사업기간	입주 세대수	인수인계 사항		현재 공정 추진 현황	사업소
					시설물현황	시 기
1	주택재개발 (만리2구역)	조 합	‘10. 1월 ~‘16. 12월	1,202 세대	D=100~200 L=200m	착공 준비중	2016년 말 입주예정	중부
2	마포구 아현3구역 재개발 아파트	삼성건설 대우건설	‘09.11월 ~‘14.11월	4천세대 (10천명)	D=200~300 L=1,540m	‘14. 10월 이후	92% ‘14. 11월 입주예정	서부
3	서대문구 가재울 뉴타운4구역아파트	GS건설 SK건설 현대산업개발	‘07. 05월 ~‘15. 11월	4.5천세대 (11.2천명)	D=300 L= 1,118m	‘15. 10월 이후	60% ‘15. 05월 입주예정	〃
4	서대문구 북아현1-3구역재정비촉진구역	대림건설 현대건설	‘11. 03월 ~‘16. 09월	5천세대 (12.5천명)	D=200~400 L=1,110m	현재 시공중으로 인수시기미정	15% ‘16. 09월 입주예정	〃
5	은평뉴타운 2,3지구	SH공사	2004년 ~ 2016년	9천세대 (22.5천명)	D=80~500 L=20,032m	현재 시공중으로 인수시기미정	90% ‘16. 04월 입주예정	〃
6	신내3지구국민 임대주택단지	SH공사	‘10. 01월 ~‘14. 05월	2개단지 (3,298세대)	배수지가압장 (3,000톤)	‘14.04월	증압장건설로 통수 협의중 ‘14. 11월 입주예정	동부
					D=100~500 L=4.100m	인수완료
7	천왕2 보금자리주택	SH공사	‘10. 12월 ~‘14. 1월	1,589세대	D=100~500 L=2.600m	‘14.12월 이후	90% ‘14. 6월 입주예정	강서
8	마곡지구 (15개단지)	SH공사	‘05.12월 ~ ’14.12월	12천세대 (36천명)	D=100~1350 L=12,000m	9개단지: ‘14.7월 말입주 5개단지: ’16.1월 입주	40% ‘14. 7월 9개단지 입주예정	〃
9	신정2-1지구 주택재개발정비사업	삼성 물산	‘10.5월 ~15.5월	1,285 세대	D=150~300 L=905m	미 정	미이주	〃
10	신정2-2지구 주택재개발정비사업	동부 건설	‘10.9월 ~’15.9월	352세대	D=150 L=60m	미 정	미이주	〃
11	신길7 재정비촉진지역	삼성 물산	‘13.10월 ~‘16.10월	1,722	D=200 L=740m	2016. 06	철거완료	〃
12	신길11 재정비촉진지역	삼성 물산	‘13.8월 ~‘15.12월	949	D=200 L=520m	2015. 06	철거완료	〃
13	신길3 재정비촉진지역	미정	-	785	D=200 L=160m	미정	사업인가 후 진척 없음	〃

순번	지구명칭	시행자	사업기간	입주 세대수	인수인계 사항		현재 공정 추진 현황	사업소
					시설물현황	시 기
14	상도10 주택재개발	GS건설	‘07.3월 ~‘16. 8월	471	D=50~300 L=194m	미정	건물 철거중	남부
15	상도 현대엠코 2차	현대엠코	‘07.11월 ~‘13. 8월	882세대	D=200 L=288m	완료	’13.8 준공	〃
16	강남 보금자리 주택 (8개단지)	LH공사	‘10.8월 ~‘14.12월	-계획:6821세대 -입주:1721세대 -입주중 1065세대	D=80~400 L=12,370m	‘14.3월 이후	총8개단지 입주완료(5) 3개단지: ‘14.12월	강남
17	세곡2지구 (8개단지)	SH공사	‘12.2월 ~‘14.12월	-계획:4441세대 -입주:0세대	D=80~300 L=2,813m	‘14.12월 이후	총8개단지 입주완료(2) 6개단지: ‘14.7월	〃
18	내곡지구 (7개단지)	SH	‘11.11월 ~‘14. 11월	-계획:4521세대 -입주:310세대 -입주중:0세대	D=80~400 L=5,665m	시공중	2개단지 ‘14.12월 입주 5개단지 ‘15.5월	〃
19	서초지구	LH공사	‘10.6월 ~‘12. 10월	-계획:3204세대 -입주:1084세대 -입주중 2120세대	D=80~400 L=2,754m	인수인계중	5개 단지 입주완료 ‘13.12월	〃
20	우면2지구	SH공사	‘09.10월 ~‘11. 9월	-계획:4520세대 -입주:4520세대 -입주중:0세대	D=80~300 L=1,443m	인수인계중	입주완료 ‘11.9월	〃
21	위례 신도시	LH공사	‘08. 8월 ~‘17.12월	송파구 17천세대 (43천명)	D=100~700 L=27,000m	‘17. 12월 이후	20% ‘13. 12월 최초2개단지 입주	강동
22	문정지구	SH공사	‘07. 6월 ~‘16.12월	법조단지 (법원,검찰청 등)	D=150~300 L=1,570m	‘14. 7월 이후	60%	〃

범 례

❍       ’11~’13년도 : 3개소 완료

❍       2014년도 : 6개소 완료 예정

❍       2015년도 이후 : 13개소 완료 예정