2014년 안내표지판 정비 세부추진계획

(문화관광디자인본부/한양도성도감)

Ⅰ		안내표지판 현황 및 추진실적

□ 부서별 안내표지판 관리실태(현황)

❍ 한양도성 주변 안내표지판 정비( 기존정비362, 신설70)

❍「한양도성 안내 통합체계」속에서 위계를 정하여 난립된 안내판 정비

- 45개 종류 362개 → 3가지 유형으로 표준화 정비

표지판 종류	현재수량 (개)	정비대상(개)			비 고
		계	신설	보수
길표지판	219	219		219	디자인보완중
문안설명판	52	52		52
지도안내판	53	53		53
기 타(위험표지등)	38	38		38
추가신설	70	70	70
총 계	432

□ 2013년도 추진실적

❍  디자인 시안 마련(보완중)

- 시민단체 및 관계부서 회의 2회 (`13.7~9)

- 한양도성 자문위원회 전문가자문 (`13.9.25)

- 한양도성 자문위원회 전문가자문 (`13.11.13)

- 서울시민디자인위원회 심의(`13.11.20 조건부동의)

- 서울시민디자인위원회 조건부 동의사항 보고(`13.12.4)

❍  시범정비 대상 안내판 공사 발주(`13.12.27 계약완료)

Ⅱ		문제점 및 장애요인

□ 디자인 시안 추가개선(보완)이 필요함

❍ 시장보고 결과, 색상․형태 등 디자인 재검토, 문화재 보존·관리에 전문성이 있는 민간 재단과 협의・협업하여 디자인 개선 요청

❍  문화재청과 협업(안내판 디자인 가이드라인 재능기부) 경험이 있는 민간재단(아름지기) 협의결과, 디자인 보완에 최소 6개월 이상 소요되며,

❍ 상반기 중 디자인결과를 원한다면, 자문형식으로 개선 방향만 의견 제시할 수 있으나, 이 경우 원하는 방향으로 디자인 되지 않을 수 있음

Ⅲ		세부추진계획

□ 2014년 분기별 정비계획

구 분	목표수량	1/4	2/4	3/4	4/4	예산액(천원)
신 설					70	100,000
정 비				219	31	226,000

□ 세부 추진계획

❍ 2014. 1 : 민간재단 참여, 디자인 개선 협업방안 마련

❍ 2014. 5 : 수량이 가장 많은 길표지판에 대하여 우선적으로 디자인

❍ 2014. 6 : 길표지판(219개) 우선 정비 착수

❍ 2014. 8 : 설명안내판, 통합안내판 등 나머지 안내판 디자인 완료

❍ 2014. 9 : 변경된 안내판 디자인 서울디자인위원회 심의 재상정

- `13.11월 디자인심의 완료하였으나, 시장요청사항으로 변경디자인 마련 후 재상정

❍ 2014. 9 : 안내판 정비 공사 발주