검 토 의 견 서

▢ 공 사 명 : 서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사

▢ 검토건명 : 예비준공검사 검토

1. 검토 목적

시설공사 예비준공검사원 제출에 따른 적정성 검토

2. 공사 개요

1) 위 치

서울특별시 용산구 보광동36번지 ~주성동67번지

2) 규모 : 고가철거 및 신설 : L=753m

① 고가설치 : 2차로 405m, 옹벽설치 208m

② 기존고가 보수보강 : 140m

3) 총공사비 : 20,882백만원

4) 공사기간 : 2011.01.06 ~ 2016.04.30.

5) 시 공 사 : ㈜흥화, 보훈종합건설(주)

6) 감 리 사 : ㈜한국종합기술, ㈜선진엔지니어링 종합건축사사무소

7) 위 치 도

3. 공사 현황

1) 계약 현황

① 계약금액 : 일금 이백팔억팔천이백만원정(￦20,882,000,000)

② 계약년월일 : 2010년 12월 30일

③ 착공년월일 : 2011년 01월 06일

④ 준공예정일 : 2016년 04월 30일

2) 기성 현황

계약금액 (천원)	기 성 액(천원)			비고
	전회	잔여	누계
20,882,000	20,192,000 (96.7%)	690,000 (3.3%)	20,882,000 (100%)

3) 공정 현황

(2016.02.15.)

구 분	계획	실적	대비	비고
공정율(%)	97.07	93.85	96.68

4. 주요 공사 내용

공 종	내 용	단위	도급		기시행		잔여		비고
			수량	금액(천원)	수량	금액(천원)	수량	금액(천원)
1.토공	1.기존구조물깨기외	식	1	408,108	1	405,949	1	2,159
	2.흙깍기	㎥	4,201	2,407	4,201	2,407	0	0
	3.사토운반외	식	1	130,003	1	111,478	1	18,525
	소 계			540,518		519,834		20,684
2.배수공	1.우수관공외	식	1	13,170	1	13,170	1	0
	2.맨홀공	식	1	734	1	734	1	0
	3.기타(준공표지판)	식	1	28	0	0	1	28
	소 계			13,932		13,904		28
3.구조물공	1.1파일공	식	1	149,071	1	149,071	0	0
	1.2강교제작및가설	식	1	1,458,828	1	1,458,828	0	0
	1.3신축이음	식	1	38,095	1	38,095	0	0
	1.4강재방호책	m	1,339	387,934	1,249	361,859	90	26,075
	1.5교면포장	식	1	146,834	1	146,834	0	0
	1.6가시설	식	1	67,423	1	67,423	0	0
	1.7 기타	식	1	1,137,902		1,134,948		2,954
	1.8L형옹벽	식	1	231,509	1	226,970	1	4,539
	1.9기존교량보수보강	식	1	1,452,538	1	1,452,538	0	0
	2.0기존교량및옹벽철거외	식	1	1,651,041	1	1,627,865	1	23,176
	소 계			6,721,175		6,664,431		56,744

공 종	내 용	단위	도급		기시행		잔여		비고
			수량	금액(천원)	수량	금액(천원)	수량	금액(천원)
4.포장공	1.아스콘기층	식	1	5,792	1	4,899	1	893
	2.아스콘중간층	식	1	823	1	618	1	205
	3.아스콘표층	식	1	8,081	1	7,266	1	815
	4.보차도경계석외	식	1	62,088	1	48,413	1	13,675
	소 계			76,784		61,196		15,588
5.부대공	1.노면표시	식	1	46,970	1	46,970	0	0
	2.미끄럼방지시설	식	1	23,732	1	23,732	0	0
	3.교통정보시스템이설	식	1	56,207	1	56,207	0	0
	4.가설교량	식	1	4,455,854	1	4,380,584	1	75,270
	5.안전시설비외	식	1	1,680,735	1	1,372,887	1	307,848
	소 계			6,192,796		5,809,678		383,118
직접공사비				13,545,205		13,069,678		475,527
제경비				5,438,431		5,286,686		151,745
공급가액				18,983,636		18,356,364		627,272
부가세				1,898,364		1,835,636		62,728
도급액				20,882,000		20,192,000		690,000

5. 검토자 의견

상기검토 내용과 같이 잔여 시공분은 강변북로 및 서빙고로 복구부분이며,  준공기한내 공사가 완료될 것으로 사료됨.

2016. 02.

책임감리원  김  용  선