새뜰마을사업 우선 추진사업 및 월별 예산 집행계획 (서울시․종로구)

1. 우선 추진사업 현황 및 계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업비				사업개요	사업기간	추진상황 (진행율%)	비고
	계	국비	지방비
			(시)	(구)
합계	2,402	1,520	450	432			6.53
총괄코디네이터 등 사업운영	96	19	16	61	총괄MP, 마을활동가 위촉	~‘16.12.	32
주민역량강화교육	20	10		10	행복마을학교 4개년 운영	~‘16.12.	50
주민설명회 개최	24.6	13	6.6	5	사업 설명회 개최(임대, 임차 구분)	~‘16.12.	20
민관협력 간담회	9.5	2	4.5	3	민간자본 연계 공모 참여	~‘16.12.	52
MP 용역	187.5	130	17.5	40	기술·사회 용역 발주	~‘16.6	55
주민공동이용시설 마을경관개선	1,984.4	1,296	382.4	306	사업지내 주민공동이용시설 부지 매입 검토	~‘16.12.	0
주민제안사업	20	10	3	7	마을사업 주민제안공모	~‘16.12.	0
집수리	60	40	20	-	거주자 중심 집수리	~‘16.12.	0

2. 사업비 월별 예산 실집행 계획(2016년)

(단위 : 백만원)

구 분		16년 예산현액	4월 까지	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	12월까지 (누계)
국 비		1,520	96	705	34	5	5	5	100	450	120	1,520
지방비 지방비	(시)	450	18	5	10	4	3	10	177	23	200	450
	(구)	432	72	6	8	5	5	25	25	200	86	432
총 계		2,402	186	716	52	14	13	40	302	673	406	2,402

ㅇ 예산현액은 ‘15년 선정사업의 경우 ‘15년 및 ‘16년 사업비의 합산액임.