설 계 변 경 사 유 서

1. 사업개요

○ 공 사 명 : 2023년 북악산 북한산공원 보수정비사업

○ 공사기간 : 2023. 10. 10. ~ 2024. 1. 17.

○ 도 급 액 : 금220,437,200원 (관급비 별도)

○ 시 공 사 : ㈜다다이앤시 대표 김미진

2. 변경사유 [관련공문 : 서울시설공단 공사감독3처-12639호(2023.12.19.)]

○ 공사 중 현장실정에 따른 변경(※설계변경내용 별첨)

3. 공사비 증감내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고(증감)
도 급 비	220,437,200	222,084,000	증1,646,800

4. 예산과목

○ 공원여가정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 시공원유지관리 및 보수정비, 시설비 및 부대비, 시설비(시비)

2023.  12.

보 고 자    지방녹지주사보          안 지 연  (인)

확 인 자    공원녹지과장            김 병 완  (인)