-강남대로 하수암거 격벽철거 관련-

추진현황 및 향후일정 보고

(2014.04)

서 초 구 청

(안전치수과)

-강남대로 하수암거 격벽철거 관련-

추진현황 및 향후일정 보고

1		사업개요

○ 사 업 명 : 강남역일대 침수방지사업

○ 위     치 : 서초대로 77길~78길(우성아파트 사거리 ~ 강남대로 61길)

○ 규    모 : □2×2m, 39개소 격벽철거(고지배수로 통수구 설치) 및 BOX내부

정밀점검 후 보수보강 실시[수해취약시설 주말점검(3차)시 지적사항]

○ 총사업비 : 1,500백만원

○ 사업기간 : 2014.04.~2014.12

○ 기대효과 : 배수효율을 향상시켜 특정암거 수위상승에 따른 침수예방

2		추진현황

○ 2013.06.05 : 서초대로78길 하수암거 점검계획(서초구)

- 교대단면손실, 기존BOX 유량배분검토

○ 2013.06.20 : 서초대로78길 하수암거 점검조치계획 보고(서초구)

- 통수단면 감소구간 전문가 자문을 받아 서울시 설계용역에 조치방안 검토 요청계획

- 통수부 추가설치로 기존암거의 하수량 분배효과 검토

○ 2013.07.26 : 강남역주변 하수암거 검토요청(서초구→하천관리과) 재난치수과-16880호

- 통수단면 감소구간에 대해 “강남역 일대 배수개선 대책 검토 및 기본·실시설계”

용역으로 단기대책 검토 요청에 따라 검토 진행 중

○ 2014.02.   : 단기대책(격벽철거) 설계 및 시공 구두통보(하천관리과→서초구)

○ 2014.02.25 : 서초구 요청으로 격벽제거 자료 메일송부(제일엔지니어링→서초구)

○ 2014.03.   : 안전진단 업체선정 후 격벽철거 구조검토 및 설계 과업추가(내부결정사항)

○ 2014.04.18 : 하수시설물 정밀안전진단 및 정밀점검용역 낙찰(한국재난연구원)

○ 2014.04.21 : 격벽철거 구조검토 및 설계 착수

3		향후일정

○‘14.04. ~‘14.05. : 격벽철거 구조검토 및 설계(39개소)

- ‘14.04.21 ~ ‘14.04.25 BOX내부 현장조사(구조물도 등 도면 없음)

- 개소(39개소) 및 규격(2.0×2.0)은 “강남역 일대 배수개선 대책 검토 및 기본·실시설계”

설계사인 제일엔지니어링에서 결정 후 통보

○‘14.05. ~‘14.06. : 격벽철거 시공

- 하수시설물보수공사(서초구 연간단가)업체에 의뢰하여 설계완료 후 즉시 시공

4		평면도 및 모식도

○ 계획 평면도

○ 모 식 도