문서번호	토목부-18509
결재일자	2014.9.24.
공개여부	비공개
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
협조

비탈면 안정성 확보를 위한 조치내용 보고

- 천호대로(광나루역)확장공사 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9

도시기반시설본부

(토목부)

비탈면 안전성 확보를 위한 조치내용 보고

- 천호대로(광나루역)확장공사 -

지하차도 구조물 설치로 발생한 대절토 사면 및 단계별 교통처리계획에 따라 차량 통행중인 도로 절취부의 ‘비탈면 안전성 확보를 위한 조치내용’을 검토 보고드림

※ 관련근거 : 천호수 제2014-581호(‘14. 9.16.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 천호대로(광나루역)확장공사

○ 공사규모 : 폭 6차로 → 10차로 연장 900m(지하차도 580m 포함)

○ 도 급 비 : 41,403백만원

○ 공사기간 : ′10.10.12 ~ ′15.12.31

○ 시 공 사 : ㈜해동건설외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜수성엔지니어링

□ 보고내용

○ 단계별 교통전환대책 2단계에 따라 좌측 지하차도 구조물 시공을 위한 구조물터파기로 인하여 차량이 통행중인 도로부 및 비탈면 절취면이 공사기간 장기화로 토사 유실로 인한 비탈면 안정성 확보가 필요하며,

○ 비탈면에 대한 발주처 “건설공사장 기동불시특별점검반” 및 “현장  안전점검 T/F팀 점검 결과” 비탈면 긴급 보강 지적사항 등에 있어 Face Mapping 실시 및 비탈면 안정성 확보계획에 따라 단계별 긴급 보강 조치 완료하였음

○ 깎기비탈면 보강 전개도

- (좌)STA.0+480∼0+800

- (좌)STA.0+380∼0+480 : 녹생토 보강

- (우측)기존도로 : 비탈면 숏크리트 보강

○ 공사량 증·△감 대비표

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증·△감	비 고
· 비탈면안정공
친환경생태복원공법	T=5㎝	㎡	-	2,740	2,740
락볼트	L=4.0m	공	-	56	56
수평배수공	L=0.6m	공	-	112	112
숏크리트	T=10㎝	㎡	-	4,799	4,799
교반토	T=2.0m	㎥	-	1,853	1,853
Face Mapping	용역비 및 보고서	식	-	1	1

○ 단가적용 현황

- 기존품목 : 증·감된 수량에 대하여 기존 협의단가 적용(86.352%)

- 신규품목 : 해당사항 없음

○ 공사비 증·△감 대비표

(금액단위 : 천원)

공 종	당 초	변 경	증 · △감	비 고
· 비탈면안정공
친환경생태복원공법	-	75,764	75,764
락볼트	-	15,431	15,431
수평배수공	-	3,364	3,364
숏크리트	-	244,415	244,415
교반토	-	106,310	106,310
직접공사비	-	445,284	445,284
간접공사비	-	170,916	170,916
제요율제외적용공종	-	26,000	26,000
공 사 비 계	-	642,200	642,200

□ 조치계획

○ 책임감리원 실정보고와 같이 단계별 교통전환대책 2단계에 따라 좌측 지하차도 구조물 터파기로 인하여 발생된 좌, 우측 비탈면에 대하여 공사기간 장기화 및 비탈면 토사 유출등 안전사고 발생 위험이 있고

○ 우리시 “건설공사장 기동불시특별점검반” 및 “현장 안전점검 T/F팀 점검 결과” 비탈면 긴급 보강 지적사항 등에 따라

○ Face Mapping을 실시하고 보강 방안을 마련하여 절취사면 안정성 확보 및 공사장 안전사고 예방을 위한 긴급 보강공사를 완료한 사항으로써 승인 조치하고,

○ 향후 본부 설계변경자문위원회(소위원회)를 거쳐 설계변경 적용코자 함

○ 단가적용

- 신규품목은 없으므로 전공정 품목에 대하여 기존 협의단가 적용

첨부 : 책임감리원 검토보고서 1부.  끝.