서부간선도로 친환경공간 조성

□ 사업목적

○ 서부간선지하도로 건설과 연계하여 자동차전용도로인 기존 서부간선도로를 일반도로화하여 지역주민을 위한 도로로 재편

○ 차로수 및 차로폭 조정을 통해 자전거도로, 보도, 녹지, 커뮤니티시설 등
친환경 가로환경 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 영등포구 양평동(목동교)~금천구 독산동(금천IC)

○ 규    모 : 왕복 4차로, 연장 8.1km, 친환경공간 119천㎡

○ 사업기간 : 2013. ~ 2023.

○ 총사업비 : 85,950백만원

□ 추진현황 및 계획

○ '13.09.~'15.02.	: 타당성조사 및 기본계획 시행

○ '15.10.28	: 투자심사

○ '16.05.~'19.03.	: 기본설계 용역 시행

○ '18.08.26	: 2단계 투자심사

○ '19.~'20.	: 실시설계 용역 시행

□ 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018예산	2019예산	2020이후
계	85,950	880	0	2,000	83,070
설계비	4,094	880	0	2,000	1,214
시 설 비	78,186	0	0	0	78,186
감 리 비	3,670	0	0	0	3,670

□ 기대효과

○ 입체교차로를 평면처리하고, 횡단보도를 설치하는 등 일반도로화하여 지역주민 접근성 향상과 생활동선 확보

○ 서부간선도로와 이면도로간의 단차조정과 도로다이어트를 통해 접근성 개선과 약 119천㎡의 친환경 공간 조성

□ 위치도