계약심사 조정내역

□ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로-4공구(설계변경)

□ 사업개요

위 치	서울시 금천구 시흥동
공사개요	- U-TYPE 방음시설 : L=140m, W=6.7m - 기존방음벽 재설치 : L=327m, H=4.0m → 6.0m
공사기간	2001. 12. 29 ~ 2020.05.31

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,622,530	천원
○	심사금액	:	1,616,400	천원
○	절 감 액	:	6,130	천원
○	절 감 률	:	0.4	%

○ 심사결과 통보

원안통과	수정	재검토
	○ (심사요청 내용을 수정하여 설계변경)

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정

- H-형강 : 880,000원/톤 → 850,000원/톤

- 안전표지판(삼각 900) : 90,000원/개 → 51,820원/개

- 보조표지판(사각 600×200) : 65,000원/개 → 21,819원/개

○ 내역서 및 일위대가 등

- 안전신호수(교통정리원), 공사중 교통처리 :  경비로 계상

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 재계약