계약심사 조정내역

□ 공 사 명 : 신림4배수분구 하수관로 종합정비사업(설계변경)

□ 사업개요

위 치	관악구 미성동, 난곡동 신림4배수분구 지역
공사개요	- 비굴착공사 : L=285m - 단면보수 : A=3,346㎡
공사기간	2018. 3. 29 ~ 2018.12.31

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	883,650	천원
○	심사금액	:	851,206	천원
○	절 감 액	:	32,444	천원
○	절 감 률	:	3.7	%

○ 심사결과 통보

원안통과	수정	재검토
	○ (심사요청 내용을 수정하여 설계변경)

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정

- 내수합판 : 8,902원/㎡ → 8,419원/㎡

- 콘테이너(창고용) : 1,932.000원/동 → 1,840.000원/동

- 비계기본틀 : 24,500원/대 → 20,830원/대

- 풍 관 : 23,410원/m → 12,080원/m

- 외송각재 : 407,184원/재 → 369,000원/재

○ 내역서 및 일위대가 등

- 윈 치 : 특별인부 → 일반기계운전사(품셈 8-1-3)

- 적재또는적하 : 10분 초과시 적재또는적하를 제외한 시간의 유류만을 계상(품셈8-1-3)

- 중성화 보호 도포(바닥, 롤러1회, 수성) : 도장공 0.016→0.012

보통인부0.016→0.002(건축품셈-17)

- 프라이마 도포 : 도장공 0.024인 → 0.011인(건축품셈 - 17)

- 관입구마무리 : 초속경시멘트 → 초속경몰탈(서울형품셈)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 선정 심의

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 재계약

◦ 관급자재비, 이전비, 폐기물처리비는 심사 제외