□ 방음시설 설치 및 보수‧보강

○ 총44억 중 원인행위 27억(61.4%), 지출 17억(38.6%)

1) 방음벽 설치

(단위:백만원)

연번	기관명	예 산	사 업 내 용		설 치 형 태	발 주 날 자	지출액	잔 액 (발생사유)	공정율 (%)	추진현황	준공예정
	계	4,428					1,740		82
1	중랑구	300	신내초등학교 방음벽 재설치 (H=6m, L=90m)		재설치	2021.7	0		90	방음벽 지주 및 방음판 설치	’21년 9월
2	강서도로	200	구로중앙로 고가 방음벽 재설치 (H=4m, L=280m)		재설치	2020.12	200		100	준공완료	’21년 6월
3	구로구	1,000	당초	미래초등학교 방음벽 설치 (H=6m, L=130m)	신 설	2021.8	0		20	미래초 반대로 오류고,서서울과학고 변경 현재 방음판 철거 중	’21년 12월
			변경	오류고등학교외 1개소 방음판 교체 (H=6m, L=315m)	재설치
4	성북구	85	북악터날 앞 정릉로 방음벽 설치 (H=3m, L=50m)		신 설	2021.6	70		100	준공완료	’21년 8월
5	노원구	500	녹천중학교 방음벽 재설치 (H=4~6m, L=320m)		재설치	2021.7	149		30	기존 방음벽 철거 및 설치 중	’21년 9월
6	성동구	550	행당초등학교 방음벽 재설치 (H=6m, L=180m)		재설치	2021.3	0		90	방음벽 지주교체 및 방음판 교체	’21년 9월
7	중 구	400	흥인초등학교 방음벽 재설치 (H=7m, L=170m)		재설치	2021.7	0		100	준공완료	’21년 9월
8	노원구	819	공릉초등학교 일대 방음벽 재설치(사고이월) (H=5m, L=150m)		재설치	2020.12	761		100	준공완료	’21년 5월
9	용산구	160	한남동 매봉마을 방음벽 증설(사고이월) (H=4.5m, L=296m)		재설치	2020.10	160		100	준공완료	’21년 7월
10	강서도 로	414	구로중앙로 고가 방음벽 재설치(사고이월) (H=4m, L=280m)		재설치	2020.12	400		100	준공완료	’21년 6월

□ 도로부속시설물 일상 유지관리

○ 총49억 중 원인행위 39억(79.6%), 지출 25억(51%)

1) 부속시설물 유지보수(중앙분리대 설치 및 표지병 설치)

(단위:백만원)

연번	기관명	예 산	사 업 내 용	발 주 날 자	지출액	잔 액 (발생사유)	공정율(%)	추진현황	준 공 예정일
	계	2,990			1,298		60
1	포괄비	500	주요간선도로 중앙분리대 설치 강서도로 100백만원 성동도로 200백만원 서부도로 200백만원	-	-		-	-	’21년 12월
				2021.5.	97		100	준 공
				2021.5.	200		100	준 공
				-	-		-	추진 중
2	포괄비	300	주요간선도로 시인성 개선(태양광 표지병) 성동도로 150백만원 당초 서부도로, 변경 성북구 북악산로 150백만원	-	-		-	-	’21년 9월
				2021.4.	135		100	준 공
				2021.8.	0		50	진행 중
3	포괄비	300	주요간선도로 시인성 개선(태양광 델리네이터) - 성동도로 150백만원 - 서부도로 150백만원	-	-		-	-	’21년 10월
				2021.4.	52		60	진행 중
				2021.7	0		50	진핼 중
4	북 부	600	도봉구 시도구간 시인성개선(태양광 표지병)	2021.4.	235		50	진행 중	’21년 12월
5	서 부	500	서대문구 시도구간 시인성 개선(표지병 등) 서대문구, 은평구 시도구간 시인성 개선	2021.4.	277		100	준 공
6	남 부	100	금천구 문성로 중앙차선 분리대(추경사업)	0	0		0	0	’21년 12월
7	남부/강서	200	영등포구 시도구간 충격흡수시설 설치(추경사업)	0	0		0	0	’21년 12월
8	서 부	490	중구 충무로 을지로 등 시인성 개선사업 105백만원(명시이월) 용산구 소월로 등 7개 노선 385백만원(명시이월)	2021.4.	302		100	준 공

2) 도로시설물 유지보수(연간단가)

(단위:백만원)

연번	기관명	예 산	사 업 내 용	발주날자	지출액	잔 액 (발생사유)	공정율(%)	추진현황	준공예정일
	계	1,911			1,186		73
1	동 부	320	시설물 연간단가	2020.12.	188		68	진행 중	’21년 12월
2	서 부	310	시설물 연간단가	2020.12.	216		60	진행 중	’21년 12월
3	남 부	350	시설물 연간단가	2020.12.	237		80	진행 중	’21년 12월
4	북 부	300	시설물 연간단가	2020.12.	164		80	진행 중	’21년 12월
5	성 동	300	시설물 연간단가	2020.12.	132		80	진행 중	’21년 12월
6	강 서	331	시설물 연간단가	2020.12.	221		70	진행 중	’21년 12월

□ 자치구 위탁 도로시설물 보수‧보강(보행자 방호울타리 정비)

(단위:백만원)

연 번	기관명	예 산	사 업 내 용	설 치 형 태	발 주 날 자	지출액	잔 액 (발생사유)	공정율 (%)	추진현황	준공예정
	계	2,667	18건
1	중랑구	100	사가정로 방호울타리 설치	예)재설치						’21년 7월 준공
2	강남구	200	도곡로, 삼성로 방호울타리 신설	예)신 설						’21년 12월 준공
3	성북구	172	장덕초등학교, 숭덕초등학교 방호울타리 설치							’21년 6월 준공
4	종로구	100	북악산로 방호울타리 설치							’21년 5월 준공
5	송파구	100	송파대로 석촌호수 ~ 장지역 방호울타리 설치							’21년 7월 준공
6	성동구	60	한양초등학교, 금초등학교 등 방호울타리 설치							’21년 6월 준공
7	중 구	40	신세계백화점 앞 2개소 방호울타리 설치							’21년 7월 준공
8	동작구	110	현충로 등 방호울타리 설치							’21년 7월 준공
9	서초구	55	사당역~경문고교 사거리 방호울타리 설치							’21년 4월 준공
10	구로구	100	보행자 방호울타리 설치(경인로 개봉주유소 일대)							’21년 7월 준공
11	양천구	100	보행자 방호울타리 설치(신목동역~이대목동병원 앞)							’21년 10월 준공
12	강서구	100	보행자 방호울타리 설치(남부순환로 국립항공 박물관 주변)							’21년 5월 준공
13	강서구	100	보행자 방호울타리 설치(화곡로 가양대교 남단 주변)							’21년 7월 준공
14	강서구	100	보행자 방호울타리 설치(수명로 외)							’21년 5월 준공
15	용산구	170	보행자 방호울타리 설치(서빙고로, 녹사평로)							’21년 6월 준공
16	송파구	730	보행자 방호울타리 설치(송파대로)							’21년 7월 준공
17	성동구	100	보행자 방호울타리 설치(뚝섬로외 1개소)							’21년 6월 준공
18	성북구	230	보행자 방호울타리 교체(월계로 등)							’21년 7월 준공

□ 노후 포장도로 정비(시도구간 미끄럼방지 포장)

(단위 : 백만원)

연번	재 배 정 기 관		예 산	사 업 내 용		설 치 형 태	발 주 날 자	지출액	잔 액 (발생사유)	공정율 (%)	추진현황	준공예정
	계		2,150
1	포괄비	강 서	200	미끄럼방지 포장								준공완료
		남 부	100	미끄럼방지 포장								준공예정(12월)
		성 동	300	미끄럼방지 포장								준공완료
		북 부	200	미끄럼방지 포장								준공완료
		서 부	200	미끄럼방지 포장								준공완료
2	동 부		300	강동구 시도상 미끄럼방지 포장								준공완료
3	서 부		150	당초	은평구 미끄럼방지 포장(연서로)							준공완료
				변경	통일로 은평초등학교 앞 미끄럼방지 포장
4	남 부		200	동작구 시도상 미끄럼방지 포장								준공예정(12월)
5	강 서		500	강서구 시도상 미끄럼방지 포장								준공완료