국고보조금 기능개선 관련 1차오픈 대상 전국적용

국고보조금 통합관리망(e호조 기능개선) 사업과 관련하여 1차오픈 대상 기능(보조사업 및 집행관리)에 대하여 전국적용 및 운영을 실시하고자 함.

□ 개 요

○ 국고보조금 통합관리망(e호조 기능개선) 사업 중 1차오픈 대상 국고보조사업 및 집행관리 기능에 대하여 전국적용

※ 국고보조금 관련 기능개선 배포 일정

- 선행오픈 시범적용 : ‘16. 11. 25. ～ ’16. 11. 27. (충남)

- 선행오픈 전국적용 : ‘16. 12. 2. ～ ’16. 12. 4.

- 1차 오픈 : ‘17. 1. 3. ～ ’17. 1. 4.

- 2차 오픈 : ‘17. 3. 10. ～ ’17. 3. 12. (예정)

○ (작업시간) ‘17.1.3.(화) ~ ‘17.1.4.(수)

※ e호조 서비스 중단 : ‘17.1.3. 19시 ~ 1.4. 7시

※ 상세일정은 <붙임1. 1차오픈 작업 시나리오> 참고

○ (대상기관) 전국 지방자치단체

○ (1차오픈 개선내용)

1. 보조사업관리 부분

① 광역 및 기초 자치단체의 세부사업 매핑을 통한 확정내시 등록에 따른 보조금 교부 신청 및 결정 관리 프로그램 개선

② 공공·민간 보조사업자의 보조금 교부 신청 및 결정 관리 프로그램 신규 개설

③ 공모선정결과 연계에 따른 내시 연계 프로그램 개선

④ 광역 및 기초 자치단체의 세부사업 매핑관리를 위한 가내시 등록관리 프로그램 개선

2. 집행관리 부분

① 집행실적을 세분화한 내역을 국고보조금통합시스템에 전송

② 국고보조금으로 계약된 계약정보와 중요재산 정보를 국고보조금통합시스템에 전송

③ 광역에서 기초로 교부한 내역을 기초에서 사업과 재원 금액을 입력하여 국고보조금통합시스템으로 전송

④ 공공민간 교부한 내역을 국고보조금통합시스템에서 수신받아 지출한 후 그 내역을 국고보조금통합시스템으로 전송

⑤ 지출결의, 지급명령시 전자증빙유효성 검증 추가

○ 전환대상

1. 보조사업관리 부분

구분	대상	본수/상세	변 경 사 항
화면	보조사업관리	수정 - 1	- 광역과 기초 보조사업(사업간연계)의 매핑 연계조회
	보조사업 내시관리 (광역/기초)	수정 – 7	- 보조사업 가내시 등록 시 확정예산등록과 동일하게 광역과 기초단체를 매핑하여 배분관리 ( 광역사업 : 기초사업 = 1 : N ) - 광역과 기초 사업 간의 매핑된 가내시 등록 내역 조회 자치단체 공모선정 건에 대해 확정예산 등록할 수 있도록 추가
	보조금 교부신청 (광역/기초)	수정 – 12	- 광역과 기초 사업 간의 매핑정보 기반의 교부신청내역을 조회 - 광역에서 교부신청 취합 및 신청 처리 시 광역사업별 매핑된 사업을 자동 취합하고, 신청계좌정보와 신청사유(필수)를 추가 입력하도록 개선->연계항목
	보조금 교부결정	수정 – 3	통합망과의 연계항목에 따른 조회항목 변경(1월~12월 금액내역 삭제)
	공공·민간 보조금 교부관리 (광역/기초)	신규 - 3	- 공공민간 보조사업자(위탁수행형)가 통합망에서 교부 신청한 내역을 연계받아 조회하고, 신청 내역을 결정 또는 반려 처리할 수 있는 화면 신규 개설
	공통	수정 - 4	- 공통 검색 팝업 수정
테이블	보조사업 및 내시관리 (광역/기초)	업무 - 18 연계 - 10	- 보조금사업코드(부처 내역사업) 변경 : 16→20자리
	보조금교부관리 (광역/기초)	업무 - 13 연계 - 32	- 보조금 교부관리의 보조금사업코드(부처 내역사업) : 16→20자리 - 공공민간 보조사업자 교부관리 테이블 신규 생성
연계	가내시 및 공모선정결과	배치 - 6
	교부관리	배치 - 7

화면 30본, DB테이블 73개, 연계 13본

2. 집행관리 부분

화면 41본, DB테이블 21개, 연계 15본

구분	대상	본수/상세	변 경 사 항
화면	집행관리	수정 - 29 신규 - 12	- 집행실적을 세분화한 내역을 국고보조금통합시스템에 전송 - 국고보조금으로 계약된 계약정보와 중요재산정보를 국고보조금통합시스템에 전송 광역에서 기초로 교부한 내역을 기초에서 사업과 재원을 입력하여 국고보조금통합시스템에 전송 공공민간교부내역을 품의 등록하여 지출한 후 그 내역을 국고보조금통합시스템에 전송 지출결의요청, 지급명령시 전자증빙유효성 검증
테이블	집행관리	업무 - 6 연계 - 15	- 보조금사업코드: 16→20자리 - 연계로 인한 테이블 생성
연계	집행관리	배치 - 15

□ 적용 및 운영 계획

○ 적용 계획 <붙임1. 1차오픈 작업 시나리오 참고>

- (1.03. 20:00~, 4H) 프로그램 소스코드 배포

- (1.03. 20:00~, 8H) DB 스키마 및 프로시저 배포

- (1.04. 00:00~, 6H) 화면기능을 통한 검증

- (1.04. 05:00~, 1H) DB 배포 결과 검증

- (1.04. 06:00~, 1H) 화면기능을 통한 최종 검증

○ 운영 계획 <붙임2. 1차오픈 대상 기능 및 비상연락망 참고>

- (모니터링 및 조치기간) ‘17.1.4. ~ 1.6. (약 3일 간)

- (모니터링 및 조치 계획) 현재 진행 중인 국고보조금 관련 업무와 병행하여 배포 기능을 점검하고 이상 현상 발생 시 영향도 검토를 통해 야간 긴급 조치

- (복구계획) 문제발생 시 백업 데이터를 활용하여 조속히 원상복구 될 수 있도록 조치

- (비상연락체계) 운영 기관의 불편을 최소화 하고 시스템 이슈사항에 대한 영향력 최소화를 위해 비상운영체계 구축

- (결과보고) 운영기관에 작업 결과 및 업무별 기능테스트 수행 결과보고

□  협조사항

○ (지자체 정보통신실) 작업기간 중 e호조 장비 기동 유지

□ 향후 일정

○ 1차 오픈 대상 점검 및 모니터링	: ’17.1.4. ~ 1.6.

○ 2차 오픈 대상 전국 배포	: ’17.3.10. ~ 3.12.(예정)

붙임 1	1차오픈 작업 시나리오

❍ 본 시나리오는 전환당일 업무 마감에서 최종 운영점검까지 전환을 위해 필요한 상세한 작업내역을 작성하고 계획된 작업 시간 내 완료를 목적으로 함

- 적용 기관 : 243개 지방자치단체

- 적용 날짜 : 2017.1.3.(화) ~ 2017.1.4.(수)

일자	시간	작업구분	작업내용	지자체	기능개선사업단	개발원 (운영 지원단)
-	-	사전준비	ㆍ업무마감 및 시스템 중단 공지 ㆍ유관부서 및 유지보수 업체 협조요청 ㆍ시스템 환경 점검 - 서버접속 및 디스크 여유 공간 확인	◉		○
01.03 (화)	09:00	환경준비	ㆍ자치단체 네트워크 환경설정 ㆍ자료전환 네트워크 개방여부 및 DB접속 테스트 수행	○	○	◉
	18:00 ∼ 19:00	업무 마감 (적용준비)	ㆍ지방재정관리시스템 내 업무 마감 자료 대상 마감 처리	◉	○	○
	19:00 ∼ 20:00	시스템 중단	ㆍ전환 작업을 위한 시스템 중단 - 사전 협조를 통한 업무처리 중단 - 지방재정 서비스 중단 - 기타 특화시스템 서비스 중단 - 배치 스케줄러 및 데몬 서비스 중단	○	○	◉
	20:00 ~ 24:00	변경소스 배포	ㆍ화면 및 연계 기능 소스 배포 - 배포시스템을 통해 소스코드 배포		○	◉
	20:00 ∼ 24:00	변경DB 배포	ㆍDB 스키마 변경사항 및 프로시저 배포 - 배포 작업 전 기존 DB 백업 실시 - 변경사항 반영 위한 DDL스크립트 배포 - DDL 배포 결과 검증 - 프로시저 배포 및 확인		◉	○
01.04 (수)	00:00 ~ 04:00	변경DB 배포	ㆍDB 스키마 변경사항 및 프로시저 배포 - 배포 작업 전 기존 DB 백업 실시 - 변경사항 반영 위한 DDL스크립트 배포 - DDL 배포 결과 검증 - 프로시저 배포 및 확인		◉	○
	00:00 ∼ 06:00	기능 점검	ㆍ전환 결과 점검 - DB 및 소스 배포 완료 된 지자체 대상 서비스 재기동 및 점검 - 화면 기능 중심 점검 - 연계 환경 점검		◉	○
	04:00 ∼ 05:00	MI 연계 환경 배포	ㆍMI 연계 환경 변경 사항 반영		◉	○
	05:00 ∼ 06:00	시스템 가동	ㆍ전환 작업 위해 중단된 시스템 가동 - 지방재정 서비스 가동 - 기타 특화시스템 서비스 가동 - 배치 스케줄러 및 데몬 서비스 가동		○	◉
	06:00 ∼ 07:00	최종 점검	ㆍ전환 결과 최종 점검 - 화면 기능 중심 최종 점검 - 연계 환경 최종 점검		◉	○

※ 범례 : ◉(업무주관), ○(업무지원)

※ 각 단계별 소요되는 시간 및 세부항목은 자치단체 및 데이터 규모에 따라 조정될 수 있음

❍ 복구 방안 : 전환 및 운영 중 발생한 예기치 못한 상황에서 원상 복구가 결정되면 일정을 검토하여 단계별 원상 복구 절차 수행

단계	작업구분	소요시간(분)	작업상세
사전 준비	시스템 중지	10	·지방재정 AP 서버 중지
	배치 중지	10	·지방재정 배치 서비스 중지
	MI 비활성화	10	·보조금 1차 오픈 관련 연계 서비스 비활성화
복구 작업	보조금 내역사업 관련 DB 복구	180	·보조금 내역사업 관련 테이블 Constraint 삭제 ·보조금 내역사업 관련 테이블 INDEX 삭제처리 ·보조금 내역사업 관련 신규 테이블 삭제 ·보조금 내역사업 관련 추가 컬럼 삭제 ·보조 사업 코드 데이터 타입 원복 ·보조금 내역사업 관련 기존 INDEX 리빌드 ·보조금 내역사업 관련 테이블 Constraint 생성
			·테이블, 인덱스, 제약조건 검증 SQL 확인 ·보조금 내역사업 관련 오브젝트 컴파일 ·보조금 내역사업 관련 오브젝트 상태점검
복구 마무리	MI 활성화	10	·보조금 1차 오픈 관련 연계 서비스 활성화
	배치 기동	10	·지방재정 배치 서비스 기동
	시스템 기동	10	·지방재정 AP 서버 기동
결과 검증	원상복구 결과확인	60	·원상복구 결과 확인 및 결과 내역서 작성, 결과 보고

- 원상 복구 상세 절차

붙임 2	1차오픈 대상 기능 및 비상연락망

대상 기능

❍ 보조사업관리 : 화면 30종, 연계 13종

업무명	기능명	기능구분	변경구분
보조사업관리	기초보조사업 연계(사업간연계)조회	화면	수정
보조사업내시관리	보조금가내시등록(광역)	화면	수정
	보조금가내시등록(기초)	화면	수정
	연계수신 팝업(광역)	화면	수정
	연계수신 팝업(기초)	화면	수정
	보조금 가내시 등록(기초배분) 팝업	화면	신규
	보조금가내시조회(광역)	화면	수정
	보조금가내시조회(기초)	화면	수정
	보조금 가내시정보 수신-광역	연계-배치	신규
	보조금 가내시정보 송신-광역	연계-배치	수정
	보조금 가내시정보 수신-기초	연계-배치	수정
	보조금 가내시등록정보 송신-기초	연계-배치	수정
	보조금 가내시등록정보 수신-광역	연계-배치	신규
	공모선정결과 수신-광역	연계-배치	신규
보조금교부신청	보조금교부신청조회(광역)	화면	수정
	보조금교부신청조회(기초)	화면	수정
	보조금교부신청조회 수신 팝업	화면	수정
	보조금교부신청 등록(광역)	화면	수정
	보조금교부신청 등록(기초)	화면	수정
	지자체 세부사업 검색 팝업	화면	수정
	보조금 교부신청상세 및 수정	화면	수정
	보조금교부신청수정(기초)	화면	수정
	보조금교부취합신청조회	화면	수정
	보조금교부취합신청등록	화면	수정
	보조금교부취합신청수정	화면	수정
	교부신청통합망전송결과조회	화면	수정
	보조금 교부신청 수신-광역	연계-배치	수정
	보조금 교부신청 송신-광역	연계-배치	신규
	보조금 교부신청 송신-기초	연계-배치	수정
보조금교부결정	보조금교부결정조회	화면	수정
	보조금교부결정이력조회	화면	수정
	통합망송금통지내역조회	화면	수정
	보조금 교부결정정보 수신	연계-배치	신규
	보조금 교부(송금통지)내역 수신	연계-배치	신규
공공민간 보조금 교부관리	공공민간 보조금 교부관리(광역)	화면	신규
	공공민간 보조금 교부관리(기초)	화면	신규
	공공민간 보조금 교부수신 팝업 (광역/기초)	화면	신규
	공공민간 보조금 교부신청정보 수신	연계-배치	신규
	공공민간 보조금 교부결정정보 송신	연계-배치	신규
공통	금융기관 검색 팝업	화면	수정
	부서 검색 팝업	화면	수정
	기초자치단체 검색 팝업	화면	수정
	지자체사업 검색 팝업	화면	수정

❍ 집행관리 : 화면 41종, 연계 15종

업무명	기능명	기능구분	변경구분
집행관리	국고보조금송금통지내역전송관리	화면	신규
	국고보조금송금통지내역전송관리(국고보조금통합관리시스템으로 송신)	연계-배치	신규
	국고보조금송금통지내역전송관리(국고보조금통합관리시스템으로 송신응답 수신)	연계-배치	신규
	공공민간(국고보조금)전송관리	화면	신규
	공공민간(국고보조금)전송관리AType(국고보조금통합관리시스템으로 송신)	연계-배치	신규
	공공민간(국고보조금)전송관리AType(국고보조금통합관리시스템으로 송신응답 수신)	연계-배치	신규
	공공민간(국고보조금)전송관리BType(국고보조금통합관리시스템으로 송신)	연계-배치	신규
	공공민간(국고보조금)전송관리BType(국고보조금통합관리시스템으로 송신응답 수신)	연계-배치	신규
	집행실행결과전송관리	화면	신규
	집행실행결과전송관리(국고보조금통합관리시스템으로 송신)	연계-배치	신규
	집행실행결과전송관리(국고보조금통합관리시스템에서 송신응답 수신)	연계-배치	신규
	계약정보전송관리	화면	신규
	계약채주정보 팝업	화면	신규
	계약물품정보 팝업	화면	신규
	계약재원정보 팝업	화면	신규
	계약정보전송관리(국고보조금통합관리시스템으로 송신)	연계-배치	신규
	중요재산전송관리	화면	신규
	중요재산전송관리(국고보조금통합관리시스템으로 송신)	연계-배치	신규
	지출결의요청등록(국고보조금통합관리시스템으로 전자세금계산서검증 요청 송신)	연계-배치	신규
	지출결의요청등록(국고보조금통합관리시스템으로 전자세금계산서검증 요청 응답 수신)	연계-배치	신규
	지출결의요청등록(국고보조금통합관리시스템으로 전자세금계산서검증 결과 수신)	연계-배치	신규
	지출품의목록	화면	수정
	지출품의승인	화면	수정
	통합지출목록	화면	수정
	공공민간(국고보조금) 품의 등록	화면	신규
	공공민간(국고보조금) 품의 등록(공공‧민간 위탁 교부금 대상 선택 팝업)	화면	신규
	공공민간(국고보조금) 품의 통계목선택 팝업	화면	신규
	송금통지수신내역(광역에서 기초로 MI 송신)	연계-온라인	신규
	송금통지수신내역(기초에서 광역으로 부터 MI 수신)	연계-배치	신규
	국고보조금송금통지내역관리	화면	신규
	국고보조금송금통지내역관리 세부사업 팝업	화면	신규
	지출원인행위등록	화면	수정
	지출원인행위승인요청	화면	수정
	원인행위정정등록	화면	수정
	원인행위정정등록(일상경비)	화면	수정
	지출결의요청등록	화면	수정
	지출결의요청등록상세	화면	수정
	반납결의요청등록	화면	수정
	반납결의등록	화면	수정
	지출결의등록상세	화면	수정
	과목경정요청등록	화면	수정
	지급명령등록	화면	수정
	지급명령상세	화면	수정
	지출-지급명령승인	화면	수정
	e-Banking 지급명령승인	화면	수정
	일상경비 지급결의등록	화면	수정
	일상경비 지급결의등록상세	화면	수정
	경비지급명령등록	화면	수정
	경비지급명령상세	화면	수정
	공통팝업-삭제사유입력	화면	수정
	공통팝업-품의거래처정보	화면	수정
	공통팝업-원인행위거래처정보	화면	수정
	공통팝업-정정원인행위목록	화면	수정
	공통팝업-결의거래처정보	화면	수정
	공통팝업-지출결의등록상세	화면	수정
	공통팝업-지급명령거래처정보	화면	수정

비상연락망

소속	성명	직급	전화번호	비고
한국지역정보개발원	권승철	책임	02-2031-9612
기능개선 사업단	조황근	부장	02-725-1357	PM
	이영길	부장	02-725-1358	보조사업관리 PL
	금병찬	부장	02-725-1359	집행관리 PL
	신현무	차장	02-725-1357	DBA
	김태훈	과장	02-725-1357	인프라담당

❍ 운영 기관의 불편을 최소화 하고 시스템 오류사항에 대한 영향력 최소화를 위해 비상운영체계 구축