탈수기동 외벽공사 시행

1. 사유

탈수기동 내진보강(X-BRACE설치)으로 인하여 당초 설치된 셔터를 제거함으로서 탈수기동 외벽(당초 셔터설치)의 단절성을 상실하여 이를 회복하기 위함.

<탈수기동 - 동측면도>

내진보강 X-BRACE :

※ 단절성 필요 사유

① 탈수기동 건물의 외관상 경관 복구

② 내부 악취 및 열기 외부 방출 차단

③ 외부 바람 및 우천 차단으로 건물내부 설비 보호

④ 보행자, 조류 등의 차단으로 건물내부의 청결성 및 보안성 유지

2. 방안

준공(7/2)이 도래함에 따라 공기가 빠른 판넬을 외벽에 설치하여 탈수기동 외부로부터의 단절성을 회복

3. 수량 및 공사비(대략)

- 수량 : 샌드위치패널 설치 58㎡ (4.8x6.0x2개소)

- 공사비 : (샌위위치패널 설치 2,400,000원 + 코킹 640,000원 + 구조용각형강관 560,000원 + 잡철물제작설치 1,930,000원) + 제경비 2,770,000 = 총공사비 8,300,000원