검 토 의 견 서

공   사   명

서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사

기술검토건명

10차공사 발주내역 검토

검 토  기 간

2018.01.22.

관 련  문 서

롯건서지현 제2018-037호(2018.01.22)

작   성   자

책임감리원 이상희(인)

확 인 자

책임감리원 이상희 (인)

1. 검 토 목 적

지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사와 관련 2018년도 10차공사 예산배정에 따라, 계약상대자인 롯데건설(주)로부터 제출된 10차공사 발주내역에 대한 적정수립 여부를 검토하고자 함.

2. 검토내용

가. 공사개요

○ 총 연 장 : 1,390.5m(정거장(1개소):165m / 본선:1,225.5m, 환기구 4개소)

○ 공 사 비 : 159,474,424,000원

○ 공사기간 : 2009. 12. 31 ~ 2018. 12. 31

○ 시 공 사 : 롯데건설(주) 외 1개사

나. 차수별 발주현황                                              (금액단위 : 천원)

구 분	도급금액	공사기간	비 고
총 괄	159,474,424	‘09.12.31~’18.12.31
1차공사	12,200,000	‘09.12.31~’11.12.31	준 공
2차공사	2,300,000	‘11.01.01~’11.12.31	준 공
3차공사	4,500,000	‘11.08.16~’12.02.20	준 공
4차공사	15,291,200	‘12.03.07~’13.02.20	준 공
5차공사	24,054,000	‘13.02.27~’14.01.20	준 공
6차공사	25,800,000	‘14.02.03~’15.03.17	준 공
7차공사	23,500,000	‘15.04.17~’16.05.30	준 공
8차공사	13,380,000	‘16.06.16~’16.12.31	준 공
9차공사	24,812,000	‘17.02.06~’17.12.31	준 공

다. 10차공사 발주내용

○ 도급금액 : 13,637,224,000원

○ 공사기간 : 착공일로부터 ~ 2018. 12. 31

○ 공사구간 :  - 934정거장 구조물 외부출입구(#1~#4) 및 환기덕트(시·종점),

되메우기, 도로복구 등

- 본선개착 되메우기, 도로복구 등

- 본선환기구 구조물 덕트(4개소), 되메우기, 도로복구 등

- 광역상수관 이설공사(수자원공사 위탁)

- 건축분야 : 조적공사 블록쌓기, 금속공사 천정판넬 등

- 기계분야 : 승강설비공사, 스크린도어 설치공사 등

- 전기분야 : 전등·전열공사, 소방배관공사 등

라. 연차별 발주계획                                          (금액단위 : 천원)

총괄공사비	기발주(1~9차)	금회발주(10차)	소 계	장래발주
159,474,424	145,837,200	13,637,224	159,474,424

마. 구간별 공사금액                                               (금액단위 : 천원)

구 분	총괄금액	발주금액			잔여분
		기발주(1~9차)	금 회(10차)	소 계
1. 토 목
1.1 본선개착	11,385,098	10,651,083	734,015	11,385,098
1.2 본선터널	30,395,134	30,395,134		30,395,134
1.3 934 정거장	20,738,716	19,330,624	1,408,092	20,738,716
1.4 본선환기구	16,252,290	15,428,453	823,837	16,252,290
1.5 기타	2,657,925	2,422,810	235,115	2,657,925
소 계	81,429,163	78,228,104	3,201,059	81,429,163
2. 건축	4,254,517	2,680,713	1,573,804	4,254,517
3. 전기(정거장)	3,803,828	3,207,743	596,085	3,803,828
4. 기계설비	10,227,705	7,535,590	2,692,115	10,227,705
소 계	18,286,050	13,424,046	4,862,004	18,286,050
직접공사비 계	99,715,213	91,652,150	8,063,063	99,715,213
간접공사비	29,058,649	26,349,243	2,709,406	29,058,649
소 계	128,773,862	118,001,393	10,772,469	128,773,862
설계비 외	14,681,131	14,120,260	560,871	14,681,131
물가변동(1,2,3회)	14,647,835	13,066,545	1,581,290	14,647,835
광역상수도 이설공사	1,371,596	649,002	722,594	1,371,596
총 공사금액	159,474,424	145,837,200	13,637,224	159,474,424

바. 10차공사 발주물량

① 토 목

구 분	공 종	단위	총물량	발주물량			잔량	비 고
				기발주 (1~9차)	금차(10차)	소 계
본선 개착	되메우기	m3	58,278	43,026	15,252	58,278
	포 장	a	30		30	30		표층
	지장물 복구	m	1,955	615	1,340	1,955
934 정거장	되메우기	m3	46,694	26,683	20,011	46,694
	구 조 물	m3	28,269	26,874	1,395	28,269
	포 장	a	65		65	65		표층
	지장물 복구	m	2,796	1,137	1,659	2,796
본선 환기구	되메우기	m3	43,539	30,644	12,895	43,539
	구 조 물	m3	18,830	18,410	420	18,830
	포 장	a	50		50	50		표층
	지장물 복구	m	1,794	485	1,309	1,794
광역상수관	관로 이설공사	m	542	444	98	542		수자원

② 건 축

구 분	공 종	단위	총물량	발주물량			잔량	비고
				기발주 (1~9차)	금차(10차)	소 계
조적공사	블럭쌓기	m2	5,738	5,683	55	5,738
석 공 사	화강석붙임	m2	5253	2,750	2,503	5,253
	화강석통석	m2	794		794	794
금속공사	금속벽체판넬	m2	4,344	3,500	844	4,344
	유리난간대	m	290	160	130	290
	금속천정판넬	m2	4,895	3,682	1,213	4,895
타일공사	타일붙이기	m2	1,157	165	992	1,157
엘리베이터공사	내부E/V	EA	1		1	1
	외부E/V	EA	4		4	4
안내사인공사		식	1		1	1
미술장식품설치		식	1		1	1

③ 기 계

구 분	공 종	단위	총물량	발주물량			잔량	비고
				기발주 (1~9차)	금차(10차)	소 계
장비설치공사	장비설치공사	대	72	54.8	17.2	72
공조설비공사	공조배관공사	m	904	226	678	904
	공조덕트공사	m	13,727	13,207	520	13,727
	위생배관공사	m	2,364	834	1530	2,364
자동제어공사	자동제어공사	m	4,628	4,628	0	4,628
승강설비공사	승강설비공사	ea	11	3.7	7.3	11
소방설비공사	펌프실배관 공사	m	111	111		111
	스프링클러 배관공사	m	6,408	6,241	167	6,408
스크린도어 설치공사	스크린도어	식	1	0.75	0.25	1
자전거주차장 설비공사	자전거주차장	EA	1		1	1
본선 환기설비공사	환기설비공사	EA	16	13.6	2.4	16

④ 전 기

구 분	공 종	단위	총물량	발주물량			잔량	비고
				기발주 (1~9차)	금차(10차)	소 계
전기실공사	수배전반	면	30	25.2	4.8	30
	전력배선	m	1,849	1,849		1,849
접지공사	접지공사	식	1	1		1
전력간선공사	전력간선배관	m	8,571	8,278	293	8,571
	전력간선배선	m	41,004	40,148	856	41,004
	분전반,MCC	면	59	59		59
동력공사	동력배관	m	3,238	3,238		3,238
	동력배선	m	16,589	16,589		16,589
전등·전열공사	전등·전열배관	m	16,328	15,826	502	16,328		외부출
	전등·전열배선	m	66,823	64,675	2,148	66,823		외부출
	조명기구	EA	1,901	1,232	669	1,901
소방공사	소방배관	m	9,457	8,957	500	9,457
	소방배선	m	37,218	33,923	3,295	37,218

사. 10차공사 관리공정율 및 금액                               (단위 : %, 백만원)

연도별 구 분		‘18.3월		‘18.6월		‘18.9월		‘18.12월
		공정율	금 액	공정율	금 액	공정율	금 액	공정율	금 액
10차	월 별	18.7	2,550	74.5	10,160	3.9	534	2.9	393
	누 계	18.7	2,550	93.2	12,710	97.1	13,244	100.0	13,637
전체	월 별	1.6	2,550	6.4	10,160	0.4	534	0.2	393
	누 계	93.0	148,387	99.4	158,547	99.8	159,081	100.0	159,474

3. 검 토 결 과

상기내용과 같이 지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사의 10차공사 발주내역을 검토한 결과

- 10차공사 설계서는 2018년도 배정된 예산에 대해 적절하게 작성하였으며,

- 10차공사 발주구간의 작업은 토목분야(출입구 및 환기덕트, 되메우기, 도로포장 등), 건축분야(석공사, 판넬설치공사 등), 기계분야(공조설비 및 승강장설비공사 등), 전기분야(전력간선 및 전등·전열조명공사 등)를 시행하여 준공에 차질이 없도록 10차공사 진행코자 함.  끝.

10차공사 발주설계 요약

1. 공사기간 : 착공일로부터 ~ 2018. 12. 31

2. 공 사 비 : 13,637백만원

3. 예산배정 및 발주계획                                              (금액단위 : 천원)

구 분	총괄공사비	기발주(1~9차)	금회발주(10차)	장 래	비 고
도 급 비	159,474,424	145,837,200	13,637,224

4. 구간별 발주금액                                                  (금액단위 : 백만원)

구 분	기시행(9차공사까지)	10차공사	금 액
본선개착	토공굴착(79,575㎥)완료, 되메우기(43,026㎥)	되메우기(15,252㎥) 완료	1,257
	복공판설치(4,536㎡)완료 및 해체(590㎡)	복공판 해체(3,946㎡) 완료
	구조물(7,366㎥) 완료
	기층포장(4a)	기층포장(26a) 및 표층포장(30a) 완료
	지장물 복구(615m)	지장물 복구(1,340m) 완료
934정거장	토공굴착(144,940㎥)완료, 되메우기(26,683㎥)	되메우기(20,011㎥) 완료	2,412
	복공판설치(8,067㎡)완료 및 해체(2,287㎡)	복공판 해체(5,780㎡) 완료
	본체, 외부출입구, 환기덕트 구조물(26,874㎥)	외부출입구 및 환기덕트 등 구조물(1,395㎥) 완료
	기층포장(16a)	기층포장(49a) 및 표층포장(65a) 완료
	지장물 복구(1,137m)	지장물 복구(1,659m) 완료
본선환기구	토공굴착(109,405㎥)완료, 되메우기(30,644㎥)	되메우기(12,895㎥) 완료	1,411
	복공판설치(6,098㎡)완료 및 해체(1,707㎡)	복공판 해체(4,391㎡) 완료
	본체 및 환기덕트 4개소 구조물(18,410㎥)	환기덕트 4개소 구조물(420㎥) 완료
	기층포장(1a)	기층포장(49a) 및 표층포장(50a) 완료
	지장물 복구(485m)	지장물 복구(1,309m) 완료
본선터널	쉴드굴착 1, 2구간 작업공(1,869m) 완료
건 축	조적공사 블럭쌓기(5,683㎡)	조적공사 블럭쌓기(55㎡) 완료	2,341
	석공사 화강석 붙임(2,750㎡)	석공사 화강석 붙임(2,503㎡) 완료
	금속공사 천정판넬(3,682㎡)	금속공사 천정판넬(1,213㎡) 완료
기 계	승강설비공사(3.7ea)	승강설비공사(7.3ea) 완료	3,747
	스크린도어 설치공사(0.75식)	스크린도어 설치공사(0.25식) 완료
	본선환기설비공사(13.6ea)	본선 환기설비공사(2.4ea) 완료
전 기	전등·전열 배선공사(64,675m)	전등·전열 배선공사(2,148m) 완료	882
	전등·전열 조명기구 공사(1,232EA)	전등·전열 조명기구 공사(669EA) 완료
	소방배관공사(8,957m)	소방배관공사(500m) 완료
광역상수관 이설	관로 이설공사(444m)	관로 이설공사(98m) 완료	723
기 타	공사손해보험료, 설계비, 이설비 등	가설공, 이설비, 사용전검사수수료 등 완료	864
계			13,637