검  토  의  견  서

검토건명

천호(G)-2015-106(2015.4.13)

검토자

책임감리원 정 하설

공 사 명

천호대로(광나루역) 확장공사

제    목

실정보고(화강경계석 및 L형측구 관급자재 규격변경) 승인요청

□. 검토사유

□ 천호대로(광나루역)확장공사를 시행함에 있어 화강경계석 표면을 미끄럼방지처리하여 강설시 안전사고를 예방하고, L형측구의 레미콘 강도를 증진시켜 도로시설물 품질향상을 도모하고자 검토함.

□. 검토내용

□ 추진경위

날짜	제 목	주 요 내 용	관련근거
‘13.01.24	보도포장 공사시 자재검수 및 경사도관리 철저	-미끄럼 저항지수 40~50BPN 이상인 제품으로 교체 -화강경계석 표면가공(버너 등)	보호환경개선과-1164
‘14.06.17	도로 L형 측구 품질 향상 방침알림	-도로측구 콘크리트 배합설계기준 강화 등	SMIH-14-29670
'14.07.04	업무(보도공사 시공 철저)지시	-[보도관리 TF구성운영 계획] 및 서울시 [보도공사 설계시공 매뉴얼] 규정준수	SMIH-14-31228

□ 변경 사유

구 분

변 경 사 유

비 고

경계석 규격변경

○강설시 보도상 미끄럼관련 민원(사고)을 예방하기 위하여 미끄럼방지 처리가 된 경계석으로 서울시지침 변경

○서울시 “보도공사 설계시공 매뉴얼” 관련규정 준수지시에 따라 경계석 규격 변경.(규격, 형상, 모따기 등)

○주요변경사항

구 분	당 초	변 경
규 격	-200x250x1000	-200(175+25)x250x1000
형 상	-수직형Ⅱ(직사각형)	-수직형Ⅰ(급경사형)
모 따 기	-30R	-10R
표면처리	-없음	-미끄럼방지처리(40~50BPN)

L형측구 레미콘 규격변경

○L형측구 시공실태 조사분석 결과 하자발생 원인대책으로 콘크리트 배합설계기준 상향 및 현장시공 품질관리 강화 방안에 따라 변경.

○주요변경사항

구 분	당 초	변 경
배합설계	-레미콘 25-18-8	-레미콘 25-24-8
품질시험	-레미콘 150M3마다	-레미콘 100M3마다

□ 화강경계석 상세도

	당 초

	변 경

□ 보도공사 설계시공 매뉴얼

	보차도경계석의 형상

□ 공사량 증·감 대비표

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증·△감	비고
■관급자재
레미콘	25-18-8	m3	475	109	△366
레미콘	25-24-8	m3		374	374
보차도경계석	200x250x1000	ea	2,650		△2,650
보차도경계석	200(175+15)x250x1000,미끄럼방지	ea		2,650	2,650
도로경계석	150x150x1000	ea	3,747		△3,747
도로경계석	150x150x1000,미끄럼방지	ea		3,747	3,747
도로경계석	100x100x1000	ea	1,178		△1,178
도로경계석	100x100x1000,미끄럼방지	ea		1,178	1,178

□ 단가적용 현황

구 분	주 요 내 용	비 고
관급자재	조달청 나라장터 단가적용(레미콘, 경계석)

□ 공사비 증·감 대비표

(금액단위 : 천원)

공 종	당 초	변 경	증 · △감	비 고
· 관급자재
레미콘	24,254	29,315	5,062
경계석	115,373	172,751	57,378
조달수수료	753	1,091	338
관급자재비 계	140,380	203,157	62,777

□. 검토의견

□ 보도포장공사시 잦은 강설 및 결빙으로 인한 보도상 낙상사고 및 민원 급증에 대처하기 위하여 보도블럭 및 경계석 변경지시 지침에 따라 변경 적용함이 바람직하며,

□ 도로 L형측구 품질향상 방안으로 측구 콘크리트 배합설계 기준 강화 방침에 따라 콘크리트의 배합설계를 변경 적용하는 것이 적정할 것으로 판단됨.

검  토  자

천호대로(광나루역)확장공사 외 1개소 전면책임감리용역

책   임   감   리   원     정    하    설  (인)