《공 사 설 명 서》

1. 공 사 명: 이목배수분구(상류) 사각형거 보수보강공사(2공구)

2. 공사목적

콘크리트 열화, 균열, 파손으로 단면손실이 심한 이목배수분구(상류) 사각형거를 정비하여 시설물의 내구성 향상 및 구조적 안전성을 확보하여 주민들의 안전사고를 사전에 예방하고자 함

3. 공사위치 : 사당로9가길 27~남성역 교차로 & 사당로 16다길64~사당로 198간

4. 공사기간 : 착공일로 부터 12월10일까지

5. 공사개요

- 사각형거 보수(□1.2X1.2~□2.5X2.0, 276m)

· 단면보수: A=584㎡

· 부대공 1식

6. 공사금액(천원)

총공사비	도급비	이전비	비 고
225,960	222,120	3,840

7. 공사기간

- 본  공사기간은  착공일로부터 2019.12.10일로하고  공사 기간 중 다음의 경우에 한하여 그 기간을 변경할 수 있다.

가. 공사 시행 중 천재지변으로 인하여 작업이 불가능 하였을 경우

나. 발주처의 지시에 의거 작업을 중단하였을 경우

다. 지장물의 철거 이설 등으로 공사 진행에 현저한 지장이 있을 때

라. 주민의 민원발생으로 공사가 중단될 경우

8. 하자기간 : 준공검사일로부터 7년

9. 예정공정표

기간 공종	공 사 기 간									비 고
	5월		6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1. 보수공
2. 부대공

10. 기타사항

가. 계약당사자는 공사 시행으로 인하여 인명 피해나 안전사고의 발생이 우려되는 장소가 있을 때에는 즉시 위험표시 및 적절한 응급조치를 계약당사자의 부담으로 하고 감독관에게 보고하여야 하며, 안전사고로 인한 민ㆍ형사사건 등이 발생할 경우에는 관련되는 모든 책임을 진다.

나. 공사에 필요한 보안조치는 관계법규에 따라 만전을 기하고 필요한 제반시설을 갖추어야 한다.

다. 공사시공 중에는 인접해 있는 기존구조물 또는 교통시설물 등에 피해를 주지 않도록 필요에 따라 보호 시설을 설치하여야 한다.

라. 토지의 붕괴, 낙반, 가설물이나 건축물의 파손 등 기타 공정 계획에 영향을 미치는  사고나 인명의 손상 또는 제3자에게 피해를 미치는 사고를 일으켰을 때, 혹은 그러한 사고발생의 우려가 있는 사항을 발견하였을 때에는 즉시 응급조치를 취하고 감독관에게 보고하여야 한다.

마. 당 공사현장 근로자에게는 소속 회사명이 표시된 조끼착용 및 명찰을 패용토록 함으로서 책임감 있고, 친절한 행동으로 구민고객으로부터 우리구 공사행정에 신뢰성향상을 위하여 건설현장 근로자 실명제 시행에 만전을 기하여야 한다.

바. 본 공사의 설계물량은 현장 여건 및 공사 진행 상황에 따라 증ㆍ감 될 수 있다.

사. 하수관거 정비공사 품질관리자(품질관리자가 없는 경우 현장 참여기술자중 1인) 및  기능공(하수관거 부설 배관공) 전원은 한국상하수도협회에서 시행하는 하수관거 정비공사 시공 전문기술 교육과정을 이수하여야 하며, 착공시 이수증 사본을 제출하고 공사 시행시 이수증을 소지하여야 한다.

단, 교육기관 일정 등으로 착공전 교육이수가 불가능한 경우 교육이수 계획서를 제출 하고 공사를 시행하여야 하며, 착공 후 3개월 이내에 교육을 이수하여야 한다.

아. 본 공사는 특허 제10********호(에코공법)이 적용되었으며 낙찰자는 해당 공법에 대한 특허 개발사와 특허 사용협약을 체결하고 협약서 원본을 계약전 계약서류와 함께 제출하여야 한다.