서울특별시공고 제2018 – 호

도시계획시설(도로)사업 실시계획(변경)인가를 위한 열람공고

1. 서울특별시고시 제2010-61호(2010.02.25)로 도시계획시설(도로) 결정 및 지형도면 고시되고, 서울특별시고시 제2010-295호(2010.08.19.)로 실시계획인가 고시, 서울특별시고시 제2010-373호(2010.10.28.)로 실시계획(변경)인가 고시, 서울특별시고시 제2013-250호(2013.08.01.)로 실시계획(변경)인가 고시, 서울특별시고시 제2013-296호(2013.09.12.)로 지형도면 고시, 서울특별시공고 제2015-1696호(2015.9.17.)로 실시계획 변경을 위한 열람공고, 서울특별시고시 2015-355호(2015.11.12.)로 실시계획(변경)인가 및 지형도면 고시, 서울특별시고시 제2016-15호(2016.1.14.)로 실시계획(변경)인가 고시, 종로구고시 제2017-156호(2017.12.14.)로 도시계획시설(도로) 결정(변경) 및 지형도면 고시, 서울특별시공고 제2018-1256호(2018.05.24.)로 실시계획(변경)인가를 위한 열람공고된 『율곡로 창경궁 앞 도로구조 개선공사』에 대하여 아래와 같이 변경사항이 발생하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조 및 같은 법 시행령 제97조 규정에 따라 도시계획시설(도로)사업 실시계획(변경)을 인가하고자, 같은 법 제90조, 제96조 및 같은 법 시행령 제99조, 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제21조 및 같은 법 시행령 제11조 규정 등에 따라 열람공고합니다.

2. 본 열람공고 내용에 대하여 의견이 있으신 분은 열람기간 내에 의견서를 열람 장소에 서면으로 제출하시기 바라며, 토지 소유자와 이해관계인 등에게는 개별통지 할 것이나 송달 불능 등 미수령자에 대하여는 본 열람공고로 갈음합니다.

2018년  9월   일

서울특별시장

가. 도시계획시설(도로)사업 변경 계획

1) 사업의 종류 및 명칭(변경없음)

- 종 류 : 도시계획시설(도로)사업

- 명 칭 : 율곡로 창경궁 앞 도로구조 개선공사

2) 사업시행구간(변경없음)

- 서울시 종로구 권농동 8(창덕궁교차로) ~ 종로구 원남동 166(원남동사거리)

3) 사업규모(변경) : 폭 27 ~ 30m, 연장 810m(지차하도 320m)

구분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)
기정	대로	2	6	24∼ 30	주간선 도 로	2,600	안국동 광장	동대문 광장	일반도로	-	서고시 제2010-61호 (2010.02.25.)
변경	대로	2	6	27∼ 30	주간선 도 로	2,600	안국동 광장	동대뭉 광장	일반도로	-		보도면적증가14.7㎡

4) 사업시행자(변경없음)

- 성 명 : 서울특별시장

- 주 소 : 서울특별시 중구 세종대로 110(태평로1가 31)

5) 사업의 기간(변경)

- 기 정 : 실시계획고시일로부터 2017년 12월 31일까지

- 변 경 : 실시계획고시일로부터 2019년 12월 31일까지

6) 사용 또는 수용할 토지·물건·영업권 조서(변경)

- 소유자 및 관계인 일부 변경 및 추가 : [붙임조서]

7) 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 규정에 의한 토지소유자와 이해관계인의 성명·주소(변경)

- 소유자 및 관계인 일부 변경 및 추가 : [붙임조서]

나. 열람기간 및 장소

1) 열람기간 : 공고일로부터 14일간

2) 열람장소 : 서울특별시 도로계획과(☎02-2133-8077)
도시기반시설본부 토목부(☎ 02-3708-2557)

다. 기타 자세한 내용은 서울특별시 도시기반시설본부(☎02-3708-2557)로 문의하시기 바랍니다.