[ 붙임#1 ]

공정관리 활동 평가기준<부서>

분야

평가항목

배점

평가점수 부여기준

사업수행

정도

(5)

목  표

도  달

(정량)

5

□ 연간 부서 사업 목표도달 율

- 부서 당해연도 11월까지의 준공사업/준공계획사업 실적

□ 산출식 : 목표 도달율 =[eqn: {준공건수} over {준공계획건수} TIMES 100](%)

□ 평  점

구 분	100%	99% 미만~ 80% 이상	80% 미만
평 점	5점	3점	1점

사업

수행

여건

(18)

공    사

난 이 도

(정성)

3

[공사 난이도 선정 기준]

<높음> : 3점

⚫ 공사 시행에 따른 대·내외 여건으로 안전한 작업환경, 다양한 작업절차 및 기술적인 시공능력    등이 요구되어 시공여건에 따라 전체 일정에 상당한 영향을 미치는 경우

<보통> : 2.5점

⚫ 공사 시행에 따른 대·내외 여건으로 안전 조치, 보편적인 작업절차와 시공능력 보유 등이 요구   되어 시공여건에 따라 전체 일정에 다소 영향을 미치는 경우

<낮음> : 2점

⚫ 공사 시행에 따른 대·내외 여건으로 안전 조치 및 보편적인 작업절차와 시공능력 보유 등이 요구   되나 시공여건이 전체 일정에 거의 영향이 없는 경우

공사규모 및 공사기간

(정량)

5

1) 해당 공사의 공사규모 정도 : 계약당시 공사금액

□ 평  점

구 분	20억이상	20억 미만~15억 이상	15억 미만~10억 이상	10억 미만~5억 이상	5억 미만
평 점	5점	4점	3점	2점	1점

5

2) 해당 공사의 공사기간 정도 : 계약당시 공사기간

□ 평  점

구 분	2년 이상	2년 미만~1년 6월 이상	1년6월 미만~1년 이상	1년 미만~6월 이상	6월 미만
평 점	5점	4점	3점	2점	1점

공사유형

(정량)

5

□ 해당공사의 공사유형 : 단일 및 복합 공사

- 2종 이상의 공사가 복합된 공사

□ 평  점

구 분	4개 공종 이상	2~3개 공종	단일공종
평 점	5점	4점	3점

사업수행건수

(정량)

7

□ 부서별 평가 대상사업 수행건수

□ 평  점

구 분	20건 이상	20건 미만~15건 이상	15건 미만~10건 이상	10건 미만
평 점	7점	5점	3점	2점

분야

평가항목

배점

평가점수 부여기준

사업

수행

성과

(30)

설계변경

횟    수

(정량)

15

□ 해당공사의 설계변경 정도

□ 평  점

횟 수	0회	1회~2회	3회~4회	5회 이상
평 점	15점	14점	13점	12점

※ 제외사항

- 물가변동금액 및 영세율 변경      - 타 기관 및 타 분야(역무 등)요구에 의한 설계변경

- 선행공사 지연에 따른 설계변경    - 지하 매설물 및 타 기관 요청사항에 의한 설계변경

공 사 비

증 감 률

(정량)

8

□ 산출식 : 공사비증감률 =[eqn: {``□준공금액-최초`계약금액□} over {최초`계약금액} TIMES 100]

※ 물가변동금액 및 영세율 변경 제외

□ 평  점

비 율	0%	0%초과~5%이하	5%초과~10%이하	10%초과~15%이하	15%초과
평 점	8점	7점	6점	5점	4점

공사기간

증 가 율

(정량)

7

□ 산출식 : 공사기간증가율 =[eqn: {실제`공사기간-계약당시`공사기간} over {계약당시`공사기간} TIMES 100]

※ 실제공기(계약 최초 착공일~실제 공사 준공일)

계약공기(계약 최초 착공일~계약 최후 종료일)

□ 평  점

비 율	0%이하	0%초과~5%이하	5%초과~10%이하	10%초과~15%이하	15%초과
평 점	7점	6점	5점	4점	3점

사업

수행

노력

(25)

업무개선

(정성)

10

□ 공사관리 프로세스별 개선 노력

- 효율적인 공사관리를 위한 프로세스(계획-설계-시공-준공) 개선 노력

□ 평  점

등 급	탁 월	우 수	보 통	미흡
평 점	10점	9점~8점	7점~6점	5점

[업무개선]

⚫프로세스 중 주요 개선사항 기술

- 사업계획의 다각적인 검토 개선   - 기존 공법 개선 및 신기술 적용

- 기타 시공성 개선 등

추    진

노 력 도

(정성)

15

□ 공사별 공정관리 업무 수행 추진노력

- 공사의 착공에서 준공까지의 제반 업무수행 노력

□ 평  점

등 급	탁 월	우 수	보 통	미흡
평 점	15점	14점~13점	12~11점	10점

[추진 노력도]

⚫해당공사의 착공단계에서 준공까지 효율적인 사업수행과 공정관리를 위한 주요사항기술    - 공법・비용, 환경, 품질, 자재관리를 위한 노력

- 계획공기와 계획예산 내 집행을 위한 노력

- 민원인, 시공사 등과의 이해관계 해소 노력 등

안전활동

(10)

안전관리

노력도

(정성)

10

□ 공사현장 안전활동 및 안전사고 예방 노력

- 공사의 착공에서 준공 시 까지 공사장의 안전사고 예방활동을 위한 업무수행 노력

□ 평  점

등 급	탁 월	우 수	보 통	미흡
평 점	10점	9점~8점	7점~6점	5점

[추진 노력도]

⚫해당공사의 설계 및 착공부터 준공단계까지 안전관리 관점에서 주요사항 구분 기술

- 안전관리를 위한 기획• 설계단계의 반영 노력

- 안전관리 시설 및 비용집행, 점검, 안전활동 등 안전관리를 위한 노력

평가

기준

-탁 월: 효율적인 사업수행으로 상당한 수준 이상으로 달성한 경우

-우 수: 효율적인 사업수행으로 보통 이상의 수준으로 달성한 경우

-보 통: 통상의 수준으로 사업을 추진한 경우

-미 흡: 사업추진 상 기대 수준에 충족되지 않아 미달한 경우

※ 안전사고 발생 건수: 발주공사의 건의 횟수별 (-)2.0점 감점

기술본부 공정관리활동 자체 평가 보고서(부서)

부서명	000사업소	담당자		확인자	(인)

1. 공사현황

연번	공사명	공사규모(백만원)		공사기간		설계변경			공사유형
소계	(건)	총1)		총2)		총변경 횟수: 건			단독: 건, 복합: 건
1		계약(최초)		기간	00년00월	물량변경[백만원]	증		복합공사	주공정
		변경(최종)		계약 기간	‘00.00.00~ ‘00.00.00
							감			부대공정
		준공금액		준공 기간	‘00.00.00~ ‘00.00.00
						물가변동[백만원]			단독공사	해당공종
		금액차		기간차	+00년00월
2		계약(최초)		기간	00년00월	물량변경[백만원]	증		복합공사	주공정
		변경(최종)		계약 기간	‘00.00.00~ ‘00.00.00
							감			부대공정
		준공금액		준공 기간	‘00.00.00~ ‘00.00.00
						물가변동[백만원]			단독공사	해당공종
		금액차		기간차	+00년00월

1), 2) 공사규모의 총 금액은 준공금액 기준 합산 및 공사기간은 준공기간 합산 산출 적용

2. 자체부서평가표(부서)

구 분	배점기준			소계	공사(1)	공사(2)	공사(3)	공사(4)	공사(5)	․ ․ ․․ ․ ․
계	100				0	0	0	0	0
사업수행 여건정도	5	목표도달	5
사업수행여건	18	공사난이도	2
		공사규모	2
		공사기간	2
		공사유형	5
		사업수행건수	7
사업수행성과	30	설계변경횟수	15
		공사비증감율	8
		공사기간증가율	7
사업수행노력	25	업무개선노력도	10
		추진노력도	15
안전활동	10	안전관리노력도	10

※ 평가대상 사업 : 해당 소속부서에서 시행한 공사 대상

3. 공정관리활동 실적(부서)

▮ 사업수행 여건/공사난이도(3)

○ 대•내외적 여건 - - - ○ 작업환경 여건 및 공기영향 연계성 - - - ○ 공법, 전문시공능력 필요성 등 - - -
평가점수(3)	높음		보통		낮음

▮ 사업수행노력/업무개선(10)

○ 공 사 명 : 【업무개선】 [프로세스 개선 노력] - - [추진 노력] - ○ 효과 및 결론 -
평가점수	탁월		우수		보통		미흡

▮ 사업수행노력/추진 노력도(15)

○ 공 사 명 : 【추진노력】 [공정관리 업무수행 사항] - - [추진 사항] - ○ 효과 및 결론 -
평가점수	탁월		우수		보통		미흡

▮ 안전활동/안전관리 노력도(10)

○ 공 사 명 : ○ 안전관리활동 실적 - - - ○ 효과 및 결론 -
평가점수	탁월		우수		보통		미흡

※ 공정관리 활동 실적(부서) 작성은 부서별 전체 공사에 대한 우수실적을 주요내용으로 작성하며, 전체 2~4페이지 이내에서 작성하시고 추가 작성하시더라도 4페이지 이상 추가분 미반영.

5. 평가 참고자료(부서)

◯ 부진사업 현황(‘18.11.30일 까지 작성)
공사명	부진사유	비고

◯ 공사비 증감사유
공사명	증․감액(백만원)	증․감 사유

◯ 공사기간 증감사유
공사명	증․감 기간(일)	증․감사유

◯ 설계변경 사유
공사명	설계변경(회)	변경사유

◯ 인․허가 사항
공사명	인허가 기관	인허가내용

자체 경영평가 대비 부서별 평가 산정안

순위	부서	경영평가 점수	비 고
1		100
2		99.7
3		99.3
4		99.0
5		98.7
6		98.3
7		98.0
8		97.7
9		97.3
10		97.0
11		96.7
12		96.3
13		96.0
14		95.7
15		95.3
16		95.0
17		94.7
18		94.3
19		94.0

※ 자체 경영평가 점수 반영시 주요 사업관리 대상이 없는 부서는 평가 순위 제외.