■ 건설기술 진흥법 시행규칙 [별지 제27-1호서식]

(앞쪽)

서울특별시 도시기반시설본부

수신자  한국건설기술관리협회

(경유)

제 목  시공단계의 건설사업관리계획 [○]수립, [  ]변경 통보

「건설기술 진흥법」제39조의2 제4항, 「건설기술 진흥법 시행령」제59조의2, 「건설기술 진흥법 시행규칙」34조의2에 따라 건설사업관리계획을 아래와 같이 (수립 , 변경)통보합니다.

1. 공사현황

공사명

동부간선도로(창동~상계구간) 지하차도 건설공사

발주청

서울특별시(도시기반시설본부)

대표전화

02-3708-2579

①사업규모

지하차도 1356m(Box 835m, U타입 521m)

② 공 종

토목

사업위치

서울시 강남구 영동대로 코엑스 교차로 ~ 삼성역 교차로

③ 총공사비

156,808백만원(관급자재비 17,824백만원 포함)

공사기간

2020. 08. ~ 2025. 08.

2. 건설사업관리계획

④ 건설사업

관리방식

［○］시공단계의 감독 권한대행 등 건설사업관리 (☑ 의무, □ 임의, □ 전체, □ 부분)］

［  ］건설사업관리                          ［  ］직접감독

［○］단일건설공사 건설사업관리 ［  ］통합 건설사업관리(0개 공구)

용역명

동부간선도로(창동~상계구간) 지하차도 건설공사 감독권한대행 등 건설사업 관리용역

용역기간

2020.08. ~ 2025.10.

⑤ 배치계획 및 업무범위

· 건설사업관리기술인 :  548.31인·일(고급기준)         · 공사감독자 :          인·일

［  ］대가기준 기본업무 준수      ［○］대가기준 기본업무 조정

⑥ 용역비

산출내역

(부가세 별도)

직접인건비

3,416,171,331원

직접경비

603,402,276원

제경비

4,771,037,990원(110%)

(직접인건비의 110~120%)

기술료

1,434,470,201원

(직접인건비+제경비의 20%)

손해배상보험료

78,900,000원

추가업무비용

-

합  계

10,219,770,000원 (총 공사비의 6.5%)

입찰방식

［  ］기술·가격분리입찰방식  ［  ］지명경쟁입찰방식   ［  ］제한경쟁입찰방식

［○］공개경쟁입찰방식       ［  ］수의계약           ［  ］기타(       )

입찰 예정 일자

2020. 7.

선정방식

［  ］PQ평가  ［○］기술인평가  ［  ］기술제안서평가  ［  ］종합심사낙찰제［  ］기타(            )

기술자문

심    의

［  ］심의 (□ 적정    □ 조건부 적정    □ 부적정  /  심의일자 :     .    .    )   ［  ］제외

용역평가

［○］대상 (시행 예정 시기 : 2023. 11.   )      ［  ］제외

3. 변경내용

변경구분

변경일자

변경 전

변경 후

붙임서류 : 사업특성 및 발주청 역량평가 기준 1부.  끝.

서울특별시 도시기반시설본부장	직인

기안자  직위(직급) 서명

검토자  직위(직급)서명

결재권자  직위 (직급)서명

협조자

시행

처리과-일련번호(시행일자)

접수

처리과명-일련번호(접수일자)

우

주소

/

홈페이지 주소

전화(  )

전송(  )

/

기안자의 공식전자우편주소

/

공개구분

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

(뒤쪽)

작성방법

1. 건설사업관리방식(④)이 감독 권한대행 등 건설사업관리, 건설사업관리인 경우에는 해당 서식 전체를 기재하고, 직접감독인 경우에는 “1. 공사현황, ⑤란의 공사감독자 인․월수, 기술자문 심의”란만 기재합니다.

2. 1. 공사현황 항목 및 ⑥용역비 산출내역 작성 시 전기·통신·소방 등의 건설공사가 아닌 부분은 제외하고 산정하여 기재하고, 시공사는 선정되지 않은 경우 기재하지 않는 것이 가능합니다.

3. ①란의 사업규모 기재 예시

- 도로: 확장 및 포장(  )km, 폭(  )m              - 교량: 길이(  )m, 폭(  )m, 교량형식 등

- 공동주택: (  )세대, 연면적(  )㎡, 층수(  )층     - 건축물: 연면적(  )㎡, 층수(  )층

4. ②란의 공종은 「건설기술 진흥법 시행령」 별표 1 제5호에 따른 건설기술인의 등급 및 경력인정 등에 관한 국토교통부장관의 고시에서 인정되는 건설공사의 종류(대분류) 중 해당 종류를 기재합니다.

5. ③란의 총공사비는 관급자재비를 포함하되, 토지 등의 취득·사용에 따른 보상비는 제외한 일체의 공사비로 공사계약 체결 이전의 예정금액(계약금액이 변경된 경우에는 낙찰률로 환산한 예정금액)을 기재합니다.

6. ④란의 건설사업관리방식은 감독권한 대행 등 건설사업관리, 건설사업관리, 직접감독 중 종류를 선택하고, 해당 용역에 포함되는 업무범위 전체를 선택합니다.

7. ⑤란의 배치계획 및 업무범위 작성 시 별지 제27-1호서식 별첨 1을 반드시 포함하여 작성하고, 시공단계의 기본업무를 전부 적용할 경우 기본업무 준수를 선택하고, 일부 제외하는 경우 기본업무 조정을 선택합니다.

8. 변경내용 통보 시에는 용역명과 변경된 항목만 기재하고, 변경사항은 3. 변경내용의 변경 후 내용과 일치해야 합니다.

9. 공사기간, 용역기간, 기술자문위원회 심의일자, 용역평가 시기 등은 반드시 날짜를 기재합니다. 다만, 용역평가 시기는 용역기간 등을 감안하여 년·월까지만 기재합니다.

10. 기재란이 부족할 경우에는 별지를 사용하시기 바랍니다.

■ [별지 제27-1호서식 별첨 1] 건설사업관리 배치계획 및 업무범위

(앞쪽)

건설사업관리 배치계획 및 업무범위 현황

※ 인원수 : 인·일 기준

업무분류체계			적용 수량 단위	적용 수량	기준인원수 (인.일)	보정계수			난이도	투입인원수(고급)
단계	기본업무				고급	a(일반국도)	b(신설)	c(도시부)		인.일	인.월
공통업무	과업착수준비		식	1	7.0	1	1	1	1	7.00	0.30
	건설사업관리 업무수행계획서 작성		식	1	20.5	1	1	1	1	20.50	0.90
	건설사업관리 절차서 작성.운영		식	1	27.3	1	1	1	1	27.30	1.20
	작업분류체계및사업번호체계관리, 사업정보축적.관리		식	1	22.3	1	1	1	1	22.30	1.00
	사업정보관리시스템의운영 (PMIS적용시시스템운영자에대한업무)		운영일수	0	0.3	1.000	1	1	1.681	0.00	0.00
	클레임 사전분석		식	1	31.0	1	1	1	1	31.00	1.40
	최종건설사업 관리보고	1)시공전 단계	식	0	27.3	1	1	1	1	0.00	0.00
		2)시공 이후 단계		1	54.6	1	1	1	1	54.60	2.50
	소 계									162.70	7.30
시공단계	공사착수		식	1	107.7	1	1	1	1	107.70	4.90
	시공성과확인및적정성검토(공사개월×22일)		공사일수	1320	2.2	1.000	1.00	1	1.241	3603.90	163.80
	사용자재의 적정성 검토		공사개월	60	1.8	1	1	1	1.241	134.00	6.10
	품질시험 및 성과검토		공사개월	60	11.0	1	1.00	1	1.241	819.10	37.20
	시공계획검토		공사개월	60	6.4	1.000	1.00	1	1.241	476.50	21.70
	기술검토 및 교육		공사개월	60	5.0	1	1.00	1	1.241	372.30	16.90
	공정관리		공사개월	60	8.2	1	1	1	1.241	610.60	27.80
	안전관리		공사개월	60	10.5		1.00	1.100	1.241	0.00	0.00
	환경관리		공사개월	60	2.6	1	1	1	1.241	193.60	8.80
	설계변경 관리		공사개월	60	13.4	1	1	1	1.241	997.80	45.40
	기성검사		회	19	5.2	1	1	1	1	98.80	4.50
	준공검사		식	1	6.0	1	1	1	1	6.00	0.30
	계약자간 시공인터페이스 조정		공사개월	60	1.5	1	1	1	1	90.00	4.10
	하도급타당성검토		공사년수	5	6.9	1	1	1	1.241	42.80	1.90
	시공단계의 예산검증 및 지원(1년-1회)		회	1	4.6	1	1	1	1	4.60	0.20
	일반행정업무(용역개월×22일)		용역일수	1364	0.8	1	1	1	1.241	1354.20	61.60
	소 계									8911.90	405.20
시공후단계	종합시운전계획의 검토 및 시운전 확인		개월	1	23.3	1	1	1	1	23.30	1.10
	시설물 유지관리지침서 검토		식	1	25.9	1	1	1	1	25.90	1.20
	시설물 유지관리 업체 선정		식	0	20.8	1	1	1	1	0.00	0.00
	시설물의인수.인계계획검토 및관련업무지원		식	1	27.4	1	1	1	1	27.40	1.20
	소 계									76.60	3.50
	총 계									9151.20	416.00

(앞쪽)

사업특성 및 발주청 역량 평가기준

□ 평가 점수(공사명)

구 분	평가내용	배 점	점 수	기 타
1	공사특성	30	30
2	공사수행방식	15	15
3	사업여건	25	25
4	발주청 역량	30	22
합 계		100	92

□ 공사특성 (30점)

구분		점수	계
공종 난이도 (15점)	「건설기술 진흥법」 제39조제1항제1호에 규정된 설계ㆍ시공 관리의 난이도가 높아 특별한 관리가 필요한 건설공사 또는「건설기술용역 대가 등에 관한 기준」의 공종분류 상 복잡한 공종	15	15
	「건설기술 진흥법」 제39조제1항제1호에 규정된 공사 외의 공사로「건설기술용역 대가 등에 관한 기준」의 공종분류 상 보통의 공종 공사	10
	상기 외의 공사	5
공사 난이도 (15점)	「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 상의 시설물 분류 중 1종에 해당하는 공사	15	15
	「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 상의 시설물 분류 중 2종에 해당하는 공사	10
	상기 외의 공사	5

□ 사업여건 (25점)

구분		점수	계
사업규모 (10점)	총 공사비 500억 원 이상	10	10
	총 공사비 200억 원 이상 500억원 미만	8
	총 공사비 100억 원 이상 200억원 미만	6
	총 공사비 100억 원 미만	4
사업기간 (5점)	공사기간 3년 이상	5	5
	공사기간 1년 이상 3년 미만	3
	공사기간 1년 미만	1
민원발생 가능성 (5점)	민원발생 가능성이 높다	5	5
	민원발생 가능성이 통상적인 수준이다	3
	민원발생 가능성이 낮다	1
유사사업 경험 (5점)	가용인력이 최근 5년간 수행경험 없음	5	5
	가용인력이 최근 5년간 5건 미만 수행	3
	가용인력이 최근 5년간 5건 이상 수행	1

□ 공사수행방식 (15점)

구분	점수	계
기술제안입찰방식, 대안입찰방식을 적용하는 공사, 설계경기를 적용하여 설계의 중요성이 강조된 공사, 국제설계경기를 적용하여 설계단계에서 외국사 또는 외국사와 공동도급업체가 참여할 수 있는 공사	15	15
기타 공사	10
설계․시공일괄입찰방식을 적용하는 공사	5

□ 발주청 역량 (30점)

구분		점수	계
인력 수 (20점)	가용인력이 ‘건설사업관리기술인 배치기준’에 따라 산출한 소요인력의 70% 미만	20	15
	가용인력이 ‘건설사업관리기술인 배치기준’에 따라 산출한 소요인력의 70% 이상, 90% 미만	15
	가용인력이 ‘건설사업관리기술인 배치기준’에 따라 산출한 소요인력의 90% 이상	10
경력 (10점)	가용인력의 관련업무 평균 실무경력이 12년 미만	10	7
	가용인력의 관련업무 평균 실무경력이 12년 이상, 15년 미만	7
	가용인력의 관련업무 평균 실무경력이 15년 이상	3

[비고]

1. 발주청의 가용인력 및 경력 산정 시, 해당 직무분야 기술사 자격을 보유한 인력에 대하여는 20%를 가산한다.

2. 발주청의 사업관리 가용인력은 건축, 토목, 기계 등 기술직 중 사업발주 및 사업관리업무를 수행하는 부서 근무자를 대상으로 산정하되, 보직자와 일반 서무담당자 등 일반 관리자는 제외한다.

* ｢건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침｣ 제2장 건설공사 사업관리방식 검토기준 참고