<서식 1>

사고이월 사업별명세서

○ 사업명 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사	생산부장	구 자 훈 (인)
○ 공사기간 : 2015. 11. 27. ～ 2016. 11. 26.	생산관리과장	한 희 선 (인)
	작 성 자	직 시설7급 성명 신왕근(인)
	예산담당(생산부)	직 행정7급 성명 이경선(인)

○ 예산과목(사업코드 : 12103)

(관)자본적지출 (항)유형자산취득 (세항)구축물 (목)시설비및부대비 (세목)시설비

(단위 : 천원)

예산현액	배정일자	배정액	구 분		지출원인행위액		지 출 액		사고이월액
7,065,607	’16.01.	5,885,813	계		5,500,947		4,580,187		920,760 ( 0 )
			공 사 비		5,500,947		4,580,187		920,760
				도 급 비		2,919,495		2,861,533		57,962
				관 급 비		2,581,452		1,718,654		862,798
			보 상 비		0		0		0
			이전비․기타		0		0		0

○ 이월사유 (육하원칙에 의거 구체적으로 기술)

- 토목·기계공사 중  사업부지 관련 부서(서울숲관리사무소) 등 유관기관과의 업무       협의 지연, 사토장 선정 지연, 지하장애물 추가 발생, PHC 파일 수급불균형에       의한 자재 수급 지연 등에 따른 많은 시일 소요됨에 따라 토목·기계공사 준       공기간이 연기되어 준공기간(2015.1127.∼2017.06.30)에 맞추어 예산 이월

- 토목·기계공사와 동시에 진행되는 공사 및 용역의 준공기간을 연기하고 준공기간에       맞추어 예산 이월

○ 착공연월일 : 2015. 11. 27.

○ 최초 준공연월일 : 2016. 11. 26.

○ 최종 준공연월일 : 2017. 06. 30.

첨부 : 관급자재 구매액 일자별 현황 양식 1부. 끝.

관급자재 구매액 일자별 현황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 사 업 명 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사

(단위 : 원)

일 자 별	구 매 액	비 고 (구매내용)
계	2,581,452,100
2016.02.25	254,705,000	PHC파일 구매
02.26	52,136,570	아스팔트콘크리트 구매
03.25	429,324,330	이형봉강 구매
03.28	318,495,090	레미콘 구매
02.26	922,690,000	슬러지수집기
04.11	44,436,930	슬러지이송펌프
04.22	398,621,180	감시제어시스템 제작구매설치
05.10	58,050,000	전동기제어반 제작구매 설치
05.27	13,817,000	LED보안등 설치 구매
05.13	89,176,000	CCTV설비 구매