15. 하남선(5호선연장) 건설

도시철도토목부(772-7241)	부장 : 한 동 근/ 과장 : 명 경 출 / 담당 : 성 원 배

사업구분	■ 핵심사업 □ 주요사업	4대도시 분류	안전도시

전략목표 (성과목표)	서울시	사람이 우선하는 편리한 서울교통
	실․본부․국	철저한 공정관리로 차질없는 광역철도 건설
	과․담당관	철저한 공정관리로 차질없는 광역철도 건설
KPI 와 최종 목표치		핵심성과지표 (KPI)	실적치		목표치
			2013년	2014년	2015년	2016년
		하남선(5호선연장) 건설 공정률	-	-	7	30
업무 프로세스		①기본계획변경(안)수립【건교부 기본계획검토→15개 관계부처 협의→중앙도시교통정책심의위원회심의→도시철도기본계획고시】→ ②일괄입찰 공사발주【입찰방법결정→입찰안내서 작성 및 심의】→③기본설계 및 1차공사 실시설계→④기본설계적격심의→ ⑤실시설계적격자 선정→⑥1차분공사계약 및 착공(‘10.02)→⑦실시설계→⑧실시설계적격심의→⑨본공사계약 및 착공→⑩공사완료
협력체계 (파트너십)	내 부	기술심사담당관(건설기술심의), 하천관리과(하천심의)
	자치구	강동구(업무협조)
	외 부	국토해양부, 기획재정부, 행정자치부, 환경부, 산업자원부, 소방방재청, 한국철도공사, 국토연구원, 한국교통연구원, 한국철도기술연구원, 경찰청, 한국도로공사

□ 사업목적

○ 지하철 5호선 상일동역에서 강일지구, 하남미사지구 등을 경유하는 도시철도망을 연장 구축으로 광역교통 수요에 능동적으로 대처하여 주민의 교통편의 제공

○ 환경친화적인 교통인프라 구축으로 지역발전 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2015. 3. ～ 2019. 3

○ 구    간 : 서울시 강동구 상일동역~서울외곽순환고속도로~동광교회 앞

○ 규    모 : 본선 연장 1.1km, 정거장 1개소, 차량기지 입․출고선 연장 1.36km

○ 추진내용

- ′15.03.11  : 건설공사 개찰

- ′15.03.     : 건설공사 계약 및 착수

○ 총사업비 : 153,310백만원

□ 홍보계획

○ ′15.03  : 하남선(5호선연장) 건설공사 발주(토목,건축 등) 언론보도

○  분기별 홍보(6, 9, 12월)

- 홍보수단 : 사업소식지 배포, 설명회 실시 등

-  홍보대상 : 강동구청, 지역 국회의원, 시‧구의원, 주민대표 등

□ 세부추진계획

구분	공사명	2015년 목표	1/4	2/4	3/4	4/4
건설공사	하남선(5호선연장) 건설	7%	0%	1%	4%	7%

○ 사업비 집행계획(2015년) : 33,560백만원

(단위 : 백만원)

연번	세 부 사 업 명	계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	하남선(5호선연장) 건설	33,560	-	8,400	10,080	15,080

□ 월별 추진계획

추진월	추진계획	계획(%)	실적(%)
1월
2월
3월	- 계약 및 착수	0	0
4월	- 인.허가	0
5월	- 현장사무실설치 - 환경시설물설치	1
6월	- 현장사무실설치 - 환경시설물설치	1
7월	- 환경시설물설치 - 줄파기	2
8월	- 줄파기 및 가시설	3
9월	- 줄파기 및 가시설	4
10월	- 줄파기 및 가시설 차수그라우팅	5
11월	- 줄파기 및 가시설, 차수그라우팅, 주형보	6
12월	- 줄파기 및 가시설, 차수그라우팅, 주형보	7