위례선 도시철도 건설사업

1-1. 트램 추진경과, 향후계획

□ 사업개요

○ 위    치 : 마천역∼복정역, 남위례역

○ 규    모 : 트램건설 5.4km, 정거장 12개소, 차량기지 1개소

○ 사업기간 : '19. 8. ~ '25. 9.

○ 총사업비 : 2,614억원 [LH(75%)·SH(25%) 전액부담]

□ 추진경과

○ ’08. 3. : 위례신도시 광역교통개선대책 확정(국토부) - 트램 신설(민자)

- 트램 도입, 연장 6.0km, 사업비 3,200억원(LH:민간=50:50), 2013년 시행

○ ’14. 5.12.: 위례신도시 광역교통개선대책 변경안 확정(국토부)

- 지선 확정, 연장 5.44km, 사업비 1,800억원(LH:민간=60:40), 2021년 시행

○ ’15. 6.30.: 「서울시 10개년 도시철도망 구축계획 변경」승인(국토부)

○ ’15. 7. : 민자사업 제안 (두산건설)

○ ’18. 6.27.: 공공주도사업 추진 합의(국토부, 서울시)

○ ’19. 5.28.: 업무협약 체결(국토교통부, 서울특별시, 경기도, 송파구, 성남시, LH, SH)

○ ’19. 7. 1.: 중앙투자심사 완료(행정안전부)

○ ’20. 9.: 위례신도시 광역교통개선대책 변경(국토부)

- 사업비 2,640억원(LH‧SH 부담), 2021년 시행, 시행주체 : 민자→서울시

○ ’20.10.29.: 위례선 기본계획 승인(국토부)

○ ’21. 5.13.: 공사(설계) 입찰공고(조달청)

○ ’21.12.13.: 차량제작사 선정

○ ’21.12.30.: 우선시공분 공사 착수

- 공사기간: ’21.12.30.~’22.12.24.(360일), 우선시공분: 5,000백만원

○ ’22. 6.13.: 실시설계 완료

○ ’22. 7.12.: 사업계획승인 신청(시→국토부)

○ ’22.11.28.: 사업계획 승인

□ 향후계획

○ ’22.12.5.: 차량기지 가시설공사 시작

- ‘22.12.1~4 : 공사용 강재 및 항타장비 반입(조립)

○ ’24.12.: 토목공사 완료

○ ’25. 1.~9.: 종합시험운전

○ ’25. 9.: 개통